구산1배수분구 하수관로 종합정비사업

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 배 원 영(☎ 2133-3796)

□ 사업부서 : 은평구청 안전치수과

□ 사업개요

○ 위    치 : 은평구 갈현동, 구산동 일대(A=118.90ha)

○ 규    모 : 관로정비 총연장 13,138m 중 8,599m(14년도 4,539m)

○ 총사업비 : 18,715백만원(14년 5,678 시설비 5,416 감리비 262)

○ 사업기간 : 2011년 10월 ~ 2014년 12월

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 98.11 ~ 01.09 : 서울시 하수관로 조사 및 하수정비 기본설계(불광천 배수구역)

○ 10.04 ~ 11.07 : 실시설계 용역 시행

○ 11.10 ~ 12.12 : 1, 2차공사 시행

○ 13.02 ~ 13.12 : 3차공사 시행

○ 14.02 ~ 14.12 : 4차공사 완료(장기계속공사 완료)

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		소 계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계		5,678,000		5,678,000	-
	설계비			-	-	▸4,539m×1,184천원=5,375백만원 ▸기타 1식×41백만원=41백만원
	공사비	5,416,000		5,416,000	-
감 리 비		262,000		262,000	-	▸전면책임감리(L=4,539m)

□ 배정사유

○ 노후 불량 하수관로를 정비하여 수해 예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진 되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치