시흥저지배수분구 하수관로 종합정비

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 신 중 선(☎ 2133-3795)

□ 사업부서 : 금천구 안전치수과

□ 사업개요

○ 위   치 : 금천구 시흥1동, 시흥3동 일대

○ 규   모 : 관로정비 총연장 8.744km (’14년 2.193km)

○ 총사업비 : 19,088백만원 (14년 5,000백만원, 시설비 : 4,730, 감리비 : 270)

○ 사업기간 : 2013. 10월 ~ 2016. 12월

□ 추진현황 및 향후계획

○ ′96.    ~    ′01 : 서울시 하수관로 조사 및 하수정비 기본설계

○ ′12. 04 ~ ′13. 06 : 실시설계용역 시행

○ ′13. 10 ~ ′14. 02 : 1차 공사시행

○ ′14. 03 ~ ′16. 12 : 잔여물량 공사 시행 (장기계속공사 시행)

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계	5,000,000	-	5,000,000	-
시설비 (공사비)	4,730,000	-	4,730,000	-	∘ 하수관 개량 (금회) 2,193m×2,111천원=4,629,000 ∘ 기타 1식×101백만원=101,000
감리비	270,000	-	270,000	-	∘ 전면책임감리 (L=2,193m)

□ 예산 배정요구 사유

○ 노후 불량 하수관로를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치