문서번호	자원순환과-3256
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	03/03 최홍식
협조

자원회수시설 운영효율 향상을 위한

소통행사 개최결과 보고

2014. 2.

자원순환과

자원회수시설 운영효율 향상을 위한

소통행사 개최결과 보고

자원회수시설의 운영효율 향상을 도모하기 위해 2014년 1/4분기  소통행사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

행사 개요

○ 일  시 :  2014. 2. 25(화) 10:00 ~ 19:30

○ 장  소 :  노원자원회수시설 회의실

○ 참석자 :  총 40명

- 서울시 : 6명(자원회수시설팀장, 시설담당)

- 운영사 : 20명(4개시설 소장, 팀장등 4명)

- 협의체 : 14명(노원주민지원협의체 위원 및 사무요원)

진행순서

○ 10:00~11:20 : 노원자원회수시설 대정비계획 등 운영현황 설명

○ 11:20~12:00 : ‘13년 실적 및 ’14년 시 현안사항 설명

○ 12:00~13:00 : 소통행사 참가자 중식

○ 13:00~17:00 : 각 시설별 ‘13년 실적 ‘14년 현안사항 설명 및 논의

○ 17:30~19:30 : 소통 및 화합의 시간

주요 논의 사항

□ ‘14년 노원주민지원협의체에 대한 노원 대정비 계획 설명

○ 대정비 기간 : 2014.3.24.~6.20(70일)

- 각 호기 순차 정비 (60일), 공통설비 정비 (10일)

○ 대정비시 생활폐기물 반입중지 : 3.24~4.22(30일)

- 사유 : 대정비시 쓰레기 저장조 청소 및 정비

- 조치 : 각 구 발생 쓰레기는 수도권매립지로 반입

□ 2013년도 자원회수시설 운영실적

○ 2013년 자원회수시설 가동 실적

- 안정적인 반입기반 구축과 적정 운전을 통해 최적 가동률 유지

권 역 (시설명)	반입량 (톤/년)	소각량 (톤/년)	소각재처리량(톤/년)		시설용량 (톤/일)	소각량 (톤/일)	가동률 (%)
			바닥재	비산재
계	773,843	776,201	110,347	26,129	2,850	2,446	85.8
양 천	108,206	106,628	15,466	4,701	400	339	84.7
노 원	195,000	199,254	27,899	3,691	800	638	79.7
강 남	266,712	266,074	35,466	11,639	900	826	91.8
마 포	203,925	204,245	31,516	6,098	750	643	85.7

※ 가동율:'06년(33%)⇒'07년(53%)⇒'10년(82%)⇒'11년(82%)⇒'12년(85%)⇒'13년(85.8%)

○ 다이옥신 분석 현황 (2013년)

구 분	소각로 (기)	법적기준 (ng-TEQ/N㎥)	법적검사결과 (ng-TEQ/N㎥)
계	10	0.1	0.000~0.007
양 천	2	0.1	0.000~0.003
노 원	2	0.1	0.000~0.000
강 남	3	0.1	0.000~0.001
마 포	3	0.1	0.000~0.007

※ 다이옥신은 6개월마다 측정결과 법적 기준치를 충분히 만족하고 있음

□ 2014년 자원회수시설 운영 계획

○ 반입량 : 각 시설 전년도와 비슷한 수준으로 예상됨

○ 소각량 : 각 시설 전년도와 비슷한 수준으로 예상됨

○ 다이옥신농도 관리 : 대기 및 수질 배출허용 기준 이내 관리

□ 2014년 대정비 및 민간대행사업 등 예방정비 방안

○ 시설별 정비 계획

구분	대정비	소정비	비고
양천자원	‘14.09.15.~10.15(31일)	‘14.04.17.~04.30(14일)
노원자원	‘14.03.24.~6.20.(70일)	‘14.10.01.~10.15.(15일)
강남자원	14.09.14.~11.07(55일)	-
마포자원	‘14.04.15.~05.20(36일)	‘14.11.01.~11.15(15일)

○ 민간 위탁 및 민간대행사업

- 비정산비 : 위탁운영 협약시 제시한 내용을 준수

- 정산비 : 각 시설 연간예산예산 규모에 맞추어 자체 연간집행계획 수립

- 민간대행사업비 : 2014년 대정비에 맞추어 집행 준비

□ 2014년 온실가스 절감 방안

○ 각 시설 자체 에너지 사용량 절감

○ 저전력 조명등 교체로 전기에너지 절감

□ 자원회수시설 현안사항 추진

○ 저전력 조명등 교체사업 추진

○ 공정안정관리(PSM) 컨설팅 용역 방안 검토

- 그간 외부기관 공정안전관리 점검시 지적사례가 있고

- 각 시설 공정안전관리에 대해 컨설팅 추진 필요성 있음

○ 태양광 발전설비 유지관리 철저(노원, 마포)

○ 연휴기간 4일이상 유지시 쓰레기 반입일 지정 협의

- 연휴 마지막날 쓰레기 반입 : 각 시설 협의체와 적극 협의

○ 반입시간 조정

- 양천 : 시설과 APT가 인접되어 반입시 야간소음(차량)으로 민원 발생․협의체의 반대 예상 및 위치적으로 어려움

- 노원 : 반입시간 조정은 위치적으로는 가능하나 협의체 및 구청간의 조정 필요

․ 당초 반입시간 : 04:00 ~ 12:00(심야근로시간 : 2시간)

․ 변경 반입시간 : 24:00 ~ 08:00(심야근로시간 : 6시간)

․ 주민감시원의 야간수당 추가 소요비용 발생(4시간)

※ 급여(인당) : 1,629천원⇒1,905천원  증 405천원

전체(6명) : 월 2,433천원, 년간 29,203천원 증가요인발생

소요예산

○ 소요경비 : 금627,000원

- 중․석식 및 다과 : 627,000원

- 예산과목 : 자원순환과, 안정적인폐기물처리, 자원회수시설 운영효율화, 행사실비보상금(100-301-01).

행정사항

○ 소통행사 결과 논의 및 추진사항 운영사 통보

- 각 시설 대정비 및 예방정비 추진 철저

- ‘14년 정산비 및 민간대행사업은 예산에 맞추어 적기에 정비

- ‘14년 온실가스 절감 목표 달성 방안 강구 보고

○ 참여자 개인 학습시간 인정 : 4시간.

- 대상 : 자원회수시설팀장 정연구, 유영춘, 김필동, 정인수, 박경리, 박재균.  끝.