경의선숲길 공원조성

	정책주요내용
경의선(옛 용산선) 지상구간 공원으로 용산공원 ~ 월드컵공원 ~ 한강을 연결함으로써, 서울 서북부의 녹지축을 조성하여 그동안 철도운행으로 단절된 지역 간의 소통 · 화합의 장과 시민의 쾌적한 녹지 및 문화 휴식처를 제공하고자 함.

□ 추진개요

○ 위    치 : 경의선 지상부(용산문화체육센터~가좌역)

○ 규    모 : 102,008㎡(연장 6.3km)

○ 내     용 : 역사와 문화를 담은 경의선숲길(새창고개 및 연남동 등)

○ 총사업비 : 45,720백만원(시비 : 45,720백만원)

□ 추진실적 또는 성과

○ 추진노력

- '09.11.18            공원조성 계획 수립(시장방침 제536호)

- '09.12.18~'11.2.21 기본 및 실시설계(선진엔지니어링)

- '10.12.20            시 ⇔ 한국철도시설공단 MOU 체결

- '11.12.29            도시관리계획(공원) 결정 고시

- '12. 2.20             1단계 공사 준공(17,400㎡, 760m)

- '12.3.16~'13.5.27  전문가 자문회의 8회 실시

- '12.4.13~ 7.3       경의선숲길 포럼 3회 개최

- '12.8.22~'13.9.29  주민설명회 7회 개최

- '13.3.4~ 6.3         새창고개 복원 등 기본계획 수립용역 실시

- '13. 6.21                공원조성 계획(변경) 수립(시장방침 제175호)

- '13. 8.  8               공사 발주(계약 9.25, 착공 9.30, 착공식 10.8)

- '13. 9.30             감리용역 발주(계약 11.27)

- '13.10. 1             도시공원위원회 심의(원안통과)

작 성 자	공원조성과장 : 오순환 ☎2133-2050, 공원개발팀장 : 오대근 ☎2059, 담당 : 최송천 ☎2065

- '13.12. 5             공원조성계획 결정 및 지형도면 고시

- '13.12.20               공원조성사업 실시계획 인가를 위한 열람공고

- '14.03.06               도시계획시설(경의선숲길 공원)사업 실시계획 고시

○ 추진성과 : 1단계 공사완료

- 공사규모 : 17,400㎡, 연장 760m (마포구 대흥동 일대)

- 공 사 비 : 4,921백만원

- 공사기간 : 2010. 12 ~ 2012. 2.

- 조성내용 : 자전거길, 산책길, 쉼터 등

○ 홍보방안(실적) : 보도자료 및 각종 매체를 통한 홍보

- ‘13년 10월 : 버려진 공간의 재발견(굿모닝 대한민국, KBS2)

- ‘13년 08월 : 경의선숲길 소개(마운틴 뉴스, 산악방송)

- ‘12년 04월 : 1단계 준공(보도자료)

- ‘13년 08월 : 2단계 착공(보도자료)

- ‘13년 08월 : 경의선 복합역사개발 공공기여(보도자료)

- ‘13년 01월 : 경의선 폐선부지에 거주공간을(인터넷)

- ‘13년 02월 : 연남동 게스트하우스(인터넷)

- ‘13년 09월 : 서울 서북부로 경의선 라인 뜬다(인터넷)

□ 기타 특이사항 : 홍보의 방향

○ 오랜 역사와 문화가 남아있는 경의선(옛 용산선)을 담은 공원조성을 소개(설계방향)

○ 주민설명회와 포럼 등을 통한 주민참여와 전문가 자문을 통한 시민참여형 사업(재능기부 : 홈페이지 제작, 환기구 타일 붙이기 등)

○ 철길의 이미지를 형상화 하는 등으로, 브랜드화를 통한 시민 자치적 공원관리 등.  끝.