□ 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설 추진경위

○ '08.10.~'09.01.  : 타당성조사 및 기본계획 시행(송파구)

○ '09.02.        : 투자심사(조건부)

- 제2롯데월드 등 대규모사업으로 인한 교통유발에 따른 민간분담 방안 강구

○ '10.06.18     : 건축위원회 심의결과 의견제출(롯데→교통정책담당관)

- 지하차도(사업비 480억원)는 롯데에서 도시교통본부와 협의하여 개설하겠음

○ '10.06.22     : 건축위원회 심의결과(조건부 동의)

- 사업지 외부 교통개선대책 이행은 도시교통본부와 협의 처리

○ '10.12~'12.05. : 실시설계 시행.

○ '13.04.29     : 민원관련 주찬식시의원 시장님 면담

○ '13.07.10     : 민원관련 의견제출 및 교통개선 분담금 납부요청(도로계획과→롯데)

- 장미아파트 전면 지하화 민원해결을 위한 추가 분담금 및 지하차도 사업비 678억원 납부요청

○ '13.07.17     : 사업비 추가분담 곤란 의견 제출(롯데)

○ '13.07.19     : 장미아파트 민원관련 시의원 부시장 면담(주찬식의원)

- 안건 : 장미아파트 추가연장 및 소요비용 롯데측 분담토록 요구

- 결과 : 막대한 예산 소요로 경제성 부족 및 다른 지역과의 형평성을 고려할 때 추진 곤란, 향후 장미아파트 재건축사업으로 추진이 타당함.

○ '13.08.05     : 민원사항 의견요청(도로계획과→롯데)

- 장미아파트구간 사업비 50%부담 또는 직접시공 가능여부 문의

○ '13.08.12     : 민원사항 의견요청에 대한 회신(롯데)

- 사업비 50%부담이나 추가연장 포함 전체 지하차도구간 직접시행 약속 사실 없음.

- 잠실대교 하부구간(520m) 롯데 개설 또는 480억원 납부하겠음.

○ '14.01~03    : 롯데측과 비용부담 관련 2차례 면담

○ '14.04.04     : 제2롯데월드 교통개선대책 조속 이행 요청(도로계획과→롯데)

- 1단계 노선(1.12km)에 대한 도로개설 또는 사업비 678억원(‘12년 실시설계시 산출금액) 납부 방안을 검토 후 회신 요구

○ '14.05.26     : 제2롯데월드 교통개선대책 조속 이행 요청에 대한 회신

(롯데 → 도로계획과)

- 1단계 전구간(1.12km)을 개설하겠다고 통보

○ '14.07.18     : 건축물 임시사용승인 신청 관련 보완 요구(시→롯데)

- 장미아파트 구간 등 전면 지하화 요구에 대한 사업비 추가분담 등 민원해소 방안 제출

○ '14.07.21     : 롯데측 방문 협의(도로계획과장, 금영민 이사)

- 장미아파트 전면지하화 요구민원 처리방안 협의

- 광역상수도(Ø2200×2열) 이설비(93억원) 및 방음벽(H=14.5m) 공사비(147억원) 재검토

○ '14.07.25     : 제2롯데월드 관련 사전협의 요청(롯데→시)

- 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설은 임시사용승인 협의와 별도로 분리하여 처리 요청

○ '14.07.29     : 사업비 추가부담 및 도로개설 방안 제출요구(시→롯데)

- 전면지하화를 요구하는 장미아파트 민원해결 및 도로개설 방안 제출요구

○ '14.08.22     : 전면지하화를 포함 1단계 구간(1.12km) 개설 수용(롯데→시)