『석촌지하차도주변 싱크홀 관련』

석촌지하차도 정밀안전진단 추진현황

	1		용 역 개 요

용 역 명 : 석촌지하차도 긴급 정밀안전진단 용역

용역기간 : 2014. 8.12 ~ 12. 31

계약대상 : ㈜한국구조물안전연구원 대표 이 채 규

소요예산 : 142,800천원

	2		그간 조사내용

지하차도 동공확인을 위한 코아채취 시행

○ 코아채취 개소 : 총14개소(박스구간 12개소, U-TYPE구간 2개소)

○ 코아채취 구경 : 100mm

○ 코아채취 결과 : 동공구간 2개소 발견

→ 동공규모 확인을 위한 작업구 2개소 설치

지하차도 동공에 따른 시설물 균열조사 시행

○ 본선박스(슬라브, 기둥부, 양측벽체) 균열 조사

- 슬라브 및 양측벽체 신규균열 발생 없음

- 중앙기둥부에 신규균열 발생 : 47개소(0.1~0.2mm)

○ 지하시설물(상수도, 한국전력, 체신) 공동구 균열 조사

- 신규균열 발생 없음

지하차도 측량조사(수준측량) 시행

○ 측정위치 : 지하차도 직상부 지표면 및 지하차도 내부 하부 바닥판

○ 측    점 : 3측점을 중심으로 10.0m간격으로 수준측량 실시

○ 측정시기 : 총 4회 실시

- 동공 복구전(1회), 복구시행 시점(2회), 복구완료 시점(3회)

복구완료 1개월 경과 시점(4회)

○ 3회까지 측량조사 완료

지하차도 설치된 계측장치 주기적 계측 시행

○ 계측기 종류 : 균열계측기 12개 및 수직도 계측기 42개

○ 계측기간 : 2014.8.13.~

○ 계측시기 : 주1회 측정

○ 계측결과 : 현재까지 이상 없음

지하차도 구조 안정성 평가 시행

○ 복구전 ․ 후 총2회에 걸쳐 지하차도 구조 안전성 평가 결과 안전한 상태로 검토되었음.

	3		향후 추진계획 및 일정

○ 지하차도 복구후 구조 안정성 평가 시행

○ 향후 유지관리방안 제시

○ 추진일정

․ ~ 2014. 11. 30 : 구조안정성 평가 및 주기적 계측시행

․ ~ 2014. 12. 20 : 정밀안전진단 결과 종합보고서 작성

․ ~ 2014. 12. 31 : 용역준공 예정