다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)도화엔지니어링 대표 박승우
(경유)
제목	준공기한 연기 알림

1. 서울시정 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 사에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인 ‘한강상 교량 연결램프 구조개선(강북지역) 기본설계용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기예정임을 알려드리오니 변경계약 체결 등 필요한 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2014.11.15

- 변 경 : 2014.12.26

나. 연기 사유

- 기본설계(안)에 대한 관련부서 협의 및 건설기술심의(설계심의) 등 행정절차 기간의 추가 소요로 절대공기 부족에 따른 과업기간 연장 필요 . 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	전결 11/05 형태경
협조자
시행	도로계획과-14398	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 도로계획과 10층	/
전화	02)2133-8067	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개