문서번호	지리정보과-4889
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	지리정보과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
장기덕	오기석	이규상		11/07 정득모
협 조

「‘14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

중간 보고회 개최계획

2014. 11.

상 수 도 사 업 본 부

(지리정보과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

상수도 GIS DB 정확도 개선사업 중간 보고회 개최계획

우리 본부에서 추진하고 있는『‘14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』과 관련하여 “중간 보고회” 개최계획을 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 사업현황(총 550㎞, 4,710백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 182㎞ (신설43km, 기존139km)	측량 및 편집 : 182㎞ (신설26km, 기존156km)	측량 및 편집 : 186㎞ (신설35km, 기존151km)
용역기간	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31
사 업 비	1,557백만원	1,557백만원	1,596백만원
사 업 자	중앙항업(주)외 2 [(주)제일항업,(주)해양정보기술]	공간정보기술(주)외 2 [삼아항업(주),네이버시스템(주)]	새한항업(주)외 2 [범아엔지니어링(주),한국에스지티(주)]
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

❍ 주요 사업내용

-  상수도관로(부속시설물 포함) 조사․탐사, 측량 및 DB 수정편집

· 신규시설물 조사 측량

· 기존 시설물 조사/탐사 측량

· 지하시설물도 DB 편집 등

① 기준점 측량	② 조사/탐사 측량	③ 시설물 DB구축

□ 그간 추진현황

□ ’14. 4. 24	착수보고회 개최(상수도본부)
□ ‘14. 5. 13	사업소 설명회 추진(8개 사업소)
□ ‘14. 5. 28	장비점검 및 밀폐공간 맨홀작업 안전교육
□ ‘14. 7. 29	월별 용역사 간담회 추진(대표 및 사업책임자)
□ ‘14. 8. 19	성과물 검증을 위한 성과심사 및 교차점검 시행
	- 측량, 조사, 탐사, 데이터 로딩 등
□ ‘14. 9. 22	공공측량 성과심사(대한측량협회)
□ ‘14.10. 29	측량성과 검증 및 현장안전점검 추진

(10월말 현재, 단위 : km)

상수도 GIS DB  추진현황

사업소	총 계			조사/탐사 및 측량		정위치편집 및 구조화/데이터로딩
	공정율(%)	계 획	완 료	계 획	완 료	계 획	완 료
계	79%	1,100	873	550	510	550	363
서북지역	81%	364	296	182	174	182	122
서남지역	79%	364	287	182	166	182	121
동남지역	78%	372	290	186	170	186	120

□ 보고회 개최(안)

□ 일    시 : ‘14. 11. 25.(화)16:00

□ 장    소 : 본부 4층 회의실

□ 보 고 자 : 사업책임기술자 이승한 외 2명(중앙항업, 새한항업, 공간정보기술)

□ 참 석 자 : 총 27명

- 본  부 : 부본부장, 시설안전부장, 누수방지과장, 시설관리과장, 지리정보과장

- 사업소 : 8개 수도사업소(급수운영과장)

- 용역사 : 중앙항업 대표 박상환 등 3명

새한항업 전무 신상철 등 3명

공간정보기술  부사장 이재동 등 6명

□ 보고내용 : 사업추진 현황, 문제점 및 점검결과 분석 등

진 행 순 서

시 간	내 용	진 행	비고
16:00 ∼ 16:10	개 회 사	업무담당자
16:10 ∼ 16:15	부본부장님 인사말씀	업무담당자
16:15 ∼ 17:00	과업 수행계획 보고	사업책임기술자
17:00 ∼ 17:20	질의응답 및 발전방안 토론	업무담당자
17:20 ∼ 17:30	부본부장님 당부말씀	업무담당자

□ 행정사항

□ “보고회 참석 대상자” 참석요청 통보.  끝.