문서번호	지리정보과-5432
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
김영혁		오기석	12/10 이규상
협 조
	주무관			장기덕
	주무관			신정민

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

불탐관로 점검 및 재탐사 계획

2014. 12.

시설안전부

지리정보과

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

불탐관로 점검 및 재탐사 계획

『 ’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』에서 탐사 실시한 관로 중 불탐관로에 대해 불탐원인을 조사하고, 컨소시엄 업체간 합동조사로 탐사율 향상 및 고품질의 DB를 구축하고자 함.

1		개 요

□ ’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(총 550㎞, 4,710백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 182㎞ (신설43km, 기존139km)	측량 및 편집 : 182㎞ (신설26km, 기존156km)	측량 및 편집 : 186㎞ (신설35km, 기존151km)
용역기간	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31
사 업 비	1,557백만원	1,557백만원	1,596백만원
사 업 자	중앙항업(주)외 2 [(주)제일항업,(주)해양정보기술]	공간정보기술(주)외 2 [삼아항업(주),네이버시스템(주)]	새한항업(주)외 2 [범아엔지니어링(주),한국에스지티(주)]
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

2		탐 사 현 황

□ 기존관로 조사/탐사 현황【전체 사업장】

사 업 소	구 분	계	정 탐	불 탐	준 탐
전 체 사업소	연장(km)	487.668	452.674	31.512	3.482
	탐사율(%)	100	92.8	6.5	0.7

□ 기존관로 조사/탐사 현황【서북지역】

사 업 소	구 분	계	정 탐	불 탐	준 탐
계	연장(km)	152.42	144.479	7.762	0.179
	탐사율(%)	100	94.8	5.1	0.1
중 부	연장(km)	58.63	55.640	2.811	0.179
	탐사율(%)	100	94.9	4.8	0.3
서 부	연장(km)	53.37	50.084	3.286	-
	탐사율(%)	100	93.8	6.2	-
북 부	연장(km)	40.42	38.755	1.665	-
	탐사율(%)	100	95.9	4.1	-

□ 기존관로 조사/탐사 현황【서남지역】

사 업 소	구 분	계	정 탐	불 탐	준 탐
계	연장(km)	173.453	160.095	11.964	1.394
	탐사율(%)	100	92.3	6.9	0.8
강 서	연장(km)	82.81	73.875	7.686	1.249
	탐사율(%)	100	89.2	9.3	1.5
남 부	연장(km)	90.643	86.220	4.278	0.145
	탐사율(%)	100	95.1	4.7	0.2

□ 기존관로 조사/탐사 현황【동남지역】

사 업 소	구 분	계	정 탐	불 탐	준 탐
계	연장(km)	161.795	148.100	11.786	1.909
	탐사율(%)	100	91.5	7.3	1.2
동 부	연장(km)	74.854	68.649	4.296	1.909
	탐사율(%)	100	91.7	5.7	2.6
강 남	연장(km)	43.917	41.589	2.328	0
	탐사율(%)	100	94.7	5.3	0
강 동	연장(km)	43.024	37.862	5.162	0
	탐사율(%)	100	88.0	12.0	0

3		점검 및 재탐사 계획

❍ 점검자 : 사업별 감독자

❍ 입  회 : 사업PM, 현장작업자

❍ 기  간 : ‘14. 12. 10 ～ 12. 31

❍ 대  상 : 불탐 및 준탐 관로

❍ 방  법 : 현장답사를 통한 원인 및 유형 분석하여 재탐사 실시

4		향 후 계 획

❍ 재 탐사 결과 시스템 반영

❍ 성과심사 결과 지적사항 보완 : ‘14. 12. 19까지 완료

❍ 1차 준공 예정 : ‘14. 12. 22. 끝.