문서번호	공원조성과-1643
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	공원디자인팀장	공원조성과장	푸른도시국장
김대호	이영일	오순환	전결 02/06 오해영

2015년 청소년 체험의 숲 시범조성사업 추진계획

2015. 2

푸 른 도 시 국

(공원조성과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 ■ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 ■ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	중부공원녹지사업소	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2015년 청소년 체험의 숲 시범조성사업 추진계획

자연을 접하기 어렵고 여가활동이 부족한 도시 청소년들에게 숲을 활용한 흥미롭고 활력 있는 체험공간을 시범 조성하여 체력단련과  모험심을 기를 수 있는 기회 제공 및 건강한 인재양성에 기여.

1				추진근거		‘

공원조성과-2643호(2013. 3. 7.)「청소년 모험의 숲 시범조성사업 추진계획」

공원조성과-10201호(2013.8.29.)「청소년 모험의 숲 시범조성 사업계획(변경)」

민선6기 공약사업인 ‘생애주기별 힐링공원 조성사업’ 일환으로 추진

2				사업개요		‘

대 상 지 : 중랑캠핑숲 및 안산도시자연공원

- 중랑캠핑숲(중랑구 망우로 산33일대) 10,000㎡

- 안산도시자연공원(서대문구 연희동 산2-13일대) 15,000㎡

사업기간 : 2013~2016

- 설계용역 : ‘13~‘14년(중랑캠핑숲 및 안산도시자연공원)

총사업비 : 2,200백만원 (설계비 100, 모니터링100, 조성비 2,000)

- ‘13년: 100백만원(설계), ‘15년: 1,000백만원(조성비), ‘16년: 1,100백만원(조성비 등)

사업내용 : 모험체험, 모임(교육), 산책공간 조성 등

추진경위

- ’13. 3월      : 사업추진계획 수립, 타지역 사례검토

- ’13. 4~ 7월 : 추진위원회 구성 및 회의(4차)

- ’13. 8월      : 사업추진계획(변경) 수립 및 시달

- ’13. 9~’14. 12월 : 기본 및 실시설계, 전문가자문(설계심의) 등

- ’14. 11. 18  : 도시공원위원회 심의(중랑캠핑숲)-원안가결

3				2015년 추진계획		‘

대 상 지 : 중랑캠핑숲 (중랑구 망우로 산33 일대)

조성규모 : 10,000㎡

사업기간 : 2015. 1~12월

사 업 비 : 1,000백만원 (조성비 995, 시설부대비 5)

사업내용 : 모험체험시설 설치, 수목식재, 휴게공간 조성 등

추진방향

- 기존 지형과 수목 등 자연환경을 최대한 활용하여 자연 훼손 최소화

- 청소년들이 숲속에서 모험심과 극기심을 배양할 수 있는 시설 도입

- 청소년들의 특성을 고려 안전하게 활동할 수 있도록 공간구성 및 시설배치

※ 시범사업 효과에 따라 향후 확대시행 여부 검토

추진일정

- 2015.  1 ~ 2월 : 사업추진계획 수립, 계약심사, 공사발주

- 2015.  3 ~ 9월 : 공사시행(공사중 전문가 동원 합동 안전점검 실시),

시설운영·관리계획 수립, 운영자 선정 등

- 2015. 10~12월 : 시험운영(위탁운영자 참여)

- 2016.  3월~    : 중랑캠핑숲내 청소년 체험의 숲 시설개장

4				운영기본방안		‘

운영기관 : 중부공원녹지사업소

운영방식 : 위탁운영(민간위탁 또는 사용수익허가)

- 유지관리비(운영비) 절감을 위해 수익성 매점 운영 등 검토

운영시기

- 2015년 : 준공 시점에 맞추어 시험운영(10~12월)

- 2016년 : 개장 운영(시험운영을 통해 문제점 보완 후 추진)

5				기관별 역할분담 추진		‘

사업추진계획 및 운영기본방안 수립 등 (공원조성과)

공원시설 운영 및 관리 지도감독 총괄 (공원녹지정책과)

공사시행, 시설운영 등 (중부공원녹지사업소)

- 세부 조성·운영계획 수립 시행, 위탁운영에 따른 사전준비 및 절차이행 등

6				행 정 사 항		‘

계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 재배정

2015년 하반기 중 시험운영을 위해 신속한 공사시행

분기별 추진경과 보고 및 사업 완료시 최종보고(별첨 양식 참조)

붙  임 : 1. 위치도 및 조감도 1부.

2. 사업추진현황 보고 양식 1부.  끝.