문서번호	건축부-2616
결재일자	2015.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		안연수	03/06 代강성욱
협 조

「2014년 운현궁 문화재 보수공사」

실정보고 사항 검토 보고

- 해체 후 현장확인에 따른 물량조정 등 -

2015. 3.

도시기반시설본부

건 축 부

「2014년 운현궁 문화재 보수공사」

실정보고 사항 검토 보고

- 해체 후 현장확인에 따른 물량조정 등 -

『2014년 운현궁 문화재 보수공사』와 관련하여 보수부분 해체 후
현장확인에 따른 물량조정 등에 관한 실정보고 사항을 검토 보고함.

□ 공사개요

○ 위    치 : 종로구 운니동 114-10번지(사적 제257호)

○ 보수범위
- 수직사, 노안당, 노락당 북행각 흰개미 피해 및 부식부 보수
- 회랑 정문, 이로당 협문 부식부 보수 등

○ 공사기간 : `14.10.6 ～ `15.3.17

○ 도 급 액 : 155백만원

○ 시 공 사 : ㈜창의건설 대표 박정권

□ 추진경위

○ `15. 2.16 : 수직사 지붕 및 노락당 북행각 화방벽 해체 후 현장확인

○ `15. 3. 3 : 문화재 기술지도단 자문위원(김왕직 교수) 서면자문

※ 자문의견 요약

- 노락당 북행각 화방벽 해체결과 하방이 부식된 것이 목격되었음으로 수지처리하여 보수

- 협문의 신방목은 구조에 영향을 줄 정도로 부식된 것이 아니고 신방목 교체를 위해서는 전면해체 해야하므로 해체없이 신방목을 수지처리

- 수직사 회첨부는 누수 흔적이 발견되지 않으므로 이완된 기와고르기 정도로 보수

○ `15. 3. 3 : 시공사 실정보고서 제출

□ 주요내용

○ 수직사 회첨골 보수공사를 위한 현장 확인 결과, 외부 처마 밑부분과 내부 지반자 상부에 누수 흔적이 없어 이완된 기와고르기만 실시(자문의견 반영)

○ 화방벽 해체결과, 하방 및 기둥재의 부식 훼손의 범위가 큰 것으로 확인되어 인방재의 재설치가 어려우므로(보수범위가 불필요하게 확대) 추가 발견된 훼손부위에 수지처리로 보수(자문의견 반영)

○ 협문 신방목 보수범위를 최소화하여 부식부분에 수지처리하여 신방목 형태 복원
(자문의견 반영)

○ 구재와 교체 처리된 신재와의 색조를 맞추기 위해 고색가칠 처리

□ 설계변경 내용

(단위 : 천원)

구 분	주 요 변 경 내 용	공 종	단위	당초	변경	증·감액
수직사 지붕공사	누수 흔적이 없어 회첨골 동판설치 제외, 이완된 기와고르기만 실시	동판설치	㎡	6.05	0	-1,355
		기와고르기	㎡	6.05	6.05
이로당 협 문	당초 해체 및 재설치 항목 제외	해체 및 재설치	식	1	0	-766
약품처리 (수지)	․ 수직사 : 기둥 수지처리 수량 감소 ․노락당 북행각 : 하인방 및 기둥재의 부식 훼손의 범위 추가 발견에 따른 수지처리 ․이로당 협문 : 일부 부식 부분에 수지처리하여 형태복원	수직사	0.1㎥	0.1	0.016	-550
		노락당 북행각		0	0.386	2,510
		이로당 협문		0	0.091	591
고색가칠	구재와 교체 처리된 신재에 고색가칠 ※ 신규항목 : 견적가에 낙찰률 87.76% 적용	수직사	㎡	0	98	1,500
		노락당 북행각		0	15
		이로당 협문		0	2
계						1,930

□ 검토 및 처리의견

○ 문화재수리 등에 관한 업무 지침(문화재청 고시 제2010-130호)에 의거 문화재 수리의 기본방향(문화재를 구성하는 부재를 교체하기보다 가능한 고쳐서 그대로 사용한다) 및 문화재 기술지도 자문의견을 반영하여,

○ 시공사의 문화재수리에 대한 실정보고 사항이 적정하게 반영되었음으로, 실정보고 승인 통보하여 우선 공사시행하고, 추후 정산하여 설계변경 처리코자 함.

붙 임  1. 실정보고서 1부
2. 자문의견서 1부
3. 신규항목(고색가칠) 견적서 1부.  끝.