문서번호	시설과-1029
결재일자	2015.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	★동부공원녹지사업소장
박진우	임록화	진병규	03/23 이춘희
협 조
	조경지원과장		김제중
	주무관		송복식

2015년 공원내 CCTV설치 계획

2015. 3.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

2015년 공원내 CCTV설치 계획

『보라매공원 큰 둘레길 조성계획』에 따라 신설되는 산책로 등 공원내 취약지역에 CCTV를 설치하여 각종 범죄로부터의 시민 불안감 해소 및 공원이용 안전을 강화하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

Ⅰ		관 련 근 거	7

❍ 2015년 도시공원․놀이터 CCTV설치계획 통보(정보통신보안담당관

-4811,2015.03.13.)

Ⅱ		사 업 개 요	7

❍ 2015년 CCTV 설치계획

기관명	설치장소 및 수량(대)				예산배정액(백만원)			비고
	계	보라매	천호	어린이대공원	계	국비	시비
동부공원녹지사업소	5	3	2	-	75	22.5	52.5
어린이대공원	5	-	-	5	75	22.5	52.5

❍ 사업기간 : 2015.3월 ~ 7월

❍ 추진방법 : 해당 공원에서 설치대상지 확정후(경찰서 협의), CCTV(영상정보처리기기) 설치 기준에 맞게 설치

Ⅲ		추 진 계 획	7

1. 건   명 : 2015년 보라매공원 큰둘레길 등 2개소 CCTV구매설치

❍ 예   산 : 75백만원

❍ 수   량 :  5대

- 보라매공원 : 3대(농촌체험장 1대, 큰둘레길 신설구간 2대)

- 천호공원   : 2대

❍ 추진일정 : 2015.03 ~ 07

- 2015.03  : CCTV 설치장소에 대한 경찰서 협의 및 위치선정(각공원)

- 2015.03 ~ 04 : 행정예고(공고일로부터 20일)

- 2015.04 ~ 05 : 구매발주 및 계약

- 2015.05 ~ 07 : 설치 및 준공

❍ 계약방법 : 조달구매(총액수의계약)

- 발주 및 준공처리 : 시설과

- 설치위치 선정 및 감독업무 : 각 공원

2. 건   명 : 2015년 어린이대공원 CCTV 구매설치

❍ 예    산 : 75백만원

❍ 수    량 : 5대

❍ 추진일정 : 2015.03 ~ 06

- 2015.03 : CCTV설치장소에 대한 경찰서 협의 및 위치선정(대공원)

- 2015.03 ~ 04 : 행정예고(공고일로부터 20일)

- 2015.04 ~ 05 : 구매발주 및 계약

- 2015.05 ~ 06 : 설치 및 준공

❍ 계약방법 : 조달구매(총액수의계약)

- 발주 및 준공처리 : 시설과

- 설치위치 선정 및 감독업무 : 어린이대공원

Ⅳ		행 정 사 항	7

❍ 각 공원 업무담당자 지정 통보(각 공원, 어린이대공원 → 시설과)

❍ 위치선정 결과 및 공사완료보고서 통보(각 공원, 어린이대공원 → 시설과)

붙임 : 2015년 도시공원․놀이터 CCTV설치계획(정보통신담당관) 1부. 끝.