문서번호	급수운영과-4405
결재일자	2015.3.27.
공개여부	비공개
방침번호

						시 민
주무관	★주무관		급수운영과장		강동수도사업소장
협 조
	시설관리과장
	★수질팀장
	기전팀장
	주무관
	주무관
	주무관

방이동 고지대 수계전환 계획

강동수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

방이동 수계전환 계획

방이증압장 설치 공사가 완료되어, 현재 암사정수센터 저양정계통 직송공급 지역인 방이동 고지대를 광암정수센터 급수계통 증압 공급으로 전환하여 원활한 급수공급에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 문서

□ 배수과-5479호(2014.8.21.) 암사(저양정) 직송 급수지역에 대한 급수운영 검토결과 통보

- 급수 전환 사유 : 암사직송 수계 잔류염소가 기준치에 초과되어 맛, 냄새 민원발생

- 증압 공급 사유 : 길동배수지 등 자연수계로 전환할 경우 기존 암사직송지역 고지대에 소출수 발생

□ 급수운영과-16657호(2014.10.20.) 방이동 고지대 급수공급을 위한 방이증압장 신설 계획

□ 수계전환 현황

□ 위    치 : 송파구 방이동 165번지 일대

□ 급수세대 : 2,200세대(5,500명)

□ 급 수 량 : 최대 1,900㎥/일

□ 수계전환 개요

- 광암수계 공급 및 증압펌프 가동

- 기존 암사수계 공급 관로(300㎜)차단

□ 증압장 설치 개요

- 공사기간 : 2014.11 ~ 2015.2

- 소요예산 : 170백만원

- 증압장 시설 현황

구 분	규 격	비 고
펌 프	수륙양용 펌프 (20HP×2대)
감시제어반	800×800×2,000 (W×L×H)
유 량 계	외벽부착식 초음파 (Xonic-10L)
증압장 구조물	구형 2.8 × 5.5 × 높이1.9m
공급 관로	분기관로 : 1000×300㎜ 증압장 유입·유출관 : 150㎜

□ 급수구역 현황

한성백제박물관

방이초

방이역

증압장

암사수계 2000㎜

급수방향 변경

기존 급수방향

급 수 구 역

□ 수계 변경 계획

□ 사전 조사 실시 : 3.27. ~ 3.31.

- 수계전환 구역의 고립 여부 확인

- 수계전환 구역 내 밸브 개폐 확인

- 수압 조사 실시

- 수계전환에 따른 적수발생 예방을 위하여 구역내 소화전 퇴수 실시

□ 수계전환 실시 : 4.2. 14:00 ~ 17:00

- 방이증압장 펌프 가동하여 급수공급

- 기존 암사수계 공급관로(300㎜) 차단

· 기존관은 밸브조절 실시하여 광암수계 순환배관으로 활용 : 밸브조절 계획 별첨

- 적수발생 여부 확인, 수압 조사

□ 수계전환 완료 이후 조치

- 수계전환 수전 요금과 통보

- 가압지역 유수율 관리 반영

- 가압지역 건물 직결급수 가능 범위내 적정 수압 관리

□ 행정 사항

□ 부서별 협조 사항

- 행정지원과(수질팀) : 수계전환 작업 시 현장 수질 점검

- 시설관리과 : 밸브조절 및 퇴수 작업 협조

붙 임 : 1) 증압장 설치도 및 사진 1부

2) 기존 암사수계 공급관로 밸브조절 계획 1부.

3) 수계전환 구역 소화전, 퇴수밸브, 공기밸브 현황 1부.

4) 수계전환 실시 담당자 현황 1부.

5) 수계전환 수전내역 1부. 끝.