문서번호	대기환경연구부-6138
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
이순희	조석주	어수미		05/14 정권
협 조

대기환경정보 전광판 교체 및 설치 계획

2015.  5.

대기환경연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

대기환경정보전광판 교체 및 설치 계획

현재 내구연한이 경과한 방이전광판을 교체하여 실시간 대기환경정보 및 예·경보사항을 신속히 전파하고 시민들의 건강한 생활에 이바지 하고자 함.

개 요

▢ 목 적

〇 (초)미세먼지, 오존, 황사 등 대기오염정보 및 예·경보 전파

〇 환경관련 홍보자료 전파를 통한 시민 건강예방 및 환경의식 고취

▢ 관련 근거

〇 대기오염측정망설치·운영지침 제6장(2011.3)

▢ 대상전광판

〇 방이 : 서울시 송파구 양재대로 1222

〇 최초설치년도 : 1997년 10월

〇 최근교체년도 : 2005년 09월

〇 전광판 내구연한 : 8년

〇 전광판 교체사유 : 내구연한을 초과한 노후된 장비로 해상도 및 휘도가                          떨어져 선명한 이미지 및 동영상 표출 불가

추진일정

▢ 일상감사 요청 : 2015. 5. 18. ～ 5. 22.

▢ 계약심사 요청 : 2015. 5. 26. ～ 6.  5.

▢ 발주의뢰,공고 및 계약 : 2015. 6. 8. ～ 7. 10.

▢ 공사기간 : 2015. 7. 13. ～ 10. 16.

〇 예정공정표 – 계약일로부터 90일

공 정		계약후 90일
		계약	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
계 약	현장답사
계 약	승인도서 제출 및 승인
MODULE 및 기타자재	LED 생산
	부품 발주 / 입고
	POWER SUPPLY
	LED 발주 입고
	LED 검수
	LED LAMP INSERT(MODULE)
	MODULE AGING 및 주형
	CASE SETUP
	조립
	출하
제어장치	제어장치제작(CONTROLLER)
	제어장치 AGING
운영 장비 (운영S/W)	운영장비 구매 및 TEST
	전광판 운영 PROGRAM 제작
	현장 설치 및 시운전
	전광판 및 운영장비 교육
철구조물	전광판 CASE 제작
	전광판 기둥 지지대 제작
	철구조물 설치 및 마감작업
	구조물 설치
	기존전광판 철거
전광판	운영실 기기 , 전광판 SET UP
	전광판 TEST 및 시운전
	준공 및 검수

예산

▢ 소요예산 : 총 250,000천원

▢ 예산과목 : 대기환경개선 및 친환경교통차량 보급, 질소산화물 저감 및

대기오염 감시, 초미세먼지 감축기반 조성, 시설비

기대효과

▢ 업그레이드 된 해상도와 휘도로 선명한 이미지 및 동영상 표출가능

▢ 시민고객에게 알기쉬운 실시간 환경정보 전파가능

붙임:대기환경전광판 설치현황 1부. 끝.