건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	사업변경 및 준공정산에 따른 계약변경 의뢰(`14년 소방시설 공사)

「2014년 보신각과 남산한옥마을 소방시설 설치사업」에 대하여 아래와 같이 사업변경 및 준공정산에 따라 계약변경을 의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 보신각과 남산한옥마을 소방시설 설치공사

나. 공사기간 : 2014.12.24. ~ 2015.05.22.

다. 계 약 자 : ㈜ 제우일렉스(대표: 김승환)

라. 변동내역

구 분	당 초	변 경(원)	증·감(원)	비고
사업금액	61,811,000원	32,348,800원	감)29,462,200원

- 사   유 : 사업변경 및 보험료 정산 등 (붙임1 참조)

마. 예산과목 : 역사문화유산의 계승 발전, 문화재 보존 복원, 문화재 방범·방재 시설설치, 시설비(401-01)

붙임 1. 변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 관련 방침서 1부.  끝.

	역사문화재과장
주무관	김동천		문화재보존팀장	이종혁		역사문화재과장	05/22 代장청락
협조자
시행	역사문화재과-11238	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개