문서번호	주차계획과-7030
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	05/29 홍현구
협조

수송초등학교 지하주차장 건설 (강북구) 예산교부 검토

2015. 5.

도시교통본부

(주차계획과)

수송초등학교 지하주차장 건설 예산교부 검토

강북구에서 추진중인『수송초등학교 지하주차장 건설사업』관련 ‘15년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 강북구 한천로124길 14 수송초등학교

○ 규    모 : 대지면적 13,513.4㎡ (연면적 10,693.7㎡)

- 공영주차장 : 지하1~2층, 주차면수 185면(연면적 7,078.2㎡)

- 복합시설: 지상1~3층(도서관,식당,강당, 연면적 3,615.5㎡)

○ 총사업비 : 9,000백만원 (시비 6,300백만원, 구비 2,700백만원)

○ 사업기간 : ‘12.9 ~ ‘17.6.

Ⅱ. 추진 경위(계획)

○ ‘12.9 : 주차장 건립 추진계획 수립(강북구)

○ ‘12.10 : 서울시 투자심사 완료

○ ‘13.4 : 서울시 교육청 투자심사 완료

○ ‘13.7 : 교육과학기술부 투자심사 완료

○ ‘13.10 : 복합화사업 협약 체결(강북구,성북교육지원청)

○ ‘15.3 : 실시설계용역 완료

○ ‘15.4 : 시설공사 계약의뢰(조달청)

○ ‘15.7~’17.6 : 공사 시행(장기계속)

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 수송초교 지하주차장 건설 예산 교부

- 관련공문 : 2015년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 강북구 주차관리과-10302호 (2015.5.7)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위 : 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비 고
계		9,000	6,300	2,700
보상비	보 상	-	-	-		해당없음
설계용역	설계용역	180	126	54	‘14.4	준공금액
공사발주	토목,건축	7,937	5,557	2,380	‘15.4	발주금액
	전 기	171	119	52	‘15.4
	통신	198	138	60	‘15.4
	소 방	274	192	82	‘15.4
감리비	시공감리	240	168	72	‘15.4

□ 예산배정 검토

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘14년이전	‘15년			‘16년이후	비고
			계	기배정	금회배정
계	9,000	3,200	2,900	-	2,900	2,900
시 비	6,300	500	2,900	-	2,900	2,900
구 비	2,700	2,700	0	-	0	-

※ “서울수송초교 복합화시설 증축공사” - 서울시성북교육지원청 사업시행

□ 요청 사유

○ 건설공사 및 건설사업관리용역 발주시기 도래에 따른 배정 요청

□ 검토 의견

○ 동 사업은 실시설계 용역완료(‘15.3월 준공) 및 시교육청 일상감사결과 후 지적사항에 대한 보완조치후 ‘15.4월 조달청 발주 및 계약의뢰한 상태로 주차장 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단되며

○ 건설공사 집행에 필요한 ‘15년 편성된 시비 2,900백만원 요청하는 사항으로 공사가 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

첨부   1) 예산교부 요청공문 1부

2) 공사예정공정표 1부

3) 일상감사결과(교육청) 1부.   끝.