문서번호	행정관리과-5234
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김점철	정남기	06/19 권오식

『청소근로자 휴게실 설치공사』

설계 변경 심의위원회 개최결과

2015. 6

구의아리수정수센터

(행정관리과)

『청소근로자 휴게실 설치공사』

설계 변경 심의위원회 개최결과

공사현황

공 사 명 ： 청소 근로자 휴게실 설치공사

공사기간 ： 2015. 5. 28 ~ 2015. 6. 24

공사금액 ： 금33,215,500원

시 공 자 ： (주)유니온아트 대표 진인복

설계변경 심의사항

심의 일시 : 2016. 6. 17(수) 14:00 ~ 17:00

장    소 : 소회의실

공사개요： 청소근로자 휴게실 등 설치공사

계약금액 :  금33,215,500원

심의 주요내용

- 설계변경의 타당성, 제경비산정 적정여부

- 공종별 증 ․ 감량의 적정성

설계변경 심의결과

제경비산정 적용 : 적합

공종별 증․감량 적용 : 적합

설계변경 : 적합

심의내용

공 종	단 위	당초수량	변경수량	비고(증ㆍ감)
- 천정텍스(남여샤워실)	㎡	27	29	증) 2
- 칸막이(SGP)	㎡	18	35	증) 17
- 샤워실 거울설치(길이3000*폭1000)	개소	1	3	증) 2
- 수도꼭지	개소	2	10	증) 8
- 혼합수전	개소	2	1	감) 1
- 바닥장판(남여)	㎡	68	48	감) 20
- 휴게실 침상(남여)	㎡	40	20	감) 20
- 합판	매	24	12	감) 12
- 각재	재	32	12	감) 20
- 샤워수전	개	10	6	감) 4

향후 계획

설계변경 시행후 금액 변경없이 계약

붙임 : 1. 설계변경 심의 결과서 1부.

2. 설계변경(심의) 내역서 1부. 끝.