함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 항내 누수 복구완료에 따른 통수 추진 협조요청

1. 배수과-5125호(2015.7.27.)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 벽체 누수부위 복구완료 후 8.6.(목) 현장점검시 추가 누수사항이 없어 아래와 같이 통수를 추진하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 봉은배수지 항 벽체 누수부위 복구 및 담수 후 이상유무 확인

- 내  용 : 지난 7.30.(목) 확인된 1개소 누수부위 복구 시행 후 8.6.(목) 점검시 추가 누수사항 없었음.

⇒  8.12.(수)까지 이상유무 확인 후 이상없을시 통수추진

◈ 통수추진 세부일정

- 배수지 항내 담수된 물 퇴수조치  : 8.16.

- 배수지 항청소                   : 8.17. ~ 8.21.

- 통수관련 관계자회의 개최        : 8.24.

- 봉은배수지 통수추진             : 8.25. ~ 9월초

※ 통수추진 세부일정은 관계자회의를 통해 단계별 추진절차 등 협의후 결정. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설과장,강남수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	08/07 이규상
협조자
시행	배수과-5496	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개