의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-171	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,물순환정책과장,교통정책과장

주무관	치수계획팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
엄기숙	손경철	이진용	09/02 김학진
협 조
	물재생계획과장			신현태
	하천관리팀장			심형보

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 935번, 김태원 의원, 국토교통위원회)

의원님께서 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김태원 의원(국토교통위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 935번

□ 요구내용

79. 2011년~2015년 8월 현재까지 강남역 일대 침수 발생현황

- 연도별, 재산피해액, 피해복구액

- 침수가 잦은 이유 및 대책 방안

80. 침수 취약지역 관련

- 서울시내 침수 취약지역 현황

- 이중 피해방지 공사 완료, 진행 중인 곳 현황 및 소요예산 등

79. 2011년~2015년 8월 현재까지 강남역 일대 침수 발생현황

□ 강남역 일대 연도별 재산피해액, 피해복구액

(단위 : 천원)

연 도		2011년	2012년	2013년	2014년	2015년 8월
계	피해액	275,736	4,800	22,800	1,200	-
	복구액	474,500	8,000	38,000	2,000	-
서초구 서초동	피해액	158,136	3,000	14,400	-	-
	복구액	273,500	5,000	24,000	-	-
강남구 역삼동	피해액	117,600	1,800	8,400	1,200	-
	복구액	201,000	3,000	14,000	2,000	-

※ 국가재난관리시스템(NDMS)상 피해 확정된 결과임

- 피해액은 정부산출 기준에 따름

□ 강남역 일대 침수 원인

○ 강남역 일대 침수는  반포천 단면부족, 하수체계 불합리, 펌프장 용량부족 등 다양한 원인이 복합적으로 작용하여 발생하기 때문에 단기간에 문제해결이 어려운 실정임.

○ 긴급대책으로 ‘14년도에 저류조를 설치하고 ’15년도는 단기대책으로 유입관로 개선, 빗물유입시설 확충 등의 사업을 완료하였음

- ‘14년도 : 용허리공원 저류조(서초구 서초동 용허리공원 V=15,000㎥),

39개소 격벽철거(우성아파트4거리~강남대로61길)

- ‘15년도 :*****************************************************************************

○ 단계적으로 침수문제를 해소하기 위해 ’16.6월까지 배수구역 경계조정, ‘19.6월까지 유역분리터널을 설치하여, 각각 80, 95mm/hr 수준으로 방재능력을 확충할 계획임.

- 배수구역 경계조정(26.5㎞) : 10년 빈도(80㎜/hr)

- 유역분리터널(D=7.5m, L=1.3㎞) : 30년 빈도(95㎜/hr)

80. 침수 취약지역 관련

□ 침수취약지역 현황(34개소 침수취약지역)

○ 2010, 2011년 집중호우 이후, 침수 취약지역별로 중점관리 추진하고 있음.

-  특별관리 : 신월지역 등 11개소

- 중점관리 : 오류동역 주변 등 16개소

- 기타관리 : 공릉초교 주변 등 7개소

○ 이중 피해방지 공사 완료, 진행 중인 곳 현황 및 소요예산 등

- 주요 침수취약지역 수방 대책사업 완료 : `15년까지 11개소

․`13년(5개소) : 구의·자양, 면목동, 미아삼거리, 장위동, 가산디지털단지역 일대

․`14년(4개소) : 영림초교, 장안1동 주민센터, 선릉역, 을지로입구역 일대

․`15년 상반기 2개소 완료 : 신촌 현대백화점일대, 성대시장 일대

-  주요 침수취약지역 수방 대책사업 추진계획

2015 하반기	2016	2017	2018	2019
3개소	3개소	10개소	6개소	1개소
∘풍납1,2동 주민센터 ∘공릉초교 일대 ∘공항펌프장 일대	∘신천지역 ∘잠원지역 ∘용답동답십리 일대	∘대치역사거리 ∘광화문 일대 ∘한강로 일대 ∘신월지역(2개소) ∘강서구청사거리 ∘시흥사거리 일대 ∘내방역사거리 일대 ∘암사역 주변 ∘오류동역 주변	∘도림천(3개소) ∘사당역 일대 ∘길동 일대 ∘망원유역 일대	∘강남역 일대

- 주요 침수취약지역 수방 대책사업 추진현황 및 소요예산

지 역	주요 세부대책			사업기간 (년)	예산 (억원)
	단 기 (완료)	중장기 (추진중)
광화문 일대	하수관거 개선(870m) 및 세종로 주차장 저류조, 유입시설 103개소 확충	저류시설 유입관로 개선(0.22km), C자형 관로 개선(0.85km)		‘12~‘17	466
한강로 일대(신용산역 주변)	빗물유입시설 확충(한강로 횡단 140개소, 연속형 107m), 만초천 교량 재설치	유역분리 관거(2.33km) 및 펌프장 신설(1개소)		‘12~‘17	548
구의․자양동일대	자양펌프장 증설 및 구의문주차장 저류조 설치			‘12~‘13	414
신월지역(①신정사거리, ②화곡시장일대)	하수관거 개선 및 오금펌프장 증설	빗물저류배수시설(3.6km), 유도 터널 2개소 및 수직구 6개소		‘12~‘17	1,910
동작․사당동 일대	저류조 설치(2개소) 및 도로물막이판 설치(4개소), 하수관거 개선(82m)	빗물저류배수시설 주변사업연계 검토중 저류조 2개소, 관거개선(4.1km)		‘13~‘18	192
도림천 주변(①미림여고, ②신림동우편물 취급소, ③구로디지털단지역 주변)	저류조 2개소 및 신림3교·충무교 재가설, 하상정비 및 보축, 신림5펌프장 및 신림2펌프장 신설	방수로 설치(국비) 저류조 설치중(1개소)		‘12~‘18	1276
강남역 일대	저류조 설치 및 격벽철거(39개소), 빗물유입시설 확충	유역분리 터널(1.3km), 배수구역 경계조정(116.5a)		‘12~‘19	610
길동 일대	도로험프 설치	유역분리 관거(4.46km)		‘15~‘18	705
강서구청 사거리 일대	하수관거 정비(2.51km)			‘12~‘17	1,202
시흥사거리 일대	저류조 설치	우회관로 신설(1.5km) 및 하천단면 확장(0.6km)		‘12~‘17	426
영림초교 주변	대림3펌프장 증설 및 유입관로 확장(2.0km)			‘12~‘14	443
성대시장 주변	대방천 암거 신설(1.3km)			‘12~‘15	436
선릉역(포스코사거리주변)	하수관거 신설(1.93km) 및 저류조 설치			‘13~‘14	339
대치역사거리 일대	하수관거 정비(1.21km) 및 도곡펌프장 신설			‘12~‘17	557
내방역사거리 일대	하수관거 신설(2.1km)			‘13~‘17	349
암사역 주변	하수관거 신설(1.97km)			‘14~‘17	275
공항펌프장 일대	공항펌프장 증설, 마곡1펌프장 재설치 및 마곡2펌프장 신설			‘12~‘15	45
망원유역(홍대입구역 일대)	하수관거 정비(1.0km)	저류조 신설 등 유역대책 수립중		‘12~‘18	994
오류동역 주변	하수관거 정비(1.8km), 복개구조물 확장(1.7km)			‘12~‘17	524
신촌현대백화점 주변	하수관거 정비(1.1km)			‘12~‘15	52
가산 디지털단지역 주변	하수관거 정비(2.24km)			‘12~‘13	255
을지로 입구역 일대	하수관거 신설(0.85km)			‘12~‘14	83
풍납 1, 2동 주민센터 주변	풍납펌프장 유입관거 정비(4.99km)			‘12~‘15	163
잠원지역 일대	잠원2 펌프장 신설 등			‘12~‘16	154
신천지역 일대	하수관거 정비(2.71km) 등			‘12~‘16	130
공릉초교 주변	공릉2 펌프장 신설 및 유입관로 정비(0.36km)			‘12~‘15	375
장안1동 주민센터 주변	장안2, 4펌프장 증설 및 답십리4펌프장 유역분리(0.14km)			‘12~‘14년	548
면목동 일대	하수관거 정비(3.1km) 및 면목4펌프장 증설			‘12~‘13	90
장위동 일대	하수관거 신설(0.45km) 및 장위펌프장 증설			‘12~‘13	96
미아삼거리역 주변	하수관거 정비(0.73km) 및 송천펌프장 신설			‘12~‘13	117
용답동 답십리역 일대	용답펌프장 증설,		하수관거 정비(0.55km)	‘12~‘16	39

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과 물재생계획과)	담당사무관	손 경 철 심 형 보 김 준 형
	☎ 2133-3863 ☎ 2133-3886 ☎ 2133-3783	담당자	김 동 철 윤 희 성 김 병 오
	작 성 일 : 2015. 9. .