중랑구 관련 사업 현황

(8월 31일 기준)

부서별	사업명	사업개요	추진내용 및 현황	향후계획
공원녹지정책과	시공원 유지관리 및 보수 정비	○ 위 치 : 봉화산근린공원 ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 9. ○ 사 업 비 : 200백만원 ○ 사업내용 : 휴게,체육시설설치, 노후시설 보수, 등산로 계단 정비, 수목식재 등	○ ‘15. 1. 16. : 추진계획 수립 ○ ‘15. 2. ~ 4. : 실시설계용역 ○ ‘15. 6. 8. : 공사착공 ○ ‘15. 8. 14. : 공사준공	○ ‘15. 9.~ 12. : 공원유지관리
		○ 위 치 : 봉화산근린공원 ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 9. ○ 사 업 비 : 300백만원 ○ 사업내용 : 진입광장 조성, 휴게시설 및 운동기구 설치, 우배수공사, 수목식재 등	○ ‘15. 1. 14. : 추진계획 수립 ○ ‘15. 2. ~ 4. : 실시설계용역 ○ ‘15. 5. 27 : 공사착공 ○ ‘15. 9. 11 : 공사준공예정	○ ‘15. 9.~ 12. : 공원유지관리
		○ 위 치 : 용마도시자연공원 ○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 9. ○ 사 업 비 : 400백만원 ○ 사업내용 : 진입로 정비, 휴게시설 및 운동기구설치,우배수공사, 수목식재 등	○ ‘15. 1. 14. : 추진계획 수립 ○ ‘15. 2. ~ 4. : 실시설계용역 ○ ‘15. 7. 8. : 공사착공 ○ ‘15. 9. 21. : 공사준공예정	○ ‘15. 9.~ 12. : 공원유지관리
		○ 위 치 : 용마폭포공원 ○ 사업기간 : 2015. 4. ~ 11. ○ 사 업 비 : 200백만원 ○ 사업내용 : 분수시설 보완 및 분수 경관조명설치	○ ‘15. 4. 6. : 추진계획 수립 ○ ‘15. 4. ~ 8. : 실시설계용역 ○ ‘15. 9. : 공사발주	○ ‘15. 9. : 공사착공 ○ ‘15. 11. : 공사준공예정
공원조성과	청소년 체험의 숲 조성	○ 위 치 : 망우로 산33 일대 ○ 면 적 : 10,000㎡ ○ 사업내용 : 숲체험시설, 운영센터, 쉼터 설치 등	○ ‘15.1.27 : 사업추진계획 수립 ※ 설계용역 완료(‘13.10 ~ ‘14.12) ○ ‘15.2.13 : 계약심사 ○ ‘15.3.20 : 공사발주 ○ ‘15.4 ~ 10 : 공사시행 (준공기한 ’15.10.16)	○ ‘15. 11 ~ ’16. 2 : 조례일부개정 운영자 선정, 시험운영 ○ ‘16. 3 : 시설개장
	봉화산근린공원 (중랑) 조성	○ 위치 : 중랑구 묵동 산46-1일대 (화약고 이전부지 등 3개소) ○ 사업면적 - 토지보상 26,032㎡, - 공원조성 15,357㎡ ○ 사 업 비 : 6,214백만원 ○ 사업내용 - 토지보상 : 화랑마을 뒤, 태릉중학교 뒤 - 공원조성 : 옹기 및 목공예, 체험장조성 등	[ 보상 ] ○‘15. 1.22. : 실시계획 열람공고 ○‘15. 2.12. : 실시계획인가고시 ○‘15. 3.10. : 보상계획열람공고 ○‘15. 7.03. : 보상완료 및 소유권 이전 [ 공사 ] ○‘15. 3.17.~ 5.18. : 설계공모(지명) 및 선정 ○‘15. 5.26. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ○‘15. 7.16 : 공원조성계획안 열람공고	○‘15..9.15 : 도시공원위원회 심의 ○‘15.10 : 공사발주 ○‘16. 6 : 공사준공
	동네뒷산 공원조성 (용마도시자연공원 면목고 뒤)	○ 위치 : 면목동 산29-1 일대 면목고 뒤 ○ 사업면적 - 토지보상 8,007㎡, - 공원조성 10,384㎡ ○ 사 업 비 : 2,594백만원 ○ 사업내용 : 토지보상 및 공원조성	[ 보상 ] ○‘15. 2.06. : 실시계획 열람공고 ○‘15. 2.27. : 실시계획 인가고시 ○‘15. 3.24. : 보상계획 열람공고 ○‘15. 3.31. : 보상완료 및 소유권 이전 [ 공사 ] ○‘15. 7.14 : 서울시 설계심의	○‘15. 9 : 공사발주 ○‘15. 12 : 공사준공
	동네뒷산 공원조성 (봉화산근린공원 신내10단지 뒤)	○ 위치 : 신내동 산127-7 일대 신내10단지 뒤 ○ 사업면적 - 토지보상 3,524㎡, - 공원조성 11,063㎡ ○ 사 업 비 : 2,555백만원 ○ 사업내용 : 토지보상 및 공원조성	[ 보상 ] ○‘15. 2.27. : 실시계획 열람공고 ○‘15. 3.20. : 실시계획 인가고시 ○‘15. 4.01. : 보상계획 열람공고 ○‘15. 3.31. : 보상완료 및 소유권 이전 [ 공사 ] ○‘15. 8. 26 : 서울시 설계심의	○‘15. 9 : 공사발주 ○‘15. 12 : 공사준공
조경과	지정보호수 유지관리	○ 대상 : 중랑구 면목동213-3(양지마을마당) ○ 규모 : 보호수 1주 ○ 내용 : 영양공급, 수관조절, 병해충방제 등 ○ 사업비 : 6백만원	○ ’15. 8. 4. : 공사준공
	노후 마을마당 보수정비	○ 위치 : 정자목․봉화 마을마당 ○ 면적 : 459㎡ ○ 내용 : 노후 시설물 정비 및 수목보식 등 ○ 사업비 : 30백만원	○ ’15.8. 26. : 공사준공
	사계절 꽃길 조성	○ 위 치 : 중랑구 망우동 (망우사거리~체육화사거리) ○ 내 용 : 걸이화분 2,500m ○ 사업비 : 34백만원	○‘15. 3.～ 8. :봄꽃, 여름꽃 식재완료	○‘15. 9. ～ 11. : 가을, 겨울꽃 식재
	에코스쿨 조성	○ 위 치 : 중랑구 상봉중학교, 신현중학교 ○ 기 간 : 2015. 1 ~ 11 ○ 내 용 : 옥상녹화, 유휴공지 녹지 조성 등 ○ 사업비 : 150백만원	○‘15. 3. : 공사착공	○‘15. 9. : 공사준공
	가로수 생육환경 개선	○ 위 치 : 사가정로, 겸재로, 봉우재로 ○ 규 모 : 3,600㎡, 50주, 20조 ○ 내 용 : 띠녹지 조성·정비, 메워심기, 뿌리융기 보호판 정비 등 ○ 사업비 : 966백만원	○‘15. 8. : 공사비 배정	○‘15. 9. ~ 10. : 공사시행
	가로변 녹지량 확충	○ 위 치 : 중랑구 면목동 1509-5 (면목천로) ○ 내 용 : 교통섬 녹지 조성(수목식재) 42㎡ ○ 사업비 : 10백만원	○ ‘15. 6. : 공사준공
	수목식재 사후관리	○ 위 치 : 관내 녹지대 ○ 기 간 : 2015. 1. ~ 12. ○ 내 용 : 녹지대 식재 수목 유지관리 - 제초, 급수, 시비, 병해충방제, 가지치기 등 ○ 사업비 : 128백만원	○ ‘15. 1. ~ 8. : 유지관리	○ ‘15. 9. ~ 12. : 유지관리
자연생태과	하천생태복원 및 녹화사업	○ 위 치 : 중랑천(중랑구, 월릉교~장평교) ○ 사업기간 : 2015. 1 ~ 10 ○ 사 업 비 : 454백만원 ○ 사업내용 : 녹음수목 및 사계장미 등 식재	○ ‘15. 2. 3: 사업계획 수립 ○ ‘15. 2. 27.: 설계용역비 재배정 ○ ‘15. 7. 10.: 공사비재배정 ○ ‘15. 7.: 공사발주	○ ‘15. 11. : 공사완료
	토착수종 식재 및 도시숲 복원	○ 위 치 : 중랑구 망우동 산 57-3일대 ○ 면 적 : 5ha ○ 사 업 비 : 56백만원 ○ 사업내용 : 고사목 정리 및 수목식재 등	○ ‘15. 1.: 계획수립 ○ ‘15. 5.: 설계심의 ○ ‘15. 5. ~ 6. : 수목식재 완료
	근교산 등산로 정비 (용마산)	○ 위 치 : 중랑구 망우본동 산57-3번지 일대 ○ 규 모 : 6km ○ 사 업 비 : 173백만원 ○ 내 용 : 노면정비, 배수로정비, 휴게시설 설치, 샛길폐쇄 등	○ ‘15. 1. : 추진계획 수립 ○ ‘15. 3. ~ 5. : 설계시행 ○ ‘15. 5. ~ 9. : 공사 시행	○ ‘15. 9. : 공사완료
	근교산 등산로 정비(중랑둘레길)	○ 위 치 : 중랑구 중랑둘레길 (면목동 산1-3번지 일대 등) ○ 규 모 : 30.5km(대순환로 16km, 소순환로 8km, 접근로 정비 6.5km ○ 사업비 : 1,000백만원 ○ 내 용 : 노면정비, 배수로정비, 휴게시설 설치, 샛길폐쇄 등	○ ‘15. 1. : 추진계획수립 ○ ‘15. 4. : 설계심의 ○ ‘15. 9. : 공사비 재배정	○ ‘15. 9. : 공사발주 ○ ‘15. 12. : 준공 예정
	숲가꾸기	○ 위 치 : 중랑구 망우동 산 57-3 ○ 규 모 : 35ha ○ 사 업 비 : 46백만원 ○ 내 용 : 솎아베기 및 나무가꾸기 등	○ ‘15. 1. : 계획수립 ○ ‘15. 2. : 예산재배정	○ ‘15. 3 ~ 11. : 사업시행 (11월 완료 예정)
	소규모 생물서식 공간 조성	○ 위 치 : 중랑구 면목동 31-25 용마산 유아숲체험장 ○ 기 간 : 2015.01. ~ 10. ○ 사업비 : 50백만원 ○ 내 용 : 생태연못 조성 및 수목식재 등	○ ‘15. 1. : 사업추진 계획수립 ○ ‘15. 3. ~ 5. : 설계용역실시 ○ ‘15. 8. 25 : 공사착공	○ ‘15. 8.25 ~ 9.23 : 공사시행
산지방재과	산사태 예방 사방사업	○ 위치 : 3개소 망우동 산48-1(망우공원) 망우동 산52-4(망우산) 망우동 산64-8(용마산) ○ 내용 : 사방사업(산지사방), 산림내 위험사면 정비 ○ 사업비 : 120백만원	○ `14.. 4 ~ 10 : 사업 대상지 조사 및 선정 ○ `14. 10 : 사업 추진계획 수립 ○ `14. 10 ~ 2 : 실시설계, 설계심의, 계약심사(일상감사) ○ `15. 2 ~ 3 : 공사발주 ○ `15. 3 ~ 6 : 공사시행
중부공원녹지 사 업 소	중랑캠핑숲 배수시설등 시설보완	□ 위 치 : 서울 중랑구 망우로87길 110 □ 규 모 : 3,500㎡ (가족캠프존, 청소년문화존 등 3개소) □ 사업기간 : 2015. 1 ~ 10 □ 사 업 비 : 300백만원 □ 사업내용 - 배수시설 보완 350m, 생태연못 보수 600㎡, - 뜀동산 지붕설치, 수목식재 등	`15. 1 : 시설 재정비계획 수립 ‘15. 4 : 실시설계 용역 ‘15. 6 : 공사계약, 착공	15.11 공사준공
	중랑캠핑숲 주차장 확충공사	□ 위 치 : 서울 중랑구 망우로87길 110 □ 규 모 : 약 880㎡ (폭11m×길이80m), 주차대수 약 28대 □ 사업기간 : 2015. 1 ~ 8 □ 사 업 비 : 600백만원 □ 사업내용 : 중랑캠핑숲 공원내 주차장 확충 - 주차장 28면 확충 (당초 25면 → 53면)	15. 3 : 기술용역타당성 심의 및 설계용역 15. 5 : 유관기관 및 주민설명회 개최 15. 8 : 도시공원심의위원회 개최 15. 9 : 공사발주 및 착공	15.11 공사준공