연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	비고
계	도시기반시설본부	47개 공사장	토목부21,건축부5,설비부1,방재시설부6 도시철도 토목부9, 사업부4, 설비부1
소계	시 설 국	33개 공사장	토목부21,건축부5,설비부1,방재시설부6
	토 목 부	21개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,673	2001-12-29	2016-05-19	57.0
2	강남순환도시고속도로(5공구)	L=5.1km, B=6~8차로	4,029	2007-11-20	2016-05-19	65.5
3	강남순환도시고속도로(6-1공구)	L=1.13km, B=3~4차로	1,442	2009-05-20	2016-05-19	76.2
4	강남순환도시고속도로(6-2공구)	L=2.4km, B=8차로	1,151	2009-04-01	2016-05-19	85.6
5	강남순환도시고속도로(7-1공구)	L=1.04km, B=6차로	685	2010-06-01	2016-05-19	74.0
6	강남순환도시고속도로(7-2공구)	L=2.7km, B=6차로	1,861	2008-04-01	2016-05-19	88.7
7	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	2,215	2002-07-03	2018-07-30	28.3
8	도시고속도로연결램프(정릉길)설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	122	2013-12-01	2016-12-31	11.0
9	남부순환로-오정대로간 도로개설공사	도로개설:B=40m L=1.23㎞(폭40m, 교량1개소)	98	2010-09-29	2015-12-30	79.5
10	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	1,705	2008-12-30	2015-12-31	59.2
11	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	558	2008-02-15	2015-12-31	56.4
12	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	고가철거 및 신설 L=753m	171	2011-01-06	2015-12-31	81.8
13	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2015-12-31	71.2
14	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	L=867m, B=4차로(터널 2개소)	240	2012-12-27	2015-12-26	82.6
15	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	1,760	2010-03-22	2015-08-22	24.6
16	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	253	2010-10-11	2017-12-31	48.1
17	응봉교 확장 및 성능개선 공사	중로아치교 225m, 접속교량 407m	456	2008-10-20	2015-12-31	92.4
18	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	399	2010-10-11	2015-12-31	58.6
19	잠실역 버스환승센터 조성사업	버스환승센터(A=19,797㎡, 지하1층) 환승정류장(8면), 버스주차장(23면)	828	2014-05-28	2016-09-27	43.0
20	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km	1,690	2010-10-08	2017-12-31	22.1
21	장안교(구교) 성능개선공사	교량성능개선(폭17m 연장218m)	150	2014-12-10	2016-12-15	-
	건 축 부	5개 공사장
22	돈화문 국악예술당 신축공사	지하3층, 지상1층, 연면적 1,800㎡	54	2013-12-17	2015-11-30	63.4
23	서울과학관건립공사	지하1층, 지상3층 연면적 12,330㎡	99	2014-01-13	2016-01-12	20.2
24	양천주민편익시설 리모델링 및 증축공사	지하3층, 지상1층 연면적 5841㎡	126	2014-12-01	2016-06-30	31.1
25	재사용플라자건립공사	지하2층, 지상5층 연면적16,529㎡	444	2015-01-15	2017-01-14	11.4
26	서울시어린이 병원 건립공사	지하2층, 지상5층 연면적11,950㎡	235	2013-01-02	2017-04-30	54.1
	설 비 부	1개 공사장
27	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리용량 : 4,000㎥/일	635	2012-11-15	2015-11-09	71.7
	방재시설부	6개 공사장
28	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km,D=10.0m 유도:L=1.097km,D=5.5m	954	2013-05-27	2016-05-25	16.6
29	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	2,786	2009-11-09	2015-08-09	42.1
30	중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화	고도처리시설 개량 88만톤/일 시설현대화사업 25만톤/일	3,059	2009-02-13	2016-02-28	76.5
31	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사	복개: A=33,978㎡, 공원화: A=36,920㎡	261	2013-10-01	2016-09-29	66.7
32	공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동배수관로	공릉2빗물펌프장 :펌프장 신설 520㎥/min, 면목4동:배수관로D1,500mm*2련, L=143m	52	2013-01-08	2016-07-07	47.8
33	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	서울대학교 정문 앞 광장 저류조 40,000㎥ 서울대학교 내 분산형 저류조 25,000㎥	339	2012-06-13	2017-05-31	78.9

10월 안전점검 대상공사장

	도시철도국	14개 공사장	도시철도토목부9, 도시철도사업부4 도시철도설비부1
	도시철도사업부	4개 공사장
34	경전철 우이신설 1공구	L=1.9km(정거장 3개소)	1,070	2009-09-15	2016-11-30	77.1
35	경전철 우이신설 2공구	L=3.2km(정거장 4개소)	1,157	2009-09-15	2016-11-30	79.3
36	경전철 우이신설 3공구	L=3.1km(정거장 3개소)	967	2009-09-15	2016-11-30	76.0
37	경전철 우이신설 4공구	L=3.1km(정거장 3개소)	1,006	2009-09-15	2016-11-30	77.2
	도시철도토목부	9개 공사장
38	지하철9호선 918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,377	2010-02-19	2016-02-17	64.3
39	지하철9호선 919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2015-12-29	41.0
40	지하철9호선 920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2015-12-29	55.5
41	지하철9호선 921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,707	2009-12-31	2015-12-29	54.5
42	지하철9호선 922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,317	2010-09-16	2016-03-17	63.8
43	지하철9호선 923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	982	2010-09-20	2016-03-21	62.4
44	경전철 우이~신설 궤도공사	L=23.4km(정거장 1개소)	198	2009-09-15	2016-11-30	76.0
45	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	111	2015-03-17	2019-03-28	-
46	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	386	2015-03-30	2018-07-10	-
	도시철도설비부	1개 공사장
47	경전철 우이~신설 시스템,송변전,전차선,통신공사		46	2009-09-15	2016-11-30