서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	관급자재(아스콘) 수량 변경 요청

우리과에서 시행중인 한강교량일상유지보수공사에 소요되는 관급자재(아스콘) 수량 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재(아스콘) 수량 변경 요청 내역

건명	계약 번호	품명	규 격	단위	수량			수량 변경 사유	비고
					당초	변경	증감
내유동성 아스팔트 구매(한강교량일상유지 보수공사)	201506 3142200 (계약업체- 세진 아스콘(주)	아스 팔트 콘크 리트	WC-6, 13mm, PG-76-22 1등급골재 (편장석률 10%이하, 인장강도비 0.8이상)	톤	2,700	2,885	(증) 185	-한강교량일상유지보수공사 1공구 포장시공 물량 증가	계약금액 당초:256,059,900원 변경:273,604,740원 증) 17,544,840원 (10원 이하 절삭)

나. 예산과목 : 교량관리,한강교량관리, 한강교량 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비  (추가 추산금액  17,544,840 원).   끝.

	교량안전과장
주무관	백운경		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	11/24 代하현석
협조자
시행	교량안전과-5441	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개