문서번호	총무과-13994
결재일자	2015.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관	총무과장		경영지원부장		서울시립미술관장
이진섭	代임대성		권영섭		11/27 김홍희
협 조
	학예연구부장					백기영
	전시과장					임근혜
	교육홍보과장					유수기
	수집연구과장					최관호

전기설비 정기검사에 따른

미술관 본관 시설물 조치계획

2015. 11.

서울시립미술관

(총 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	■
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	□
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

전기설비 정기검사에 따른

미술관 시설물 조치계획

우리 미술관(서소문 본관) 전기설비 정기검사(법정검사) 시행으로 인해 장시간 정전이 발생되므로 정전에 따른 시설물 안전조치 계획을 수립 시행하고자 합니다.

관련근거

◯ 2015년도 서울시립미술관 전기시설물 안전관리계획(총무과-149, 2015.01.6)

◯ 전기사업법 제65조, 동법시행규칙 제32조5항[정기검사]

정기검사[정전작업] 개요

◯ 검 사 명 : 자가용전기설비 정기검사

◯ 일    시 : 2015년 11월 25일(수) 21:00 ~ 23:30

◯ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부(검사부)

정전에 따른 조치대상 시설물

◯ 전기․통신설비 : 수변전설비, 발전설비, CCTV설비, 자동교환기설비

◯ 기계설비 : 항온항습설비, 보일러 및 공조설비

◯ 방재설비 : 소화전 소화 감지설비, 방재감시설비, 출입자통제시스템설비

◯ 방범설비 : 무인경비시스템설비

정전에 따른 시설물 조치계획

◯ 비상근무자 비상근무 실시(6명)

- 총  괄 : 전기담당

- 총무과 : 기계담당 최영주,

- 방재실 : 전기안전관리자 염윤섭, 통신안전관리자 고옥철

- 방호실 : 당직근무자,경비용역자- 각1명

◯ 업무분장

- 지휘 총괄 : 전기담당 이진섭

- 전기설비분야 작업총괄: 전기안전관리자 염윤섭, 박연용

- 기계설비분야 작업총괄 : 기계설비담당 최영주

- 통신설비분야 작업총괄 : 통신담당 고옥철

- 본관 전기안전관리자 염윤섭 : 특고압 수전설비 담당책임자

(특고압 검사 안내 담당과 저압 검사 안내 담당을 지정하여 안내  실시)

- 당직,경비근무자 : 청사,경비관리관리 책임자

◯ 조치계획

- 정전 전 점검

(무인경보시스템 비상전원공급, 화재경보수신장비 등 사전해제조치  포함)

- 특고압 설비 및 저압배전설비 정기검사 및 내부 청소

- 정전 후 점검(무인경보시스템, 화재수신장비 등 원상복구조치 포함)

- 정전기간(21: 00~22:00, 약 1시간) 동안 비상발전기 가동

◯ 시간대별 세부 조치(작업)계획

시간대별	작업내용	세부작업사항
20:30	비상근무자 집합(출근)	- 직원 퇴실 확인
20:30 ~ 20:40	안전교육 및 작업분장 안내
20:40 ~ 21:00	정전 전 점검 및 사전안전조치	- 무인경비시스템 비상전원공급 설정 - 각종설비 사전 전원차단 보호 - 발전기 가동
21:00	정전	- 특고압 개폐기 개방
21:00 ~ 22:50	특고압설비 정기검사(정전작업)	- 정기검사 안내 및 배전반 청소
22:50 ~ 23:00	특고압설비 수전 전 점검	- 특고압설비 이상유무 확인
23:00 ~ 23:30	특고압 기기 수전	- 수전 후 이상유무 확인
23:00 ~ 23:30	수전 후 점검 및 설비 복구 안전공사 검사결과 확인	- 무인경비 경비 정상설정 조치 - 교환기,화재수신반,출입통제시스템 복구 - 각종 설비사전 전원차단 보호해제 조치 - 항온항습기, 보일러 설비 동작상태 확인
23:30	비상근무 해제 및 귀가

행정사항

◯ 각 실과 직원은 검사당일(11월25일) 20:30까지 퇴실 완료

◯ 각 실과는 정전에 따른 피해가 발생하지 않도록 사전 조치 철저.

◯ 정전 작업 중 직원 및 시설물 안전사고가 발생하지 않도록 각별한 조치를 취하고, 사고발생시 응급조치 및 지휘계통에 의한 보고 철저.

◯ 방호실은 정전 작업 중 도난 사고가 발생하지 않도록 조치할 것.

◯ 전원 복구 후 각종장비(전산시스템 포함) 이상유무 점검 철저.  끝.