문서번호	교량안전과-6522
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
서성만		유제천	12/08 이용심
협조

- 성수대교 외 1개소 정밀점검용역 - 설계변경 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

- 성수대교 외 1개소 정밀점검 용역 -

설계변경 시행계획 보고

성수대교 정밀점검용역 준공시기가 도래함에 따라 설계변경을 시행하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 성수대교 외 1개소 정밀점검 용역

대상교량 : 성수대교, 잠실철교

용역기간 : 2015.6.16. ~ 2015.12.12

총용역비 : 177,258천원

계약상대자 : ㈜정신이앤시 대표 김종출 외 1명

Ⅱ		추진사항

‘15.4.14   용역발주

‘15.6.16   계약 및 착수

‘15.11.2   중간보고회/자문회의

‘15.12.7   최종보고회

Ⅲ		설계변경 내역

설계변경 근거 : 교량안전과-4331(2015.11.6.) 자문회의 개최결과 보고

- 붕괴유발부재 중 수직재(행어) 라미네이션 조사, 염화물함유량시험, 성수대교 추모비 조사 낙찰차액 사용 시행

설계변경 사유 : 자문비 실 정산, 성수대교 추모비 조사, 강재비파괴시험, 염화물 함유량 조사 반영

용역비 증 ·감 내역

구 분	당 초	변 경	증·감
용역비	177,258,000	180,634,000	증) 3,376,000

수량 증.감 내역

공 종	단위	수 량		공 사 비
		당 초	변 경	당 초	변 경	증 · 감
자문회비 지급	명	17	5	1,763,963	500,000감	감) 1,263,963
강재비파괴시험	개소	-	12	-	1,200,000	증) 1,200,000
염화물함유량시험	개소	-	10	-	300,000	증) 300,000
성수대교추모비 조사	식	-	1	-	2,833,060	증) 2,833,060
합계						증) 3,376,000

Ⅳ		향 후 계 획

상기와 같이 설계변경 및 변경계약을 재무과에 의뢰코자 함

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.