문서번호	토목부-26817
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	터널건설과장	토목부장		시설국장
이상욱	권혁대	노우성		12/14 형태경
협 조
	주무관		강철규

시설공사 등 준공기한 연기

(용비교~해당중간 도로개설공사)

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시설공사 등 준공기한 연기

(용비교~행당중간 도로개설공사)

본 공사를 장기계속공사로 시행하고 있으나, 연차별 예산이 미반영('13년 30억원, '14년 30억원, '15년 30억원)되어 사업비 부족으로 당초 공사기한 내에 공사 준공이 불가함에 따라 공정 추진사항을 고려하여 준공기한을 연기하고자 검토 보고드림.

※ 공사기간 : 당초 '07.03.22.~'15.12.31. → 변경'07.03.22~'16.05.31.

1		관련근거

▢ 감리부(대외[발])-2015-6684호(2015.12.09.) 설계변경도서 제출

2		공사개요

○ 위    치 : 성동구 금호4가동 ~ 성수1동 구간

○ 규    모 : 도로(용비교) 확장 및 도로개설

- 왕복4차로 → 6차로 확장 (폭B=5.2m, 연장 L=719m)

○ 공사기간 : 2007. 3. ∼ 2015.12.

○ 도 급 비 : 26,477백만원

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링,(주)선진엔지니어링  ○ 시 공 사 : 한신공영㈜

3		보고내용

▢ 본 공사의 전체 공정율이 91.0%로 준공기한이 '15.12.31.이나 연차별 예산이 미반영('13년 30억원, '14년 30억원, '15년 30억원)되어 사업비 부족으로 당초 준공기한내 준공이 불가함에 따라 '16. 5.31.까지 준공기한 연장이 필요함.

▢ 총사업비 현황                                      (단위:백만원)

구 분		계	기투자 (~2014년)	2015년	2016년	비고
계		34,128	27,298	3,000	3,830
	시 설 비	27,968	21,770	2,650	3,548
	감 리 비	2,460	1,828	350	282
	기본설계비	400	400	0	0
	실시설계비	3,300	3,300	0	0

▢ 잔여공정 현황

구 분	공 정 내 용	연장기간	비고
보도 정비	▪ 용비교~응봉산 연결로 보도데크 설치	152일
자전거도로 복구	▪ 하부도로 자전거도로 복구
중랑천 둔치 복구	▪ 중랑천 구간 공사용 가도 철거 ▪ 주변 초화류 식재, 법면보호 등
교통안전시설 설치	▪ 교통안전시설 설치 및 정리 ▪ 낙하물방지공 설치

▢ 전체 공사기간 변경

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
시설공사(총괄)	'07.03.22.~'15.12.31.	'07.03.22.~'16.05.31.	증)152일
책임감리용역(총괄)	'07.01.10.~'16.01.31.	'07.01.10.~'16.06.30.	증)151일
폐기물처리용역(총괄)	'12.04.05.~'15.12.31.	'12.04.05.~'16.05.31.	증)152일

4		검토의견

▢ 본 공사의 현재 공정율이 91.0%로 준공기한이 '15.12.31.이나   연차별 예산이 미반영('13년 30억원, '14년 30억원, '15년 30억원)되어 사업비 부족으로 당초 준공기한내 준공이 불가함에 따라 공정 추진현황을 반영하여 상기와 같이 시설공사, 감리용역, 폐기물처리용역에 대한 준공기한을 연장하여 추진하고자 함.

▢ 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자 귀책사유 없음 (지체상금 미부과)

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.