검 토 의 견 서

○ 검토건명 : 설계변경(전체11회, 9차2회)

○ 용 역 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

1. 검토목적

-.용비교-행당중간 도로개설공사와 관련하여 실시공 물량에 따라 설계변경 요청이 있어 이를 검토하여 원활한 공사추진에 목적이 있음.

2. 검토내용

1)관련법규

-.공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)

2)공사개요

-.연    장 : L=718.39m

-.폭    원 : B=19.5~26.4m

-.교    량 : L=519.778m, B=26.4m(6차로확장)

-.토공도로 : L=198.612m, B=19.5m(5∼6차로 확장)

-.교 차 로 : 1개소(평면교차로)

-.중랑천 오염토 정화공사 1식, 부대공사 1식

3)9차공사 예산현황

금액단위:백만원

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도 급 비	2,208	2,221	13
감 리 비	350	350	-
관급자재	151	119	-32
폐기물처리비	21	53	32
전기공사비	270	257	-13
합 계	3,000	3,000	0

4)설계변경 내용

가)공사비 변경

금액단위:백만원

구 분		전 체			9차공사			비고
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
도급	공급가액	25,444	25,444	-	2,007	2,019	12
	부가세	2,544	2,544	-	201	202	1
	소계	27,988	27,988	-	2,208	2,221	13
관급자재		1,278	1,278	-	151	119	-32
총 계		29,266	29,266	-	2,359	2,340	-19

나)공사기간

구 분	당 초		변 경		비고
	착공일	준공일	착공일	준공일
전 체	2007.03.22	2015.12.31	2007.03.22	2016.05.31	증)5개월
9차공사	2015.03.01	2015.12.31	2015.03.01	2015.12.31	변경없음

다)공종별 변경 내용

금액단위:백만원

공 종	전 체			9차공사			비고
	당초	변경	증감	당초	변경	증감
1.공통공사	118	118	-	-	-	-
2.토 공	798	798	-	-	-	-
3.배수 및 옹벽공사	317	317	-	-	-	-
4.구조물공사	11,643	11,643	-	1,592	1,473	-119
5.포장공	1,413	1,413	-	82	219	137
6.부대공	1,582	1,582	-	14	14	-
7.오염토정화공사	2,597	2,597	-	-	-	-
8.교통안전시설공	136	136	-	-	-	-
제 잡 비	2,349	2,349	-	187	189	2
제요율적용제외공종	889	889	-	-	-	-
오염토정화처리	2,929	2,929	-	-	-	-
물가변동액	673	673	-	132	124	-8
공 급 가 액	25,444	25,444	-	2,007	2,019	12
부가가치세	2,544	2,544	-	201	202	1
도 급 액	27,988	27,988	-	2,208	2,221	13

3.검토결론

-.설계변경 내용에 대한 검토결과 실시공 물량에 따른 설계변경(9차2회)은 적정하게 반영된 것으로 판단되며, 발주처 사업추진계획(예산배정)에 따른 전체공사 기간연장(6개월)은 적정한 것으로 판단됩니다.

붙  임 : 설계변경사유서 1부.  끝.

2015. 12.

검토자  책임감리원  장 현 종