2015 길동생태공원 시설정비사업

(공원조성과 / 동부공원녹지사업소)

□ 2015 사업개요

◦위    치 : 강동구 천호대로 1291(길동 1) 길동생태공원

◦규모(면적) : 반딧불이 전시관 150㎡

◦사업기간 : 2015. 6～ 2016. 6(공정율  0 %, 15.12월말 현재)

◦사 업 비 : 230백만원(본청재배정 120백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원확충,  노후공원재조성, 테마가 있는 서울의 공원조성, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역                                           (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0
설 계 비		-	-	0	0	0	0
공 사 비		-	-	120,000,000	0	120,000,000	0
	도 급 비	-	-	120,000,000	0	120,000,000	0
	관 급 비	-	-	-	-	-	-
보 상 비		-	-	-	-	-	-
감 리 비		-	-	-	-	-	-
시설부대비		-	-	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-	-

◦이월사유(사고이월 사유를 제3자도 납득할 수 있도록 육하원칙에 따라 구체적으로 기재)

- 당초 계획된 사업 대상지 변경으로 인해 예정공사비 증액과 공원조성계획 결정 변경 절차로 인해 2015년 12월 시공업체 선정 후 발주하여 내년 상반기 까지 공사를 진행하여 사고이월함.

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.