문서번호	행정지원과-11448
결재일자	2015.12.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	행정지원과장	서울도서관장	문화기획관		문화본부장
김태현	김홍기	代김홍기	양현미		12/30 이창학
협 조

헌책 보물섬 조성사업 추진계획

2015. 12.

문 화 본 부

(서울도서관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

헌책 보물섬 조성사업 추진계획

유휴시설인****************************을 활용하여 헌책 모집․보관․열람․판매, 북카페, 책 관련 전시장 등 책 문화공간을 조성하고 헌책방 공동창고 운영 등을 통해 독서문화 및 헌책방 활성화에 기여하고자 함

추진근거

○ 시장 요청사항(2014. 8. 25.)

- 서울시에서 건물을 매입하여 임대하는 방식으로 헌책방을 많이 조성해 주시고 운영은 민간단체에서 하도록 해주시기 바람

○ 시장 요청사항(2015. 3. 1.)

- 잠실나루역 근처 舊 암웨이 창고형 매장 건물을 활용하여 책과 모든 기록 박물관 및 헌책 정거장을 만드는 것을 검토 요청

사업개요

○ 위    치 : ******************

○ 규    모 : 지상1층, 1,465㎡(3동 기존 건축물을 용도변경 등 리모델링)

○ 사업내용 : 헌책의 모집‧보관‧열람‧판매, 북카페, 책 관련 전시장 등 조성

○ 사업기간 : 2015. 6. ∼ 2016. 12.

○ 소요예산 : 2,971백만원(공사비 2,637, 설계·감리비 144, 조성비 150, 안전진단 등 40)

추진경위

○ ‘15.03.06 : 시장 요청사항 통보(1차 시장 요청사항 : ’14.08.25)

○ ‘15.05.01 : 사업 추진 관련 보고(시장)

○ ‘15.05.22 : 유관기관 업무협의(송파구)

○ ‘15.06.29 : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 계약 및 착수

○ ‘15.08.18 : 용역 중간보고회(관계전문가 등 자문)

○ ‘15.08.26 : 주민설명회(2회 주민설명회 : ‘15.08.31)

○ ‘15.09.11 : 총괄건축가 자문(의견 : 우선 30억원 이내로 사업 진행)

○ ‘15.09.21 : 용역 최종보고회(관계전문가 등 자문)

○ ‘15.09.24 : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 준공

○ ‘15.12.01 : 구조안전진단 용역 착수

○ ‘15.12.22 : 구조안전진단 용역 준공

조성계획(안)

○ 기본방향

- 독서문화 및 헌책방 활성화를 위한 책 문화공간 조성 및 헌책방 공동창고 운영 등

○ 조성내용

- 서가 및 열람 공간 800㎡, 북카페 및 이벤트 공간 150㎡, 공용 공간 275㎡, 공동 창고 190㎡, 사무실 50㎡ 등

○ 운영방안

- 헌책 등 판매, 창고 임대, 카페 운영 등의 수익사업으로 직영운영 또는 위탁운영(창고는 헌책방 운영자 운영), 시설물 임대 등 다각적 검토 후 결정 예정

○ 기대효과

- 유휴시설을 활용, 책 문화공간을 조성하여 시민들의 독서문화 욕구 충족

- 헌책의 유통구조 개선 및 공동창고 운영 등을 통한 헌책방 활성화 지원

소요예산 : 2,971백만원

○ 2015년 : 40백만원

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 20, 구조안전진단비 20

○ 2016년 : 2,931백만원

- 공사비 2,637, 설계비 115, 감리비 29, 조성비 150

향후일정

○ 2016.01.  : 실시설계 용역발주 예정

○ 2016.05.  : 실시설계 및 공사발주 예정

○ 2016.06.  : 공사착공 예정

○ 2016.12.  : 공사준공 및 개관 예정

**********************************