문서번호	물재생계획과-2257
결재일자	2016.2.19.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
협 조
	하천관리과장

「반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계」

유역분리터널(유입부) 발주 검토 보고

2016. 2

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계』

유역분리터널(유입부) 발주 검토 보고

강남역 일대 침수 해소를 위해 중기적인 대안으로 마련한 유역분리 터널에 대하여, 터널 유입부에 대한 계약심사가 완료됨에 따라 예산배정 등 전반적 사항을 검토 후 추진계획을 보고 드림

☐ 추진근거

❍ 강남역 일대 침수 해소를 위한 배수개선대책 추진계획

(하천관리과-2158 2015.2.10.)

☐ 사업개요

❍ 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역

- 용역명 : 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2015.9.25. ~ 2016.9.23.

- 용 역 비 : 1.608백만원

- 과업내용

▸ 역경사 관로개선(▣1.5m×1.5m@3, L=36m→2.0m×3.0m, L=66m)

▸ 유역경계조정  13.2ha

▸ 유역분리터널(D=7.5m,  L=1.3km)

☐ 추진경위

❍ ‘13.3.4 ∼ ’15.2.20 :『강남역일대 배수개선대책 검토 기본 및 실시설계』용역추진

- 용역결과 : 하수도 배수구역 경계조정 등(단기) + 유역분리터널(중기)

※ 용역주관사 파산으로 기본계획 수립 후 용역준공

❍ ‘15. 9.25 : 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역 계약

❍ ‘15.10. 7 : 용역 착수보고

❍ ‘15.10. 7 ∼ 현재  : 용역설계 진행중

【추진실적】

- 배수경계구역 조정 우선시공분 1차분 공사착공(‘16.1.27) 2차분 계약심사중

· 1,2차 총 공사비  2,212백만원(8.33ha) → ‘16.6월 공사완료 예정

- 터널유입부 계약심사완료(‘16.2.17)

· 총공사비 : 4,814백만원

· 사업규모 : □ 5.0×6.0(B×L), L=120m

▶ 계약심사 결과

`(단위 : 천원)

예산과목	예산액	심사요청액	심사금액	조정액	비고
강남역일대 침수방지	8,000,000	2,762,540	2,526,865	감)235,675	조정율 8.6%

※ 조정 총공사비 : 4,579백만원(도급비 2,527, 관급비 267, 이전비1,785)

☐ 검토의견

❍ 강남역 일대 침수피해 해소를 위하여 당초 계획한 유역경계조정과 유역분리터널에 대한 조속한 사업추진 필요

❍ 사업추진방법

- 사업발주 : 서초구청 시행(공사비 소규모로 서초구청내 소재)

- 사업기간 : 착공일로부터 1년

- 예산재배정 : 서초구 자체 일상감사 후 요청시 지급

【 터널 본선 사업추진 계획】

- 총 사업규모 : □ 5.0×6.0(B×L), L=3.7km(유입부 포함)

- 사업추진 : 2016.10 ∼ 2019.10월

※ 터널본선 설계중으로 용역계약 기간(‘16.9월)이전 설계완료 예정

☐ 향후계획

❍ ‘16.2.19 : 계약심사 결과 통보(서울시 → 서초구 물관리과)

❍ ‘16.2.20 ~ 3.20 : 공사발주(서초구)

❍ ‘16.3.20 : 공사계약 및 착공.

☐ 행정사항

❍ 강남역 유역분리터널(유입부) 사업비는 계약심사 범위내 서초구청 요청금액을 배정하여 발주 및 공사시행

※ 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 강남역일대 침수방지