문서번호	생태공원과-1288
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	05/09 장상규
협조
	주무관		석승우

『한강 이촌권역 자연성회복사업』

실정보고사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05.

한강사업본부

(생태공원과)

『한강 이촌권역 자연성회복사업』

실정보고사항 검토 보고

『한강 이촌권역 자연성회복사업』시행중 공사감독 부서인 시설관리공단의 실정보고에 대한 검토결과를 보고드림.

⇒ 공사감독3처-3060(2016.05.04.) 수상훈련장 접안시설 설치 검토

공사개요

공 사 명 : 한강 이촌권역 자연성회복사업

공사기간 : 2016. 02. 29 ~ 2017. 12. 19

도 급 비 : 금 3,315,472천원

도 급 자 : 임원개발(주) 대표 이대성

감 독 청 : 서울시시설관리공단

실정보고 검토

수상훈련장 접안시설 설치

- 현황 및 문제점

▸당초 이촌공원에서 운영하던 수상훈련장(한국청소년북서울연맹)이 뚝섬공원 장미원 저수호안으로 이전(수상기획과)함에 따라 당초 설계에 반영된 관공선이전비용에 현재설치된 도교 받침대 이동 및 설치로 반영되어 있어 이설장소의 접안시설 현장여건과 설치 규모 및형식이 적합하지 않음

▸설계용역사(동부엔지니어링)에서 제시된 접안시설 안에 대한 검토가 필요함

- 설계용역사 및 감독부서 검토내용

구분	1안	2안	3안
설치방법	옹벽구조물 설치 (콘크리트 옹벽+포장)	강구조물+강판 설치 (H빔강구조물+무늬강판)	강구조물+데크 설치 (H빔강구조물+데크)
시공 도면
장점	- 구조적 안전성 우수	- 안전성 확보 - 경제적이며 환경오염 없음	- 안전성 확보 - 환경오염 없음
단점	- 레미콘타설에 따른 가물막이 설치 등으로 환경오염 발생 - 공사비 과다	- 강구조물로 홍수나 자연재해 발생시 유실 우려 있음	- 상부 데크로 홍수나 자연재해 발생시 파손 우려 높음
개략 공사비	56,000천원	20,800천원	22,000천원
적용		◎

보고자의견

수상훈련장 접안시설 설치에 대한 시공성, 경제성, 안전성, 환경성 및 인근 유사사례를 고려한 설계용역사 및 감독부서의 검토 의견인 2안으로 적용하여 시공하고자 함.

우선 시행토록 감독부서인 시설관리공단으로 통보하고 변경사항에 대하여는 설계변경시 정산 반영토록 하고자 함.

붙 임 : 시설관리공단 실정보고 관련문서 및 보고서 1부. 끝.