보 고 서
TCM77CS00_010115025500:20401:2			★대리	팀장
				전결 05/04
문서번호	공사감독3처-3056
보존기간	준영구		협 조	과장
결재일자	2016.05.04.
공개여부	공개
제 목	공사현장 실정보고서(제1회,수상훈련장 접안시설)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업

나. 도 급 비 : 총 차  5,143,742,000(도급비 3,315,472,000 관급비 1,828,270,000)

1차분  3,023,470,000(도급액 1,700,000,000 관급비 1,323,470,000)

다. 공사기간 : 총 차  2016. 2.29 ~ 2017.12.19(1차분 : 2016. 2.29 ~ 2016.12.31)

라. 발 주 처 : 서울특별시 한강사업본부 공원관리부 생태공원과

마. 도 급 자 : 임원개발(주) 대표이사 이대성

2		보고내용

『상기 공사와 관련 발주처로부터 관공선이설에 따른 뚝섬 수상훈련장 접안시설 설치에 대한 검토요청이 있어【생태공원과-1174(2016.04.27)】 그에 대한 검토 보고임.

가. 발주부서 검토요청 사항

구분

검토요청사항

검 토 의 견

비고

부대공

▢관공선이설에 따른 뚝섬 수상훈련장 접안시설 설치가능 여부【생태공원과-1174(2016.04.27)】

●수상훈련장 이설에 따른 접안시설 설계서(동부엔지니어링)

에 대한 검토 보고임.

●설계용역사 검토내용(동부엔지니어링)

- 1안 역T형 옹벽구조물설치(CON'C옹벽 및 Slab 포장)

ㆍ장점 : 안전성 우수

ㆍ단점 : 레미콘타설에 따른 환경오염발생 및 가물막이 설치등            공사비 과다

- 2안 강구조물+강판설치(H-beam+무늬강판(상부))

ㆍ장점 : 안전성 확보 및 경제적, 환경오염 우려가 없음

ㆍ단점 : 영구적인 콘크리트 구조물이 아님으로 자연재해에 따른           유실 우려는 있음.

- 3안 강구조물+데크(H-beam+데크(상부))

ㆍ장점 : 안전성 확보

ㆍ단점 : 상부 데크는 홍수나 자연재해시 파손우려가 높음

●설계용역사 최종 선정 안 : 2안(강구조물+무늬강판)

- 선정사유 : 시공성, 경제성, 안전성, 환경성 및 인근 유사사례를              고려하여 제2안(강구조물+무늬강판)으로 선정함.

(별첨 참조)

●감독의견

- 당초 이촌지구에서 운영되던 수상훈련장이 발주처 내부 방침     으로 뚝섬으로 이설 결정됨에 따라,

- 접안시설 설치 설계서를 검토한 바, 전문 설계용역사(동부엔지니어링)

에서 시공성, 경제성, 안전성, 환경성에 대하여 기 검토 완료된     사항으로, 설계사 선정안이 2안으로 시공코자 하며,

- 공사중 발생될 수 있는 변경 사항에 대하여는 설계변경시 정산    처리코자 함.

3		개략공사비 증⦁감 현황

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증⦁감	비고
뚝섬 수상훈련장 접안시설	공 급 가	-	18,909,091	증)18,909,091
	부가가치세	-	1,890,909	증)1,890,909
	도 급 비	-	20,800,000	증)20,800,000

* 상기 금액은 개략공사비로 추후 변경 될 수 있음.

4		조치계획

상기 내용을 발주청에 제출하고 승인 결과에 따라 추후 설계변경시 정산 반영하고         공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 관련서류 1부.  끝.