과 업 내 용 서

【 용역명  : 동물복지지원시설 기본계획  】

2016. 5월

서 울 특 별 시

- 목   차 -

Ⅰ		과 업 개 요

3

Ⅱ		과업내용서

1. 과업의 명칭	4

2. 과업의 배경 및 목적	5

3. 과업의 범위	5

4. 과업수행 기간	6

5. 과업의 내용	6

6. 과업수행단계	7

7. 과업수행지침	7

가. 기본지침	7

나. 세부지침	8

8. 과업수행 일반지침	9

9. 보안대책	10

10. 성과품	12

가. 제출내용	12

나. 작성지침	12

라. 연구용역 결과물의 저작권	12

동물복지지원시설 기본계획

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명 : 동물복지지원시설 기본계획

2. 과업기간 : 계약일로부터 5개월

3. 수행기관 선정방법 : 수의계약(대상기관 : 서울연구원)

4. 과업의 목적

◦ 동물보호 및 복지 증진을 위한 공공 기반 시설인 「동물복지지원

시설」의 수요예측을 통한 건립 방향, 시설배치, 세부 운영방안

및 관련 제도 등 법령 정비안 제시

◦ 동물복지지원시설의 권역별 확대 조성 방안 마련

5. 과업의 필요성

◦ 서울시내 반려동물사가 100만, 반려동물을 기르는 시민이 200만이나, 동물보호정책을 추진할 실질적인 공공 영역의 기반 시설이 전무한 실정.

◦ 향후 반려동물의 지속적인 증가가 예상되고, 이로 인한 사회적 갈등과 문제들도 폭발적으로 증가하고 있어, 동물보호 및 복지 사업을 적극적으로 추진하기 위한 공공 시설의 조성이 요구됨

6. 과업의 범위

◦ 공간적 범위 : 봉천통합가압장(관악구 은천로23길7) 및 서울시 전역

◦ 시간적 범위 : 계약일로부터 5개월

◦ 내용적 범위 : 동물복지지원시설 기본계획 및 운영,

향후 권역별 확대 조성방안

Ⅱ		과업내용서

1. 과업의 명칭

◦ 본 과업의 명칭은 “동물복지지원시설 기본계획”(이하 “학술용역”이라 한다)이라 한다.

2. 과업의 배경 및 목적

가. 배경

◦ 1인 가구 증가, 노령화 추세와 더불어 반려동물이 증가하면서 동물  복지에 대한 사회적 관심과 적극적인 동물복지 정책 필요성이 대두되고 있고

◦ 위급동물의 구조 치료부터 유기동물 입양, 동물보호 교육·홍보 및 길고양이, 야생화된 유기견 등 다양한 동물 현안에 대한 종합적인 동물보호 정책을 사회적으로 요구하고 있으며

◦ 메르스 등 최근 발생 유행병들이 동물로부터 유래하고 있어 시민의 공중보건 향상을 위해서도 체계적으로 동물로 인한 전염성 질병의 관리 및 예방사업 추진하기 위해서 종합적이고, 실질적인 현장기구 필요

나. 목적

◦ 유기동물의 입양, 동물보호 시민 교육·홍보 및 동물학대 상담 등 종합적인 동물보호 정책 추진 기반 마련

◦ 풀뿌리 동물보호 시민운동을 지원하고 육성하기 위한 기반 조성

◦ 길고양이, 야생화된 유기견 등 동물로 인한 갈등 문제를 현장에서 시민과 함께 조정하고 해소하기 위한 민·관 협력 시설 조성

◦ 신속한 치료가 필요한 유기동물, 피학대 동물에 대한 즉각적인 보호 조치와 동물병원의 의료혜택을 받지 못하는 저소득층 등 의료사각지대의 동물을 위한 최소한의 의료서비스를 통해 동물보호는 물론 동물로 인한 전염병 질병의 관리 및 예방을 통해 공중보건 향상에 기여

3. 과업의 범위

가. 공간범위 : 봉천통합가압장(관악구 은천로23길7) 및 서울시 전역

나. 내용범위 : 동물복지지원시설 기본계획(시설 리모델링 방향, 세부 도입시설 및 역할, 시설 배치안, 단위공간 계획, 사업비 추정), 역할, 운영프로그램, 운영 형태에 따른 제도 및 법령 정비안, 향후 동물복지지원시설의 권역별 확대 조성계획

4. 과업수행 기간

◦ 계약일로부터 5개월

5. 과업의 내용

◦ 동물복지지원시설 건립 규모 및 건축 기본계획

- 대상지 기존 시설의 동물복지지원시설로의 리모델링 방향

- 동물복지지원시설의 도입 시설 및 역할

- 세부 시설 배치 대안 분석, 단위공간 계획 등 건축 기본계획

- 사업비 추정 및 운영 수지 분석

◦ 동물복지지원시설 운영 방향 및 세부 프로그램

- 시설 운영 프로그램 개발 및 운영형태 검토

- 지역 시민사회와 협력 방안 제시

- 운영형태에 따른 제도 및 법령 정비 안 제시

◦ 동물복지지원시설 권역별 확대 조성 방안

- 권역별, 지역별 동물복지지원시설의 규모 및 기능 제시

- 단계별 조성 방안 및 추정 사업비 제시

6. 과업수행단계

과업수행은 수급인이 아래 절차를 기준으로 작성하여 서울시의 승인을 받은 과업수행계획서에 의한다.

1) 착수보고(계약일로부터 15일 이내): 과업수행계획 수립·보고

2) 중간보고(계약일로부터 5개월 이내): 1회 이상 실시

3) 최종보고(계약만료일 15일 이전) : 연구용역결과를 종합하여 결과보고

4) 최종성과품 제출 : 연구보고서, 기초자료 및 보고서 등  연구결과 CD

5) 자문회의 : 과업 수행중 중간보고, 최종보고를 포함하여 최소 5회

이상개최.

6) 토론회의 : 중간보고 이후 1회 개최

7. 과업내용 수행지침

가. 기본지침

1) 본 연구용역은 “서울시 동물복지계획 2020” 계획과 부합되어야 한다.

2) 본 연구의 전문성을 높이기 위해 서울시 동물복지위원회 등 동물보호 전문가의 자문을 받아 시행하여야 한다.

3) 본 연구의 내실을 높이기 위해 관련된 국내외 유사사례 및 시설에 대해 조사하여 우리시 적용방안을 제시하여야 한다.

4) 본 연구용역은 수행 시 동물보호 관련 시민단체의 의견을 반영하여야 한다.

5) 과업 수행중 중간보고, 최종보고를 포함하여 최소 5회 이상 전문가 자문회의를 개최하여야 한다.

6) 다양한 의견 수렴을 위해 관계 전문가, 시민이 참여하는 토론회를 개최 하고 토론에서 제안된 내용을 과업에 반영하여야 한다.

7) 해외 유사 시설에 대한 사례 조사대상에는 반드시 미국 뉴욕과 영국 런던의 동물보호를 위한 동물병원시설이 포함되어야 한다.

나. 세부지침

1) 기초조사 및 자료분석

○ 본 과업수행에 적용하는 자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 가능한 최신의 것을 적용하여야 한다.

○ 각종 조사자료는 과학적 기법으로 분석․정리하여, 실질적인 기초자료로서 제시하여야 하며, "연구용역"은 물론 향후 다른 목적을 위하여 참고 활용할 수 있도록 체계적으로 분석․정리하여야 한다.

○ 조사의 자료는 정부 또는 서울시의 공식자료가 있는 것은 이를 적용하고, 기타 정부기관의 잠정자료, 당해부문 전문기관의 자료순으로 적용한다.

2) 기본방향의 구상 및 설정

○ 기본방향은 서울시 동물보호 정책목표인 ‘동물과 사람이 다함께 행복한 생명존중 도시 서울’ 에 부합되어야 하며, 서울시 동물보호정책에 반영할 수 있도록 실질적인 지침을 제시하여야 한다.

○ 기본방향은 동물관련 전문가 및 시민단체와의 협의를 통해 시민, 전문가의 의견이 수렴하여 추진되어야 한다.

○ 본 용역관련 전문가 및 시민단체와 협의는 발주처와 긴밀히 협의하여 실시한다.

8. 과업내용 일반지침

1) 본 과업은 계약체결 즉시 착수하여야 하며 착수 전 본 과업 내용서에 근거한 세부과업수행 계획서를 작성 제출하여 우리시의 승인을 받아야 한다.

2) 과업수행계획서에는 현장대리인계, 과업참여자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 첨부 제출하고 과업착수 시에는 착공계를 제출하여야 한다.

3) 과업참여자의 변경 시에는 우리시와 협의하여 정하도록 한다.

4) 과업의 원활한 수행을 위하여 과업단계별 분야별 전문가로 구성된 자문위원회 또는 관련기관 협의회를 구성 운영할 수 있으며 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.

5) 과업수행계획서에 따라 실시하는 중간보고 및 최종보고는 책임연구원이 직접 보고하고, 기본계획 범위결정, 부분별 계획 등 과업수행 단계별 기본방향과 계획내용에 대하여 발주자, 분야별 전문가, 과업수행자가 참여하는 회의를 개최하여 수정, 보완, 의견제시 등으로 과업의 질을 높이고 원활한 과업수행을 도모하며, 세부추진일정 및 현지조사계획 등에 대하여 업무담당자와 사전에 긴밀히 협의한 후 수정하여야 한다.

6) 본 과업 내용서에 규정되지 아니한 사항은 관계 법규 및 지침, 관련 시방서에 의거 업무담당자와 협의하여 수행하거나 결정한다.

7) 과업수행 중 여건변동으로 과업범위 또는 내용의 변경, 기간연장 등변경이 있을 때에는 우리시와 협의를 통해 설계변경 할 수 있다.

8) 본 과업완료 후에도 경미한 추가작업은 추가작업의 원인자 부담으로 수행한다

9) 본 과업은 예정공정표와 대비하여 매월 말 진도를 익월 10일까지 보고하여야 한다.

10) 우리시는 본 과업 수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 현장대리인에게 교체를 요구할 수 있으며 현장대리인은 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

11) 최종보고서는 인쇄 전 그 내용에 대하여 우리시와 협의하여야 한다.

12) 각종 보고서의 내용은 중간평가·보고회 등 검토 가능한 수준이어야 하며, 수급인이 파워포인트를 제작하여 필요한 자료를 작성 제출하여야 한다.

13) “경비” 해당 비목 중 교통비와 회의비에 대하여는 사용계획을 용역착수 후 1개월 이내에 제출하고 준공일 이전까지 집행근거 및 증빙자료를 제출하도록 한다

14) 본 과업내용서 해석에 의견차가 있을 때에는 쌍방 협의에 따른다.

9. 보안대책

1) 본 과업은 서울시 동물보호정책 추진에 대한 내용이 포함된 과업으로, 결정과정에 있는 사항의 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

2) 수급인은 보안대책을 수립하여 과업수행 대표자와 종사자 및 관련된 각 개인별 보안각서와 함께 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품 및 과업수행과정 자료는 수급인이 소유할 수 없으며 본 과업 수행을 위해 필요한 용도 이외의 목적으로 업무담당자의 허가없이 복사 또는 유출하거나 사용할 수 없다.

4) 과업폐기물은 소각 또는 세단기 처리를 하여야 하며 그 처리내용(일시, 장소, 방법, 처리자) 및 목록을 제출하여야 한다.

5) 과업수행 장소는 필요시 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

6) 용역수행 시 작성한 자료와 성과품에 대하여는 업무담당자와 협의하여 내용의 중요성에 따라 대외비 및 일반자료로 분류하여 보관하고, 정·부 책임자를 지정보고 하여야 한다.

7) 용역수행 시 대외비 이상의 자료는 반드시 업무와 직접 관계가 있는 자에 한하여 열람할 수 있도록 하여야 하며, 열람 기록전을 첨부하여야 한다.

8) 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과를 작성 시에는 참여인원은 최소화하고, 업무일지를 비치 작업내용을 기록하여야 한다.

9) 용역수행 과정에서 개최하는 각종 회의 시 본 과업내용이 포함될 경우에는 배포선을 감안하여 필요한 수량만을 생산하고, 회의 종료 후 회수 파기하여야 한다.

10) 대외비 이상으로 분류된 자료 및 성과물을 발간하고자 할 때, 발간업체 관련자의 보안관리는 과업수행자의 보안관리 기준에 따른다.

11) 과업수행 중 또는 수행 후 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

10. 성과품

가. 제출내용

구 분	성과품 및 제출자료 종류	수 량	비 고
성 과 품 (최종)	연구용역보고서	50부	(A4,210mm×297mm) 400페이지 칼라옵셋인쇄
	용역결과 요약서	20부	〃
	기본계획서, 도면, 조사분석 자료에 대한 데이터 수록된 CD	2 SET
보고서및자료	과업수행 계획서 및 착공계	3부	착수 전
	보안대책 관련 자료	3부	착수 전
	중간보고서	20부
	중간평가·보고자료	1식	개최 시 지정
	최종보고서(안)	10부
	진도보고	2부	매월

※ 각종 성과품의 종류와 규격, 부수 등에 대하여는 발주자의 요청에 따라 조정될 수 있음

나. 용역성과품 작성지침

◦ 모든 성과품은 국문사용을 원칙으로 하되 전문용여 또는 뜻이 혼동되거나 불명확한 경우에는 영문, 한문 등을 표기할 수 있으며, 개조식 작성을 원칙으로 한다

◦ 모든 성과품은 관련 규정, 지침 등 제 기준에 의거 작성하되 순서, 편집방법 등 필요사항은 최소한 인쇄 10일 이전에 발주자와 협의 후 시행하여야 한다

◦ 필요한 경우 도표, 사진을 포함한다

다. 연구용역 결과물의 저작권

◦ 본 연구용역의 성과품에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 서울특별시가 소유한다

붙임 : 학술용역 결과물 제작시 권고사항 1부.

(별첨 1)

학술용역 결과물 제작 시 권고사항

Ⅰ. 자료 구성형태

- 연구보고서 구성의 형태는 아래와 같다

1. 표지

2. 표제면

3. 제출문

4. 서문

5. 요약문

6. 목차

7. 본문

8. 참고문헌

9. 색인

10. 판권기

Ⅱ. 상세설명

1. 표제면(標題面 : title page)

연구보고서 서명(書名), 저자(著者), 발행연도, 발행처

※ 다음 장에 제출문 첨부

2. 서문(preface, forward)

연구동기, 연구목적, 범위, 협조자에 대한 감사표시 등 기술(생략가능)

3. 요약문

보고서의 내용에 대한 간략하면서 정확한 표현

A4용지 1 페이지 정도의 양

본문에 있는 것과 동일한 전문용어 사용

4. 목차(contents)

내용, 표, 그림 등의 목차

5. 본문(text)

용  지 : A4 용지

글  자 : 본문 10 Point, 제목․소제목은 20~15 Point

글자체 : 신명 태명조

6. 참고문헌(reference)

7. 색인(Index)

8. 판권기(版權記)

보고서의 마지막 부분으로 각종 인쇄에 관한 사항이 포함됨

구성요소 : 발행처, 발행일, 저자, 판차, 쇄차, 저작권표시, 가격정보 등

※ 제출문 하단에 학술용역 관리자 명시

⇒ 학술용역관리․책임자 : 서울시 ○○ 실·본부·국장    성명 ○○○

○○ 과장    성명 ○○○

○○ 팀장    성명 ○○○

담당자    성명 ○○○