서울특별시고시 제2016-155호

도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경 고시

1. 서울특별시고시 제2004-393호(2004.11.30)로 도시계획시설(도로)변경결정되고, 서울특별시고시 제2013-28호(2013.01.31)로 변경한 “신상도 지하차도 확장공사”에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조, 제91조 및 같은법 시행령 제97조,  제100조의 규정에 의거 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경하고 이를 고시합니다.

2016년  6월 2일

서울특별시장

가. 도시계획시설(도로)사업 변경계획

1) ～ 4) 변경없음

5) 사업의 기간

가) 당초 - 2006.11.23 ~ 2015.12.31

나) 변경 - 2006.11.23 ~ 2018.12.31

6) ～ 8) 변경없음

나. 기타 자세한 사항은 서울특별시 도로계획과(☎02-2133-8080),  도시기반시설본부 방재시설부(☎02-3708-8762)로 문의하시기 바랍니다.