서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)유신 대표이사 성낙일
(경유)
제목	준공기한 연기 알림

1. 서울시정 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 사에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인 ‘제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 예정임을 알려드리오니 변경계약 체결 등 필요한 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
총 차	2016. 5. 30.	2016. 9. 30.
2 차	2016. 5. 30.	2016. 9. 30.

나. 연기 사유

- 기본설계 용역 발주시 고려되지 않았던 월드컵경기장 사거리 인근 석유비축기지 공원 진출입로(횡단보도, 버스 등) 검토 및 협의 등에 추가 용역기간 소요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김경환		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	05/30 代이승석
협조자
시행	도로계획과-7437	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	대시민공개