예산서 P. 00

현장대응단 환경개선 공사

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2016. 3 ~ 2016. 5.
사업위치	서울특별시 동작구 여의대방로 16길 55 [지도에서 보기]
총사업비	총 49,753 천원/ [국비] [시비] /보조율 [%]
사업내용	본서 청사 환경개선 공사
사업형태	☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속		투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산
☑	□	□	□	□	□	□	□
경상	투자
□	□
□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조
운영비보조
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
□	□	□	□	□
□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
동작소방서	소방행정과	김범기	윤민규	허재범
(02-841-1198)	(02-841-1198)	(02-841-1198)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계			50,000
시설비			50,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
시설비		○본서 환경개선 공사 - 금액 : 50,000천원 - 샤워실 방수 및 타일교체, 세탁실 개선

3		사업설명

□  사업목적

○  청사 환경개선으로 청결한 청사 유지 및 쾌적한 근무환경 조성

○  직원들의 건강 및 사기진작

□  사업근거

○  법령상 근거

-

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-

□  사업내용

○  위    치 : 동작구 여의대방로 16길 55

○  규    모 : 4/1층 연면적 4,792.07㎡, 부지 4,895㎡

○  사업기간 : 2016. 5. ~ 2018. 5.

○  사업내용

- 본서 샤워실 타일교체, 방수, 세탁실 개선 등

- 세면장, 세탁실 공간 협소 확장

○  총사업비 : 50,000천원

□  추진일정

○  기술용역타당성심사 : 2016. 2월

○  설계용역 계약 : 2016. 2월

○ 입찰공고 : 3월

○  공사 계약 및 착수 : 2016. 4월

○  준공 및 정산 : 2016. 5월

※ 2016년 중점추진사항(사업추진의 필요성)

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계 : 설계용역계약 → 계약 → 준공 → 준공검사 → 정산

- 공사 : 사업계획 수립 → 발주 → 입찰 → 계약 → 시공 → 준공 → 정산

○  계약체결 : 일반경쟁

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 청사환경개선으로 깨끗한 청사 유지 및 근무 분위기 쇄신

- 직원들의 사기 진작 등

○  추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		50,000
계획수립	2016. 2.		계획수립, 설계
계약	2016. 3..		입찰, 계약
준공	2016. 4. ~ 5		착공, 준공, 대가

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

	해당없음

□   향후 기대효과

- 청사 환경개선으로 직원들의 사기진작

- 지역사회와 시민 친화적인 소방청사 알림

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2012	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-
2014	-		-	-	-	-	-

4		외부기관 주요 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

참 고 자 료

□  위치도 및 현장 사진

사진	사진
사진	사진