제안요청서

사 업 명	서울시 서소문청사 스피드게이트 구매설치
주관기관	서 울 특 별 시

2016. 6.

담당	성명	소 속	전화번호	e-mail
	김문연	총무과	02-2133-1607	fht_leader@seoul.go.kr

목       차

Ⅰ. 사업안내

1. 사업의 개요	1

2. 추진배경 및 필요성	1

3. 사업범위	1

4. 기대효과	2

Ⅱ. 대상업무 현황

1. 업무현황	2

2. 시스템 현황	3

3. 당면과제 및 개선방안	4

Ⅲ. 사업추진 방안

1. 추진목표	5

2. 추진전략	5

3. 추진체계	6

4. 추진일정	6

Ⅳ. 제안요청내용

1. 제안요청 개요	7

2. 제안요청 공통사항	7

3. 구축장비 및 수량	9

4. 목표시스템 개념도	10

5. 제안요청 내용	11

가. 요구사항 구성	11

나. 요구사항 목록	12

다. 요구사항 상세	13

Ⅴ. 제안안내

1. 입찰방식	34         가. 사업자 선정방식	34

나. 입찰방식	34       2. 입찰서류 및 제안서 제출	35

3. 제안서 평가 및 협상	36

가. 평가방법	36

나. 협상적격자 선정 및 협상순서	37

다. 제안설명회 개최	38

4. 제안사 유의사항	38

가. 제안사 준수사항	38

나. 계약목적물의 귀속에 관한 사항	38

다. 하자담보책임에 관한 사항	40

라. 작업장소에 관한 사항	40

마. 기타사항	41

Ⅵ. 제안서 작성기준

1. 제안서 작성방법	42

2. 입찰 및 제안서 관련 붙임 및 별지서식	44

Ⅰ		사업안내

1. 사업개요

❍ 사 업 명 : 서울시 서소문청사 스피드게이트 구매설치

❍ 사 업 비 : 금 218,490,000원(부가가치세 포함)

❍ 사업기간 : 계약체결일로부터 50일 이내

2. 추진배경 및 필요성

❍ 서소문청사 스피드게이트의 내용연수 초과와 플랩(Flap)형 방식 사용으로 잦은 고장이 발생하여 안정성이 결여되며, 높은 유지관리비 발생

❍ 서소문청사 출입관리시스템과 스피드게이트의 서버와 S/W가 별도로 운영되어 운영관리면에서 비효율이므로 시스템 통합운영관리가 필요

❍ 서소문청사 출입자의 보안을 강화 및 쾌적한 환경 조성, 청사를 이용하는 직원 및 시민들의 안전 증대를 위해 인프라 구축

3. 사업범위

❍ 일반용게이트(Sliding형) 설치 및 시험

- 천공 및 배관설치, 배관 단말처리, 케이블 포설, 게이트 결선 및 취부, 바닥공사 및 동작확인 등 게이트 설치

- 센서감도조절/센서작동 유무설정, 게이트 오픈속도 조절, 게이트 클로즈 속도 조절, UPS 연동 설정, 소방연동 설정, 보안단계 설정, 운영모드 설정, 기타 설정 등 게이트 시험 시행

❍ Auto Swing Gate 및 카드리더 Pole, 수화물게이트, Glass Wall 설치

- Auto Swing Gate는 천공 및 배관설치, 배관 단말처리, 케이블 포설, 게이트 결선 및 취부, 바닥공사 및 동작확인 등 설치

- Glass Wall은 강화유리와 Pole 설치를 포함

❍ 기존 장비 철거 : 플랩(Flap)형 게이트

4. 기대효과

❍ 스피드게이트 교체로 시스템 안정화 및 운영관리의 효율성 증대, 출입관리시스템(전자경비시스템, 스피드게이트) 통합관리로 업무 효율성 및 경제성 확보

❍ 청사 출입자의 보안을 강화하고, 직원 및 시민의 안전과 쾌적한 환경을 제공 및 향후 타 시스템과의 연동을 위한 인프라 마련

Ⅱ		대상업무 현황

1. 업무현황

❍ 서울시 청사 수용인원

청사명		실/국/본부	과/반	인 원 수			비고
				계	현원	직원외
계		26	148	6,910	5,737	1,173
본 청 사 (서울도서관 포함)		12	62	2,482	1,948	534
서소문 청사	소계	9	55	2,063	1,725	338
	1동	7	43	1,443	1,228	215
	2동	1	6	361	282	79	도기본
	3동		2	71	57	14
	4동		-	30	4	26
	5동	1	4	158	154	4
기타청사 (남산, 송월동 등)		5	31	2,365	2,064	301

2. 시스템 현황

❍ 서울시 출입관리시스템 구성도

※ 신청사와 서소문청사가 개별적으로 운영되고 있음

❍ 서울시 출입관리시스템 설치현황

구 분	전자경비시스템					스피드게이트
	서버	관리용PC	ACU ACU(Access Control Unit) : 출입관리의 주장치로서 카드 리더기와 연동하여 실시간 제어 및 상황 이벤트 관리 장치	Lock	Card Reader	서버	관리용 PC	스피드 게이트
계	2	5	252	625	625	1	1	37
본청사	1	3	194	488	488	-	-	23
서소문청사	1	2	58	137	137	1	1	14

❍ 동별 스피드게이트 설치 현황

구 분	스피드게이트	수화물게이트	카드리더기
1동	6 LANE	2	12
2동	5 LANE	1	10
5동	3 LANE	1	6
합계	14 LANE	4	28

3. 당면과제 및 개선방안

❍ 낮은 스피드게이트의 사양과 성능으로 정책적 운영(양방향 출입 통제 등)이 되지 않으며, 노후화로 잦은 고장이 발생하여 경제적으로 높은 운영관리 비용

❍ 출입관리시스템(전자경비시스템, 스피드게이트)의 서버와 카드리더기가 개별적으로 사용되어 운영관리면에서 비효율성 발생

❍ 향후, 출입관리시스템 운영과 물품수급, 소프트웨어 업데이트 등의 효율화를 위해 통합화 추진

Ⅲ		사업추진 방안

1. 추진목표

2. 추진전략

1단계 - ‘15년 (인프라 구축)		전자경비시스템 시스템 고도화 사업 - 서버, S/W, 네트워크(스위치, 배관․배선), 단말기 등 - 서소문청사 1, 2, 3, 5, 후생동
2단계 - ‘16년 (서비스 확장)		스피드게이트(SpeedGate) 교체 - 스피드게이트 교체(14 LANE), 장애용 게이트 도입 - 출입통제시스템(S/W) 통합 운영․관리, 출입증 방식 변경
3단계 - ‘17년 (타 시스템 연동) 검토중		CCTV, 엘리베이터, 얼굴 인식시스템 연동 추진 - CCTV 설치 및 연동, 신원확인시스템 도입 등

3. 추진체계

4. 추진일정

구분		W		W+1		W+2		W+3		W+4		W+5		W+6
분석	업무현황 및 요구사항 분석
	업무프로세스 정의
설계	구조 설계
구축	시스템 구축 및 공사
테스트	통합테스트
검수	사용자 교육/검수
종료	운영개시
사업관리	품질관리/지원	착수보고						중간보고						완료보고

※ 추진일정은 “발주기관” 와 “계약상대자”의 상호협의를 통해 변경할 수 있음.

Ⅳ		제안요청 내용

1. 제안요청 개요

❍ 본 제안요청서는 서울시 서소문청사 스피드게이트 구매‧설치 사업으로서 서울시의 요구 사항을 충분히 검토 후 요구 기능이 포함된 제안서를 작성하여 제시하여야 한다.

❍ 제안업체는 본 사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경 분석과 업무내용의 연관 관계에 대해 이해를 바탕으로 제안범위 및 전략을 명확하게 제시하여야 한다.

❍ 제안서에는 사업계획과 제안요청 제반사항에 대해 충분히 검토 후 제안사의 추진전략, 추진체계, 추진계획 등을 구체적이고 명확하게 작성하여 제시하여야 한다.

❍ 제안서에는 본 사업에 대해 완벽한 이해 하에 전체적인 시스템 구현 방안이 제시되어야 하며, 본 제안요청서에서 추구하는 목표 달성을 위해 추가해야 할 사항이 있는 경우, 추진방안과 제안업체의 역할을 명확히 제시하여야 한다.

❍ 서울시 출입관리시스템(전자경비시스템, 스피드게이트 등) 운용현황 및 특성, 요구사항 등을 명확하게 파악하여 청사별 특성에 맞는 서비스를 원활하게 제공할 수 있는 방안을 제안하여야 한다.

❍ 반드시 현장실사를 취우선적으로 실시한 후, 사업계획을 구체적으로 제시하여야 한다.

2. 제안요청 공통사항

❍ 모든 도입 또는 제안되는 규격, 제안조전에 대한 조견표를 작성하여야 한다.

※ 제안요청내용, 제안요청페이지, 제안사항, 제안페이지, 만족 여부 등

❍ 본 사업 구축 완료시 향후 서울시 출입관리시스템 발전방향을 고려한 시범서비스를 제안하여야 한다.

❍ 24시간 365일 중단없는 스피드게이트 서비스 제공을 위한 방안과 장애발생 시 장애대책 및 절차 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

❍ 모든 제안장비 및 부품은 제조업체의 정품(신규제품)이어야 하며, 검수완료 시점을 기준으로 2년 이내에 단종 될 경우 담당자와 협의하여 동일 성능이상의 신제품으로 교체하여야 하며, 이에 대한 일체의 비용은 제안사업자가 부담하여야 한다.

❍ 각 분야별 제품은 최신의 정품이어야 하며, 주요 시스템은 국내에 Reference Site를 보유하여야 한다.

❍ 본 사업의 스피드게이트 구축 후 성능개선, 신규 서비스 추가 등에 따라 시스템 확장이 필요한 경우에 대비하여 확장성, 호환성 및 유연성 등을 충분히 고려한 시스템을 제안하여야 한다. 예를들면, 신원확인시스템(키오스크 방식, Wall 방식), 화재수신시스템, 얼굴인식 등 연계 구성을 고려

❍ 스피드게이트는 출입관리시스템과의 연동이 원칙이며, 지정된 장소에 설치하는 해당 장비(스피드게이트 등)에 부가적으로 따르는 설치 및 바닥공사, 케이블 포설 등 본 사업에 필요한 시설 공사가 포함되어야 한다.

❍ 스피드게이트의 편리한 운영관리를 위한 구체적인 보장 방안을 제시하여야 한다.

❍ 스피드게이트 설치시 업무중단을 최소화할 수 있는 구축 일정 및 방안을 제시하고, 이에 따라 구축하여야 한다.

❍ 현장실사 후 일부 변경(공사범위, 물량 등)이 필요한 부분은 사업계획서내에 포함하여 서울시와 협의하에 진행한다.

❍ 제안시 서울시청 목표 구성도를 반영하여 제안하되, 서울시의 출입관리시스템 운영계획의 변동사항이 발생할 시(접속지점 변경 등), 감독자의 지시를 받아 제안 내용을 변경하여 적용해야 한다.

❍ 도입되는 모든 장비는 서울시청 목표구성과 같이 동작 될 수 있도록 시험, 설치 및 운영이 포함된 사항임을 제안 시 충분히 숙지해야 한다.

❍ 반드시, 스피드게이트 설치를 위한 최적의 위치와 1동 13층 정동전망대를 이용하기 위한 출입방안 대책(Glass Wall 위치 등)을 구체적으로 제시하여야 한다.

❍ 제안요청에서 명시한 규격, 성능 및 요구사항은 본 사업에 필요한 최소한의 요구 조건을 제시한 것으로 동등 이상의 성능과 기술이 반영될 수 있도록 제안하여야 한다.

	《 출입관리시스템 연동 》
□ 출입관리시스템(RFID 카드, 메인 컨트롤러 등) 설치 및 연동 작업은 별도 발주한다. 단, 스피드게이트 시공자는 기존 출입관리시스템과 호환이 되도록 시공하고, 설치작업에 적극 협조하여야 한다.

3. 구축장비 및 수량

❍ 스피드게이트 설치장소

스피드게이트				수화물게이트
설치장소(서소문청사)			LANE
1동	정문방향 로비(1층)	왼쪽	2
		오른쪽	2	1(Auto)
	후분방향 로비(1층)	왼쪽	1	1(수동)
		오른쪽	1	1(Auto)
2동	로비(1층)		3	1(수동)
	후분(3층)		2
5동	로비(1층)		3	1(수동)
합계			14	5

※ Auto : Auto Swing Gate, 수동 : 수동화물게이트

❍ 물품 세부내역

품명	규격	단위	수량	비고
스피드게이트	LEFT	EA	7
	RIGHT	EA	7
	CENTER	EA	7
Auto Swing Gate	제작	EA	2
수동 화물 게이트	제작	EA	3
글라스 월	제작	식	1
리모컨	무선	식	7
수동조작반	유선	식	4	안내데스크
UPS	접점보드 포함	개소	7	스피드게이트에 포함되었을 경우 제외 가능

4. 목표시스템 개념도

❍ 출입관리시스템 목표시스템 : 신청사와 서소문청사

가. 구성도

나. 구성 및 동작

- 인사DB와 연동이 되어, 인사이동 및 부서이동이 발생 시 신청사 서버와 서소문청사 서버가 동시에 동기화(Synchronization) 되어 ACU 및 단말기의 데이터가 변경

- 서소문청사 출입관리시스템으로 전자경비시스템와 스피드게이트, 화재관리시스템, 향후 CCTV, 얼굴인식, 초과근무시스템과 연동이 되어 통합 관리

5. 제안요청 내용

요구사항 분류	설 명 (요구사항 번호(ID)부여 규칙)	요 구 사항수
시스템 장비구성–ECR (Equipment Composition Requirement)	- 목표시스템의 구성을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	4
기능–FUR (Function Requirement)	- 목표시스템이 반드시 수행해야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작) 개발 요구사항	2
테스트–TER (Test Requirement)	- 도입장비의 성능테스트 또는 구축 시스템의 계획대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 테스트 요구사항 - 테스트 대상, 일정, 방법, 절차 등에 대한 요건과 연계 대상에 대한 테스트 요건(요구사항)	2
보안–SER (Security Requirement)	- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	1
품질–QUR (Quality Requirement)	- 목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항 - 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성 등	2
제약사항–COR (Constraint Requirement)	-목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술․표준․업무․법제도 등의 제약조건	1
프로젝트관리–PMR (Project Management Requirement)	-프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항	5
프로젝트지원–PSR (Project Support Requirement)	-프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항(교육훈련 및 기술지원, 하자보수 요구 사항 등)	4
컨설팅-CNR (ConSulting Requirement)	정보화사업의 업무효율성과 생산성을 높이는 정보시스템 갖추고 운영할 수 있도록 제반사항을 지원하는 요구사항	2
공사-ENR (Engineering Requirement)	전산실 공사, 네트워크 공사 등 공사와 관련된 요구사항	2
합계		25

가. 요구사항 구성

요구사항 분류	요구사항 번호	요구사항 명칭
시스템 장비구성 요구사항 (ECR)	ECR-001	시스템 구성 공통사항
	ECR-002	스피드게이트 시스템 구성
	ECR-003	H/W 내역 및 구성요건
	ECR-004	연동 및 호환 프로그램 구성요건
기능 요구사항 (SFR)	SFR-001	스피드게이트 기능요구
	SFR-002	Auto Swing Gate 기능요구
테스트 요구사항 (TER)	TER-001	테스트 공통사항
	TER-002	시운전 및 성능 시험
보안 요구사항 (SER)	SER-001	물리적 보안
품질 요구사항 (QUR)	QUR-001	현장 품질관리 일반사항
	QUR-002	하자보수 및 품질보증
제약사항 (COR)	COR-001	기존 시스템과의 연관성 및 시스템 구조 준수
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	PMR-001	성과지표 설정관리
	PMR-002	착수계 제출
	PMR-003	준공검사
	PMR-004	산출물 작성 및 제출
	PMR-005	사업총괄관리자(PM)의 지정
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	PSR-001	교육지원
	PSR-002	기술이전
	PSR-003	하자보수일반
	PSR-004	시스템 운영지원
컨설팅 요구사항(CNR)	CNR-001	서소문청사 보안강화(물리적, 관리적, 기술적) 컨설팅
	CNR-002	서소문청사 정동전망대 보안 요구사항
공사 요구사항(ENR)	ENR-001	시공조건 확인
	ENR-002	설치․시공, 게이트 설치조건
	ENR-003	배선․배관 공통사항

나. 요구사항 목록

다. 요구사항 상세

요구사항번호		ECR-001
요구사항 명		시스템 구성 공통사항
요구사항 분류		시스템 구성요건 공통사항
상세 설명	정의	시스템 구성요건의 공통사항
	세부 내용	□ 낙찰자가 본 제안서에 명시된 H/W 일체를 일괄공급방식으로 납품과 설치를 완료하여야 하며, 납품하는 물품은 입찰등록 마감일 기준으로 제조사가 단종하는 물품을 납품할 수 없음 □ 설치중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상복구 시켜야 함. □ 출입관리시스템과 완벽한 호환을 이루어야 하며, 시스템 설치장소에서 요구하는 요건 및 정책에 맞게 시스템 도입/재구성/설치되어야 함 □ 제안서에 포함되어 있지 않더라도 시스템의 원활한 운용을 위하여 필요한 장비 등이 있을 경우 이를 추가하여 제안하여야 함 □ 제안사는 하자보수 기간 중 장애 발생에 대비 지속적인 유지보수 및 체계의 확장성과 안정성을 보장하기 위하여 제조사(공급사) 공급증명원을 입찰참여시 제출하여야 하며, 계약시 기술지원확약서(5년 이상)를 제출해야 함
산출정보		□
관련요구사항		□

1) 시스템 장비구성 요구사항(ECR : Equipment Composition Requirement)

요구사항번호		ECR-002
요구사항 명		스피드게이트 시스템 구성
요구사항 분류		스피드게이트 시스템 구성
상세 설명	정의	스피드게이트 시스템 구성 요건
	세부 내용	□ 스피드게이트 - Door 구동방식은 Sliding Type 이어야 한다. - 스피드게이트는 슬라이딩 강화 유리 판넬과 고정 판넬을 포함하는 LEFT/RIGHT HOUSING UNIT 및 통행로로 이루어져야 한다. - 스피드게이트는 기존 서울시청에서 사용하는 출입관리시스템과 연동 되어 동작되어야 하며, 입/출 양방향을 제어하여야 한다. (사용자 요구에 따라 단 방향으로 구성 가능해야 한다) - 스피드게이트는 자주식 슬라이드 안전 강화유리로 제작되어야 하며, 점검이 용이하도록 Body 부분은 Security Lock에 의하여 닫혀 있어야 한다. - 스피드게이트의 슬라이딩 및 고정 유리는 10mm 이상의 투명 강화 안전유리이어야 하며, 스피드게이트에 조명 기능, 야간에도 통행로 위치를 확인 가능해야 한다. - 시공되는 스피드게이트 및 Glass Wall(물류용 수동 게이트 포함) 유리의 높이는 1200mm 이상으로 제작 하여야 한다.(상황에 따라 1,200 ~ 1,500mm 내에서 교체 가능하여야 한다.) □ Auto Swing Gate - 스피드게이트 옆에 화물 및 장애인 통행을 위한 모터에 의해 열리고 닫히는 오토 스윙 게이트를 설치한다. □ 수화물 게이트 - 스피드게이트 옆에 화물 및 장애인 통행을 위한 수동물류도어를 설치 하여야 한다. - 화물 및 장애인의 원활한 통행을 위해 통로 폭 1,000mm를 제공해야 한다. - 부드러운 동작을 위해 수동도어 하부에 소음이 발생하지 않는 바퀴가 있어야 한다. - 잠금장치를 부착하여 평소에는 닫힘을 유지하고 보안요원이 필요시 키로 개방하여 사용 할 수 있도록 하여야 한다. - 양방향 통행이 가능하며, 진입방향으로 개방할 수 있도록 구성하여야 한다. □ Glass Wall - 스피드게이트 설치 후 엘리베이터 홀과의 빈공간은 글라스월로 차단 하여야 한다. □ 수동조작함 - 스피드게이트를 강제로 개방하기 위한 수동 조작함을 설치해야 한다. - 통로별 강제 개방 & 전체 통로 일괄 개방 기능을 지원해야 한다. - 알루미늄 함체로 제작되어 내구성을 보장해야 한다. □ UPS - UPS를 설치하여 정전시에도 작동이 되어야 한다.
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		ECR-003
요구사항 명		H/W 내역 및 구성요건
요구사항 분류		H/W 내역 및 구성요건
상세 설명	정의	도입 H/W 내역 및 구성요건
	세부 내용	□ 스피드게이트 - 스피드게이트는 Microprocess 방식의 전용보드에 의해 제어 - Door 구동 Mechanism : BLDC Motor, AC, DC 가능 - 제품의 높이는 1,000+/-30mm, 제품의 폭은 300+/-20mm - 보안출입문의 Door 속도제어는 0.3~1.0초 가능 - 공급전원 : AC220V/60Hz - 동작온도 : -15 to +50 ℃ - 동작습도 : 상대습도 90% 이내(응결없이) □ Auto Swing Gate - 전용 Microprocess 방식의 보드에 의해 제어되어야 하며, 내구성이 강한 BLDC 모터에 의해 작동되어야 한다.(모터방식은 설치시 협의에 의해 조정 가능) - 통로폭은 1,000mm, 도어는 10mm 이상 투명 강화유리로 제작되어야 한다. □ 수화물 게이트 - 두께 15mm 이상의 투명 강화유리와 스테인리스 지지대로 제작되어야 한다. □ Glass Wall - 두께 10mm 이상의 강화유리와 스테인리스 강화유리 지지대로 제작 되어야 한다. - 유리의 높이는 1,200mm로 제작되어야 한다. (유리높이는 설치 시 협의에 의해 조정 가능)
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		ECR-004
요구사항 명		연동 및 호환 프로그램 구성요건
요구사항 분류		운영프로그램
상세 설명	정의	연동 및 호환 프로그램 상세화
	세부 내용	□ 스피드게이트는 서소문청사 출입관리시스템과 연동이 되어야 한다. □ 출입관리시스템과 연동이 되어 서울시 공무원카드과 상시출입자카드, 방문자카드를 이용하여 출입 RF단말기에 접촉시 RF단말기로부터 열림 신호를 받아 출입문을 개방해야 한다. □ 스피드게이트는 화재 수신반과 연동이 되어 화재발생시 자동 열린상태를 유지하여야 한다. - 화재 시 화재 신호를 받을 수 있어야 하며, 화재 복귀 시 까지 열린 상태를 유지한다. □ 향후, 신원확인시스템, 화상인식시스템 구축 되었을 시 연동이 되어야 한다.
산출정보		□
관련요구사항

2) 기능 요구사항

요구사항번호		SFR-001
요구사항 명		스피드게이트 기능요구
요구사항 분류		스피드게이트 기능 요구사항
상세 설명	정의	스피드게이트 기능
	세부 내용	□ 정전시 스피드게이트 자동 개방 - 정전시 스피드게이트는 자동으로 개방되어 청사내 인원의 원활한 대피에 지장을 주지 않아야 한다 □ Slide Panel의 속도를 사용자 조절 가능 - 스피드게이트 Slide Panel의 속도는 사용자의 요구에 맞게 조절할 수 있어야 한다. □ 비인가 출입제한 기능 - 카드를 읽힌 방향에 따라 출입을 허용하며 비 인가자의 출입시도는 게이트 내부에 설치된 센서에 의해 차단되며, 경보음을 발생 하여야 한다. - LED 진행 안내표시부에서는 카드인증 혹은 거부 표현 및 시각적 안내를 하여야 한다. □ 안전기능 - 사용자 보호를 위해 Wing이 위치한 케비넷 중앙 부분에 4개 이상의 안전센서를 내장하고 있어 Wing 폐쇄 행정으로 인한 사고를 예방 하여야 한다. - N/C Mode 운영 시 인가자의 출입 시 안전센서에 의해 슬라이딩 강화 유리가 Close 행정을 하지 않도록 구성되어 있다. - 예기치 않는 사고로 인하여 문과 충돌할 경우 즉시 도어의 동작을 정지 또는 오픈하여 통행자의 안전을 보장해야 한다. - 게이트 내부에 IR-리모콘 수신부가 장착되어 있어 IR-리모콘을 이용 하여 모든 운영모드를 제어 할 수 있어야 한다. □ 외부인 차단을 위하여 2가지 이상의 운영방법으로 설정변경이 가능 - 보안모드 : 정상적으로 유리문이 열려있는 도중 비인가자가 진입시 비인가지가 안전센서 부분(유리문이 작동하는 위치)에 진입하더라도 보안을 위해 문을 닫음. - 안전모드 : 정상적으로 유리문이 열려있는 도중 비인가자가 진입시 비인가지가 안전센서 부분(유리문이 작동하는 위치)에 진입하면 안전을 위해 문을 닫지 않고 알람을 울림. □ 부정 뒤따름 방지 기능이 구현 - 역방향 진입 방지 인증 받은 사람이 진입하려 할 때, 누군가 반대편 에서 인증없이 진입하려 하면 문이 닫혀야 한다. - Tailgating Alarm(뒤따름 경보) 미 인증된 사람이 먼저 지나간 인증된 사람을 따라 20cm 이상의 거리에서 들어갈 경우, 문이 닫히며 뒷사람의 진입을 막아야 한다. - Piggybacking Alarm(밀착 진입 경보) 미 인증된 사람이 먼저 인증된 사람에게 20cm 이상 떨어져서 동시에 통과를 시도할 경우, 문은 닫히고 두 사람 모두의 진입을 막아야 한다. □ LED 안내 기능 - 출입 카드 인식시 게이트에 승인 미승인자의 카드 인식 여부를 구분 하는 LED(발광다이오드)의 색상(대기시 - 청색, 허가자 - 녹색, 비허가자 – 적색) 변경으로 이용자의 편의를 제공 하여야 한다.(색상은 변경 가능) □ 음성 안내 기능 - 스피드게이트 운영상 발생 할 수 있는 경고 내용을 음성 모듈을 이용 하여 인사말, 안내멘트, 경보음 등을 음성 또는 음향으로 알려줄 수 있어야 한다. - 통과 허용 신호 없이 입장/퇴장객이 강제로 도어를 열고 진입하거나 뛰어넘어 가는 행위를 알리기 위해, Buzzer를 통해 경고음을 출력 하여야 한다. - Parameter Set-up에 따른 기능 복원 시 초기 기본값 인식 확인, 비 인가자 및 Fired Alarm 발생시, 기기 이상시 □ 게이트 진입 후 인증 - 게이트 진입 후 카드를 카드리더에 근접하는 경우를 대비하여 게이트 진입후 카드를 인증하여도 게이트가 오픈 되어 사용자가 게이트를 벗어나서 다시 들어와야 하는 불편함을 해소하고, 이로 인한 혼잡성을 개선하여야 한다.
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		SFR-002
요구사항 명		Auto Swing Gate 기능요구
요구사항 분류		Auto Swing Gate 기능 요구사항
상세 설명	정의	Auto Swing Gate 시스템 기능
	세부 내용	□ 카드키 시스템과 연동하여 작동하거나 수동조작함/무선리모컨에 의해 모터에 의해 열고 닫힐 수 있어야 한다. □ In/Out 방향으로 선택적으로 개방되어야 한다.
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		TER-001
요구사항 명		테스트 공통사항
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	시험 계획 수립 및 실시
	세부 내용	□ 사업자는 구축한 시스템 및 기능 및 성능 등 완전성을 입증할 수 있도록 테스트 종류별 목적, 방법, 시험환경 구성, 시기(단계), 시험 데이터, 수행 주체, 합격기준, 시험결과 관리 등 총괄계획 및 상세 시험계획을 수립하여 제시한다. - 본 사업에서 실시하는 모든 시험의 종류, 시기, 방법 등을 포함한 총괄계획과 각 시험별 세부 계획을 수립하여 제시한다. - 개별 시험계획에는 수행 시기, 수행 주체, 합격기준, 시험 시나리오, 시험 데이터, 시험환경 구성, 결과물 활용방안 등이 포함되어야 한다. - 개시험결과 합격기준을 달성하지 못하는 경우에는 대응방안을 마련 하여 제시하여야 한다. - 통합시험, 연계시험, 시스템 시험 등은 실제 운영될 시스템에서 실제 데이터와 동일한 시험 데이터를 토대로 시험을 실시하여야 한다.
산출정보		□ 시험 계획서, 결과서
관련요구사항		□

3) 테스트 요구사항

요구사항번호		TER-002
요구사항 명		시운전 및 성능 시험
요구사항 분류		시운전 및 성능시험 운영
상세 설명	정의	시운전 및 성능시험
	세부 내용	□ 시험운영을 위한 계획(일정, 환경, 소요자원, 시험운영 적용업무, 기능 검증, 하자 보완, 시스템 전환계획, 기술이전, 결과보고 등)을 수립하여 효율적인 시험운영 및 운영 전환이 가능하도록 해야 한다. □ 계약상대자는 설치 후 성능시험을 실시하고 결함사항이 있을 때에는 이를 보완 또는 개선하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다. □ 발주자는 주요자재에 대하여 시험성적서를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다. □ 비상시(화재시, 정전시, 기타) 출입관리시스템 연동관계 확인 및 이상유무를 확인 받아야 한다. □ 현장에 모든 장비를 설치하고 본격 시운전에 들어가기 전에 발주자의 입회하에 성능기준을 만족하는지를 시험한다. □ 사업자는 시스템의 설치 완료 후 시스템이 정상적인 기능을 발휘할 수 있는지 시험한 후에 시스템을 인도해야 한다. 세부 시부시험 항목은 시험계획서를 적용하여 시험한다. 또한 시공자는 사전에 시운전에 대한 시험내용을 발주자에게 제출하여 승인을 득한 후 시행하여야 하며 주요 시험항목은 다음과 같다. 가) 카드리더에 ID카드 접근 시 카드인식거리, 인식속도, 카드특성별 인식상태 및 스피드게이트 개방 기능 나) 스피드게이트와 출입통제 제어장치간의 통신상태 다) 타 시스템과의 인터페이스 기능 라) 비상시 스피드게이트의 원격 개폐기능
산출정보		□
관련요구사항		□

4) 보안 요구사항(SER : Security Requirement)

요구사항번호		SER-001
요구사항 명		물리적 보안
요구사항 분류		물리적 보안 요구사항
상세 설명	정의	물리적 보안 요건
	세부 내용	□ 개인소유의 PC 및 보조기억장치 반입/반출 통제 실시하여야 한다. □ 생성된 문서는 별도의 시선장치가 된 곳에 안전하게 보관하여야 한다. □ 폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기 되어야 한다. □ 문서의 보안등급을 부여하고 등급에 따라 차별화된 권한 관리를 하여야 한다.
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		QUR-001
요구사항 명		현장 품질관리 일반사항
요구사항 분류		현장 품질 요구사항
상세 설명	정의	현장 품질관리 준수사항 일반사항
	세부 내용	□ 설치 및 점검 - 기기 설치할 위치에 가조립 후 감독관의 승인을 득하여야 한다. - 기기는 바닥에 Bolt로 단단히 고정시켜야 한다. - 마감자재의 색상, 형태 등을 사전 승인을 득한 후 시공한다. - 대리석 마감 설치 때에는 통행인의 안전을 위하여 Plate 및 카페트로 보양하여 통행에 지장을 초래하지 않도록 해야 한다. - 시스템 설치를 위하여 대리석 철거 및 바닥 마감 공사는 기존에 설치 되어 있는 마감재와 잘 조화되도록 한다. - 작업 안전을 위하여 이동식 보호벽을 설치 한 후 시공하여야 한다. - 수동조작함은 설치 전 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 하며, 기기마다 제어할 수 있게 Key Type의 스위치로 하여야 한다. - 게이트에 입선 되는 케이블은 연결부위 없이 사용하여야 하며, 부득이 하게 연장 및 접속하여 사용할 필요가 있을 경우 필히 규격에 맞는 Connector를 사용하여야 한다. - 게이트설치 도중 시설물 및 재산에 손해나 피해가 생기지 않도록 하여야 하며 바닥타공 및 철거시 금속탐지기를 사용하여 다른 설비의 장애가 생기지 않도록 하여야 한다. - 게이트의 마감은 주변 환경과 조화가 잘 이루어져야 한다. - 보안출입문은 365일 24시간 동작하는 장비로 감독관의 요구가 있을 경우 사업자는 하자보증기간 동안 정기적 점검(월1회)을 하여야 한다. □ 현장에 설치되는 설비의 품질관리를 위해서 계약상대자는 다음과 같은 점검 및 시험을 실시한다. - 물량 및 외관점검 : 운반도중 장비의 휨 또는 찌그러짐 등 파손상태 - 기종 및 치수점검 : 수평, 수직 등 설치상태 검사 - 설치상태 및 동작점검 : 설치 후 계약상대자은 시스템의 동작상태 등 다음과 같은 시험 및 점검을 실시한다. (1) 도면 및 설계내역 물량의 납품 및 시스템 설치·가동여부 (2) 지정된 규격의 기기 및 자재 사용여부 (3) 지정된 케이블의 포설경로 (4) 기준에 맞는 접지의 시행여부 (5) 전자파 및 전파장애 요인과의 이격여부 (6) 작업현장의 청소 및 환경보호 여부
산출정보
관련요구사항		□

5) 품질 요구사항(QUR : Quality Requirement)

요구사항번호		QUR-002
요구사항 명		하자보수 및 품질보증
요구사항 분류		하자보수 및 품질보증
상세 설명	정의	하자보수 및 품질보증 일반사항
	세부 내용	□ 계약상대자는 본 시스템이 인계된 후에 발생되는 고장 등 장애에 대하여 천재지변의 경우를 제외하고, 사고발생 접수 후 24시간 이내에 본설비가 제 기능을 발휘할 수 있도록 복구하여야 한다. □ 본 시스템의 하자보증기간은 준공 완료 후 2년간으로 한다. - 하자보증기간 중에 발생한 장애의 즉각적인 조치가 불가 시에는 예비제품을 투입하여 항시 운영이 가능하도록 하여야 한다. □ 계약상대자는 본 시스템에 대한 재료의 불량이나 설비의 부적정 등으로 인한 고장에 대하여는 하자보수기간에 관계없이 완전하게 보완하여야 한다.
산출정보		□ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함) □ 품질보증 활동 수행 결과 산출물(단계별 품질관리 보고서 등)
관련요구사항		□

6) 제약사항(COR : Constraint Requirement)

요구사항번호		COR-001
요구사항 명		기존 시스템과의 연관성 및 시스템 구조 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	기존 시스템과의 연관성 및 시스템 구조 설계에 관한 사항
	세부 내용	□ 기존 시스템과의 연관성 - 타 시스템과의 연계 시 기존시스템 운영에 영향을 주지 않는 시 스템을 구현하여야 함 □ 시스템 구조 설계 - 기존 구축되어 있는 현행시스템 구조 및 호환성, 데이터 유형, 발주기관 의 물리적 네트워크 환경을 고려하여 구조 설계가 이루어져야 함 □ 시스템 모듈화 - 목표시스템은 플랫폼에 독립적인 개방형 프로그램 개발을 원칙으로 하며, 추후 시스템의 확장성을 고려하여 개발되어야 함 □ 하드웨어 연계성 - 기존 시스템 하드웨어 장비의 호환 및 사용방안을 제시하여 경제 적이고 효율적인 시스템 적용 구성함
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		PMR-001
요구사항 명		성과지표 설정관리
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	당해 계약의 성공적 추진 척도 제시
	세부 내용	□ 본 계약 추진의 성과측정을 위한 성과지표를 제시하여야 함. □ 성과지표는 본 사업의 추진 배경 및 목적을 이해하고 작성하여야 하며, 객관적이고 정량적인 지표로 계량화 되어야 함. □ 제시된 성과지표는 발주기관의 사업 성과지표를 고려하여 발주기관과 최종 협의확정 한 후 사업수행계획서에 명시하여야 함. □ 성과달성을 위하여 노력하여야 하며, 발주기관은 사업 추진 중 중간점검을 위하여 성과지표에 의한 측정결과를 요구 할 수 있으며, 발주기관의 요구를 받은 경우에는 성과측정결과서(중간점검용)을 제출하여야 함. □ 사업(계약) 종료시에 제시된 성과지표에 의한 성과측정을 실시한 후 성과측정결과서(최종)를 제출하여야 함.
산출정보		□ 성과지표(제안서 제시, 계약 후 사업수행계획서 명시) □ 성과측정결과서
관련요구사항		□

7) 프로젝트관리 요구사항

요구사항번호		PMR-002
요구사항 명		착수계 제출
요구사항 분류		착수계 제출 요구사항
상세 설명	정의	당해 계약의 착수계
	세부 내용	□ 계약상대자는 계약일로부터 7일이내 착수계를 제출한다. □ 계약상대자는 사업 착수 전에 현장대리인계, 사업예정공정표 등을 첨부한 착수계를 제출하여 감독관의 승인을 받아 사업에 착수하여야 하며, 공정에 변경이 있는 경우에는 변경 공정표를 작성 제출하여야 한다. □ 착수시 제출 서류 - 착수계 - 사업수행계획서는 다음 내용을 포함하여 작성 ․ 납품 물품내역서 ․ 직접시공계획서(사업예정공정표 포함) ․ 주요자재 자재승인서 및 반입계획, 노무계획 - 보안서약서 ․사업 참여인원에 대해서는 사업투입 전 “보안서약서”, “보안확약서 (”계약상대자“의 대표자용)를 제출하여야 한다. - 현장대리인계 ․“계약상대자”은 사업 착수 전에 스피드게이트에 상당한 기술과 경험이 있는 기술자를 지정하여 경력을 표시한 문서(이력서, 자격 증사본, 현장대리인계 및 기타 서류 등)를 제출하여 감독관의 승인을 받은 후 현장대리인을 지정하여야 한다. - 스피드게이트 등 주요물품 주요장비에 대하여는 정품인증서 및 A/S 확약서, 기술지원에 대한 자료를 계약 후 10일 이내에 수요기관에 제출여야 한다. □ 제출서류 - “계약상대자”는 각 제출 서류 작성 전에 서류의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명 하지 않은 사항이 있을 경우 감독관과 협의 조정한다.
산출정보		□ 착수계, 사업수행계획서, 보안서약서, 현장대리인계 등
관련요구사항		□

요구사항번호		PMR-003
요구사항 명		준공검사
요구사항 분류		준공검사 요구사항
상세 설명	정의	준공검사
	세부 내용	□ 준공 예비점검 - 준공 예비점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비 사항이 있을 경우 계약상대자는 이에 대한 시정조치를 계약상대자에게 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이의 시정 조치를 완료한후에 준공검사원을 제출하여야 하며, 준공예비점검 지적 사항 및 조치내용을 기록하여 준공검사 시 준공 검사자에게 제시하여야 한다. □ 준공검사 - 준공검사 내용 계약상대자가 시행하는 준공검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가 한다. ․ 모든 설치 장비의 정상작동 여부 ․ 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부 ․ 잔재 및 발생물 처리 ․ 사업 설계서 이행상태 ․ 주변정리 및 원상복구사항 처리상태 ․ 제출물 및 공무행정서류 처리 상태 ․ 준공 전 청소 이행상태 ․ 기타 계약문서에 명시된 사항의 이행 여부 - 제출서류 : 준공 시 제출 서류는 다음과 같다. ․ 사진첩 : 1부(촬영파일 제출) ․ 각종 시험성적서 : 1부 ․ 준공도면 : 2부(A3 최종 완성도면, 파일별도) ․ 운영메뉴얼 2부(제본 또는 바인딩, 파일별도) ․ 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 서류
산출정보		□ 준공검사 제출서류
관련요구사항		□

요구사항번호		PMR-004
요구사항 명		산출물 작성 및 제출
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	사업수행관련 산출물의 제출 및 관리에 관한 사항
	세부 내용	□ 사업추진 주요 산출물은 아래와 같이 구성됨. - 프로젝트관리 산출물(※서울시 프로젝트관리 방법론 참조) - 각 요구사항별 해당 산출물 (※각 요구사항의 산출정보 참조) - 기타 계약관련 산출물 등 □ 프로젝트관리 산출물 및 사업유형별 산출물(유지보수 산출물) 및 제출일정은 발주기관과 협의․확정 하여야 하며, 사업수행계획서에 명시(산출물명, 산출물 제출일정 포함)하여야 함. □ 본 사업의 계약과 관련된 산출물은 다음을 기본으로 함 - 계약시 제출 : 공장등록증, 직접생산확인증명서 1부 - 계약 후 10일 이내 ․사업수행계획서 · 참여인력 신원조사 관련 서류 1부 · 각종 보안서약서 1부, 참여인력 긴급연락망 1부 - 계약 후 14일 이내 : 착수보고서(CD 및 보고서 각 3부) - 최종 보고서(산출물) ․완료보고서 : 최종보고서 및 요약보고서(CD 및 보고서 각 3부) ※ 사업자는 과업이 완료되기 15일 전에 보고서의 초안을 발주기관에 제출하여 심의를 받고, 수정사항에 대해서는 보완토록 함 ※ 제안사(계약상대자)는 보고서 작성 중 항상 발주기관과 긴밀한 협의를 하여야 함 ※ 발주기관은 계획된 성과품 이외에 과업수행의 내역을 파악할 수 있는 별도의 산출물을 요구할 수 있음 ․ 사용자 지침서, 스피드게이트 운영지침서(CD 및 보고서 각 3부)
산출정보		□ 계약관련 산출물
관련요구사항		□ PMR-002, PMR-003

요구사항번호		PMR-005
요구사항 명		사업총괄관리자(PM)의 지정
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	총괄사업관리자(PM)의 지정 요건에 관한 사항
	세부 내용	□ 사업총괄관리자(PM)는 반드시 주사업자(참여지분율이 제일 높은 회사) 소속으로써 시스템 개발 분야에서 5년 이상의 경력을 소지한 일정수준 이상의 기술인력으로 지정하여야 함. □ 사업총괄관리자(PM)은 사업 전 기간 동안 상주하여야 함 □ 공동수급으로 제안할 경우 주사업자의 정규직 관리자로 선정하여야 함
산출정보		□ 사업총괄관리자(PM) 자격사항, 유사사업 참여실적 증명 서류
관련요구사항		□

요구사항번호		PSR-001
요구사항 명		교육지원
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	교육지원에 관한 사항
	세부 내용	□ 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 함. □ 교육훈련계획 작성 시 교육대상, 교육일정 및 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 발주기관과 협의하여 결정하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 함. - 교육대상(사용자, 관리자 등 교육대상 구분) - 교육일정, 교육장소, 교육내용, 교육교재에 관한 사항 - 시스템의 운영, 시스템 감시 및 보안, 비상복구 방법에 관한 사항 - 기타 교육관련 사항 등 □ 교육훈련계획에는 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관에서 관련 교육 요구할 수 있으며, 본 사업 수행 범위 내에서 적극 지원하여야 함.
산출정보		□ 교육훈련계획서
관련요구사항		□

8) 프로젝트지원 요구사항(PSR : Project Support Requirement)

요구사항번호		PSR-002
요구사항 명		기술이전
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	기술이전에 관한 사항
	세부 내용	□ 사업수행 과정상 수반되는 전문기술 및 관련된 제반사항에 대한 기술이전 계획을 상세히 제시하고 발주기관에 이전하는데 최선을 다하여 지원하여야 함. □ 기술이전계획 작성 시 발주기관과 협의하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 하며, 계획에 따라 기술이전을 수행하여야 함. - 기술이전 내용 (시스템 운영 필요하거나 경미한 장애조치, 응급조치 기술 등 포함) - 기술이전 방법 및 기간 - 인원 - 비용부담조건(해당시) □ 과업 수행 중 확인된 사항에 대한 산출물 작성 및 기술이전에 필요한 사항은 수시로 정비하여야 하며, 인력 변경에 따른 인계인수 또는 기술이전 등에 활용 가능해야 함. □ 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 적극 지원하여야 함
산출정보		□ 기술이전계획서
관련요구사항		□

요구사항번호		PSR-003
요구사항 명		하자보수 일반
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항
	세부 내용	□ 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원인력 및 지원방법(상주, 비상주) 지원내용 등을 제시하여야 함. □ 하자보수 범위를 초과하여 유상으로 처리되는 유지보수 사항에 대해서는 대상범위와 유상처리 기준을 명확하게 제시하여야 함. □ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 □ 하자보수 기간 중에 시스템 운영 및 유지보수 등을 시스템 운영자가 수행할 수 있도록 기술 전수 실시 - 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 등을 강구하여야 함. - 하자보증 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리(또는 처리방안 도출(발주기관 협의))하거나 동일 신품 또는 그 상 위기능의 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발 견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 하여야 함. ◦ 사업 종료시에 하자보증확약서, 유지관리확약서(유상처리 기준 포함)를 제출하여야 함.(제조사, 기술지원사 확약서 포함)
산출정보		□ 하자보증확약서(하자보증 범위 및 세부내역 포함) □ 유지관리확약서(유상 유지관리 범위 및 세부내역 포함)
관련요구사항		□

요구사항번호		PSR-004
요구사항 명		시스템 운영지원
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	시스템 운영지원
	세부 내용	□ 준공후 2주이상 운용직원을 상주시켜 게이트의 문제점 발생시 신속한 대응과 기술이전교육을 하여야 한다. □ 검수 후 발주기관의 시스템 시행 계획에 따라 필요한 상세절차 및 일정 계획을 수립하여야 함 □ 시스템 운영과 관련되는 모든 사항을 통합하여 관리할 수 있는 방안을 제시해야 함 □ 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함 □ 시스템 설치/관리 매뉴얼 장애복구 방법 및 관련 개발자 연락처를 문서화하여야 함
산출정보		□ 교육훈련계획서
관련요구사항		□

9) 컨설팅 요구사항(CNR - ConSulting Requirement)

요구사항번호		CNR-001
요구사항 명		서소문청사 보안강화(물리적, 관리적, 기술적) 컨설팅 요구사항
요구사항 분류		서소문청사 보안강화 컨설팅
상세 설명	정의	서소문청사 보안강화 컨설팅
	세부 내용	□ 서소문청사의 물리적, 관리적, 기술적의 취약한 부분을 출입문부터 부서까지 보안대책 컨설팅 - 단말, 네트워크, 플랫폼, 서비스 등 다양한 분야에서 스마트한 보안 프로세스 개선 및 효율적 관리방안 등 제안 □ 방문객과 상주 근무 인력의 효율적인 출입관리를 위한 보안 컨설팅 □ IoT 및 위치인식시스템 등 해외․민간기업의 보안 강화 성공 사례를 청사 적용 가능 기술 컨설팅(스마트한 청사 관리 대책 방안)
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		CNR-002
요구사항 명		서소문청사 로비 스피드게이트 재배치 요구사항
요구사항 분류		서소문청사 로비 스피드게이트 재배치 및 보안 요구
상세 설명	정의	서소문청사 1동 로비 스피드게이트 재배치 및 보안요구
	세부 내용	□ 서소문청사 1동 로비 시민전용 엘리베이터 사용을 위한 보안대책(물리적 보안) - 서소문청사 1동 13층 전동전망대에 방문하는 시민들의 안전과 보안을 위해 로비 전용 엘리베이트 사용을 위한 보안대책 및 Glass Wall 설치 위치 등 □ 서소문청사 1동 로비의 직원 및 방문객의 효율적인 출입을 위한 스피드게이트 재배치 모델링 컨설팅
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		ENR-001
요구사항 명		시공 조건 확인
요구사항 분류		시공 조건 확인
상세 설명	정의	시공 조건 확인
	세부 내용	□ 시공 전 협의사항 - 계약자는 시공 전에 현장 여건을 조사한 후에 협의 및 조정이 필요한 사항에 대하여 감독관과 협의해야 한다. ․설비(게이트의 색상, CI, 카드리더 등)의 성능 및 설치 위치에 관한 협의 ․설비 설치 위치 및 배관·배선공사에 대한 건축환경 협의 ․설비 설치 위치에 대한 상용전원 공급위치 협의 ․설비의 접지 접속 위치 협의 등 □ 현장 여건의 파악 - 계약자는 시공 전 현장의 시공 여건에 대하여 검토해야 한다. - 시공장소의 환경, 설치장소의 토목/건축여부, 작업용 전원의 가설여부, 기자재의 운반경로 등을 확인한다. - 시공 작업 중 부득이 하게 발생할 수 있는 타 공정 손상에 대해서는 발주자와 협의해야 한다. □ 설계도서의 검토 - 계약자은 시공 전에 관련 시방서 및 관련 도면을 검토해야 하며, 감독관 에게 시공에 관련된 상세한 시공용 도서를 제출한다. ․상세시공내역(시공내역서, 시방서, 시공도면) ․시스템의 배치도면 ․시스템의 설치상세도 □ 시스템 설치 - 모든 기기는 합법적인 절차에 따라 제작 또는 구입된 제품으로 제조업자의 협조와 스피드게이트 시스템 설치에 관계되는 기술기준에 따라 시스템을 설치한다. - 설치는 시방서 등에 기술된 요구사항과 사양에 따라 감독관에게 고품질의 시스템을 제공하기 위한 모든 인력자원, 도구, 장비, 서비스 및 테스트를 포함해야 한다. - 계약자는 설치 구역의 조사를 수행하고, 설치 요구사항을 결정하고 나서 완전한 시스템이 구성되는데 필요한 모든 자재를 설치해야 한다. - 이전 또는 철거하여 재활용하는 스피드게이트 등 철물 판금 제작물에 대해서는 수선 도장 후 설치 시공하여야 한다.
산출정보		□
관련요구사항		□

10) 공사 요구사항 - ENR(Engineering Requirement)

요구사항번호		ENR-002
요구사항 명		설치․시공, 게이트 설치조건
요구사항 분류		설치․시공, 게이트 설치조건
상세 설명	정의	설치․시공, 게이트 설치조건
	세부 내용	□ 스피드게이트 설치 공사 - 기기설치는 감독원 입회하 또는 승인을 득한 후 설치한다 - 기기는 취급에 주의한다 - 공사 진행중 기기의 도난, 파손의 경우는 도급자가 책임 변상한다 - 모든 기구물은 청사에서 정해준 규격에 의해 제작 설치한다 - 모든 기기는 부착 후 정확하게 조정하고 테스트를 실시한다 □ 설치․시공 - 시스템 설치를 위하여 대리석 철거 및 바닥 마감 공사는 기존에 설치 되어 있는 마감재와 잘 조화되도록 한다. - 바닥면 또는 구조물의 상태와 조건, 시공 오차 및 스피드게이트를 설치하는 데에 영향을 미치는 각종 요소들을 확인 점검한다. - 바닥공사 후 게이트 설치를 위한 앵커볼트 작업의 위치를 정확히 파악한다. - 결정된 설치위치에 게이트 고정용 앵커볼트에 견고하게 고정한다. - 컨트롤러로부터 넘어온 통신 케이블을 결선한다. - 수평, 수직을 정확히 유지하고 계획된 선에 정확히 맞추고, 이음부분은 실금 맞춤으로 한다. - 게이트는 정확한 위치에 안착 후 게이트 내부에 있는 앵커볼트를 이용, 게이트의 작동과 외부 충격에도 유동이 없도록 시공 한다. - 스피드게이트 전원공급을 위해 사전에 설치될 위치까지 배관 배선이 완료되어야 한다. - 출입관리시스템과의 연동을 위해서 사전에 설치할 위치까지 배관배선 공사가 완료되어야 한다. □ 게이트설치 조건 - 유리 날개 개방 방식은 항상 닫혀 있는 상태에서 출입 허가된 인원이 통과할 경우 개방되는 Normal Close Mode로 운영하며, 행사 등 특별할 경우 Normal Open Mode로 변경이 가능하도록 2가지 모드를 지원 해야 한다. - 스피드게이트에 사용되는 RF카드리더기는 게이트 내부에 장착한다. - 출입관리시스템 주중계기, 리더 인터페이스의 비상경보(화재 등)를 입력받아 스피드게이트를 제어할 수 있도록 구성 한다. - 스피드게이트 설치 공간 외 공간은 출입을 제한하기 위해 필요시 유리벽을 추가로 설치하여 출입을 제한한다. - 사용자 편의를 위해 수동 조작반으로 Open/Close가 가능하고, 게이트 이상 시(Error 발생) Reset 버튼을 통해 정상상태로 복구되어야 한다. - 정상 출입자와 부정 통행자를 식별하여 날개의 LED Color(청색과 적색)가 변경되어 관리자가 원거리에서도 시각적으로 확인이 가능해야 한다.(색상 변경 가능) - 장애인 및 VIP 또는 게이트를 통과할 수 없는 장비의 이동을 위해 필요시 수동출입문을 별도로 설치한다. - 유지보수의 편의성을 위해 에러코드를 자체 CPU에 저장하여 손쉽게 문제를 해결할 수 있어야 한다. - Total 및 Reset 카운터가 부착되어 전체 및 일정기간 또는 일정시간 통행량을 확인할 수 있어야 하며, 경보음(알람) 음량(볼륨) 조절이 가능해야 한다. - 통행 폭은 최대 600mm를 확보하여 출입 시 제약이 없어야 하고, 출입증을 카드리더에 접촉한 후 날개가 열리는 시간, 통과시간, 미진입 시간 등을 임의로 설정할 수 있어야 한다. - 게이트는 양방향 출입이 가능하여야 하며 동작설정에 따라 단방향 출입도 지원이 가능하여야 한다. 출입은 카드리더가 읽힌 방향에 따라 허용하며 단방향 출입모드로 설정하면 센서감지를 통해 카드리더를 사용하지 않고 출입할 수 있어야 한다. - 정전 시 게이트의 날개는 관리자에 의해 손으로 개방이 가능해야 한다. - 연속통과 시 통행허가 신호를 최대 9인까지 저장하여 통과할 수 있어야 한다. - 게이트 센서 불량 시 불량센서 표시 및 경보음 발생으로 불량센서를 확인할 수 있어야 한다. - 카드리더의 장애 발생 시 함체로부터 카드리더의 조립 및 해체가 용이하도록 설치해야 한다. - 게이트안쪽에 감지센서 7조 이상을 내장하여 다양한 경우에 대비하고 날개 중앙에 사용자나 물체가 감지될 경우 날개의 폐쇄작동이 중지 되어 날개 사이에 끼이는 사고로부터 사용자와 물체를 보호하는 등 안전하게 운영되어야 한다. - 화재발생으로 건물이 정전되었을 경우 스피드게이트는 통로별 LED를 점등하여 대피자가 출구를 쉽게 찾아 신속히 대피하도록 유도 하여야 한다.(LED점등시간 최소 20분) □ 전원 - 주 공급 전원 설비의 시설은 계약자의 책임이 아니다. 계약자는 모든 시스템 구성 설비에 전력 공급이 충분히 될 수 있도록 할당된 분전반의 공급 전력을 검토해야 한다. - 계약자는 전원공급을 위해 분전반에서부터 시스템 함체, 랙 등까지 요 구되는 배전로 설정과 설치 책임이 있으며 기타 부가적으로 요구되는 배선 배관에 대하여 책임진다. 계약자는 전기설치와 관련된 전기관련 시방서를 준수해야 한다. - 계약자는 시스템에 공급되는 전원의 안정도를 감독관과 함께 검토해야 하며 전원이 불안정할 경우에는 시스템 및 시스템 장치에 공급되는 전원의 안정도 및 과도 전압을 최소화하기 위해 정 전압 변압기, 전압 조절 변압기 등을 설치해야 한다. - 각 장비 내부에 보조 전원장치를 사용하여 비상으로 전원(백업시간:10분)을 공급할 수 있도록 구축 하여야 한다. □ 과도 현상 보호 - 계약자은 실내장치와 실외장치를 연결하는 통신 및 전원 케이블에 낙뢰로 부터 과도현상을 보호할 수 있는 장치를 제공해야 한다. - 계약자는 시스템의 설치 위치가 과도현상이 발생하는 장소 또는 발생 할 수 있는 장소인지 여부를 사전에 결정하여 과도현상 억압 장치, 격리 변압기 등 과도 현상 보호 장치를 설치해야 한다. - 계약자는 고주파 장애 및 전자파 장애에 의한 시스템 손상의 잠재적 가능성을 축소하기 위하여 산업 현장에서 표준으로 사용되는(실행되는) 방법을 적용해야 하며 정전기에 의한 손상의 잠재 가능성을 명시하고 보호를 위한 적절한 예방을 해야 한다. 만일 필요한 경우 장비에 대한 정전기의 위험을 운용 유지보수 요원에게 경고하기 위한경고신호 등을 사용해야 한다. □ 접지 - 계약자는 접지와 접속의 기술 시방을 준수해야 하며 전기 접지와 통신 접지를 분리하여 설치해야 한다. - 계약자는 시스템 보호을 위하여 통신접지 시스템에 과도 현상 및 기타 장치의 보호 목적으로 사용되는 모든 접지를 연결해야 한다.
산출정보		□
관련요구사항		□

요구사항번호		ENR-003
요구사항 명		배선․배관 공통사항
요구사항 분류		배선․배관 공사 공통사항
상세 설명	정의	배선․배관 공사 공통사항
	세부 내용	□ 배관 및 배선 자재 - 배관 및 배선은 KS규격 및 동등 이상의 자재를 사용하여야 한다. □ 배관설치 - CABLE의 단말처리는 승인되는 것 이외의 것은 사용할 수 없음 - 배선 공사시 타배선과의 충분한 이격거리를 유지시킴 ․저압 옥내배선 : 100(절연전선) ~ 300(나선)mm 이상 ․ 고압 옥내배선 : 150(CABLE)mm 이상 - 타 배선에 절연관 또는 내화벽이 설치되어 직접 접촉이 없는 경우는 위의사항의 이격거리를 따르지 않아도 된다. - 전원 CABLE 과 CONTROL CABLE은 분리, 포설 하여야 한다. 600V이하회로의 CABLE로서 각 CABLE의 절연이 600V급 이상이면, 같은 TRAY나 CONDUIT에 수용할 수 있다 - CABLE 설치중 절연 피복의 손상이나 조임, 굴곡 등이 없도록 평활하게 포설되어야 하며, 설치중 손상된 CABLE, 피복이 찢어진 CABLE은 여하한 경우에도 사용할 수 없다 - 다른 시설물과 근접되었거나 기계적 혹은 물리적 손상을 입을 우려가 있는 장소의 CABLE은 당사 공사감독원이 필요하다고 인정되면 적합한 보호 조치를 하여야 한다 - CABLE은 과열 지역이나 화재 발생의 우려가 있는 지역은 가능한 피하여 포설 되어야 한다. 또한 어떤 화인 등으로 인하여 화재 발생시 화재의 확장 및 CABLE 보호를 위하여 방화 등 기타 필요한 조치를 강구한다 - 모든 CABLE은 단말에서부터 최소 1M이내 에서 튼튼하게 지지되어야 하며, CABLE TERMINAL에 수직 하중을 받지 않도록 한다. 또한 이를 위해 사용되는 CABLE GLAND, 목대 등은 감독원의 승인을 득한 후에 사용한다 - CABLE 삽입 후 실외나 습기가 있는 지역에 설치되는 케이블 말단은 습기가 침입하지 않도록 처리한다. - 설치된 CABLE은 현장용접 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 임시로 덮개를 덮는 등의 보호조치를 하여야 한다 - 기본적으로 난연 CD전선관 으로하며 건물내 복도구간에 설치된 덕트 또는 케이블 트레이를 이용하여 외선용 Cable로 시공한다 - 배선의 분기점 및 루프의 시작점의 결선은 각실의 기기내부에서 결선한다 - 케이블 덕트 또는 케이블 트레이에서 각 실로 인입되는 부분은 내연성 주름관으로 처리한다 - 덕트에서 각실로 인입되는 부분은 덕트에 의한 CABLE의 손상이 없도록 컨넥터로 처리한다 - 내연성 주름관은 쳐지지 않도록 고정한다.(양쪽 새들 사용) - 천정면, 벽면에 포설하는 경우는 CORNER 부분을 따라 눈에 띄지 않도록 포설하며, 설치 후 변형이나 탈락되지 않도록 견고하게 취부한다 - 벽면 하단부로의 배관은 하지 않는다 - 고정용 나사는 접시머리나사를 사용하며 길이는 10mm 이상의 것을, 직경은 3.5mm이상의 것을 사용해야 한다 - 취부면이 대리석, 타일등 나사로 고정할 수 없는 곳은 실리콘계 접착제를 MOLD 양면테이프와 병행하여 취부한다 - MOLD의 나사 고정간격은 MOLD 길이에 따라 다음과 같다 ․60cm ~ 100cm : MOLD 양단에서 10cm의 위치와 전체 길이의 1/2위치에 총 3개소에 나사로 고정 시킨다 ․60cm 미만 : MOLD 양단에서 10cm의 위치 총 2개소에 나사로 고정시킨다 - 절단면은 직각이 되도록 절단하고, 접합면은 틈사이가 벌어지는 곳이 없 도록 하며, 곡부분의 가공시는 절단면 각도를 45°씩 절단하고 굴곡부분은 90°가 되게 하여야한다 - MOLD의 종단부분 처리는 기기등의 배선이 나와 있지 않는 경우는 뚜껑 부분을 안쪽으로 구부려서 열려있는 부분을 막아 주어야 한다 - MOLD는 천정면, 벽면을 기준으로 수평, 수직으로 취부 해야 한다 - MOLD를 연결할 때는 층이 지거나 어긋남이 없어야 한다 - MOLD의 색상은 취부면의 색조와 맞게 선정한다 - MOLD내 선로 접속 시 접속부가 겹치지 않도록 엇갈리게 포설한다 □ 매입배관 - 청사와 협의 후 천정면, 벽면에 눈에 띄지 않도록 벽체 내에 배관을 포설한다 - 홈파기 및 벽체 타공 시 천정부터 장비 설치 위치까지 직선으로 절단하여 매입배관을 설치하고, 타공 전 동등 또는 유사 재료로 정교하게 1차 마감 한다 - 2차 마감은 매입배관 주변과 동일 또는 유사 색상으로 도색 또는 화강석 으로 마감한다 - 매입배관을 위해 홈파기 및 타공은 업무 시간 외에 진행하여야 한다. □ TRAY 및 DUCT 설치 - 동일 TRAY 및 DUCT 내에 고압 CABLE과 저압 CABLE을 포설할 경 우에는 SEPARATOR를 설치한다 - CABLE TRAY 배선 시 사용전압에 따라 TRAY가 분리 혹은 분할되어 있으므로 이에 맞는 TRAY에 배선을 포설해야 한다 - CABLE TRAY에 CABLE 포설시 동선 BAND나 CABLE TIE로 CABLE을 일정한 간격으로 견고하게 고정시켜야 한다. ․수평방향 : 1.5m 이하 ․수직방향(올라가는 부분, 내려가는 부분) : 1m 이하 ․굴곡부분 : 0.5m 이하 - CABLE이 아닌 전선을 CABLE TRAY에 포설하는 경우, PVC PIPE등의 배관재를 사용하여야 한다. 이때 일정한 가격으로 견고히 고정시켜야 한다. 고정 간격은 위의 사항과 동일하다 - TRAY 혹은 DUCT로부터 기기로 연결되는 CABLE은 전선관을 사용하며, TRAY로 부터 하부로 배관 시 에는 SERVICE CAP을 사용 빗물이 침투하지 못하도록 공사하며, CABLE이 TENSION을 받지 않도록 배선한다 - CABLE 양 끝단에 CABLE SCHEDULE에 표시된 번호가 새겨진 식별표를 부착한다
산출정보		□
관련요구사항		□

Ⅴ		제안안내

1. 입찰방식

가. 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약

❍「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령」제44조에 의거 “협상에 의한 계약체결” 방법 적용

제안요청서 배부 → 제안서 접수 → 제안설명 및 평가 →

협상대상업체 선정 → 협상실시 → 사업자 선정 및 계약체결

❍ 적용규정

-「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정자치부 예규 제39호, 2016.1.19)

-「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침」(행정자치부 고시 제2015-45호, 2015.12.22)

나. 입찰방식 : 제한경쟁입찰

§ 제안(입찰) 참가자격 관련

❍ 입찰공고일 현재 사업자의 주된 종목을 보안용 게이트 제조업으로 등록한 업체(사업자등록증, 공장등록증, 직접생산확인증명서 제출)이며, 최근 3년 이내 단일 계약건으로 3억(부가세 포함) 이상 스피드게이트 물품 납품 실적이 1개 이상 있는 업체(실적증명 제출)

❍ 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사인 경우에는 입찰에 참여할 수 없으며, 계약체결일 기준으로 입찰자가 상호출자제한 집단에 속하는 회사일 경우에도 계약체결 불가(차순위자와 협상)함.

❍「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체이어야 함

❍ 미자격자가 고의로 입찰에 참가하여 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제1항에 해당된다고 판단될 경우에는 관계 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있음

2. 입찰서류 및 제안서 제출

❍ 일       시 : 공고서에 정한 바에 따름

❍ 공 고 방 법 : 발주기관 홈페이지(http://www.seoul.go.kr) 또는 나라장터(국가 종합전자조달, http://www.g2b.go.kr)

❍ 사업 설명회 : 제안요청서로 갈음

❍ 입찰 참가등록 및 제안서 제출

- 입찰참가등록기한 : 공고서에 정한 바에 따름

제출장소	제 출 서 류
<입찰참가 등록> 서울시 재무과 서울시청 서소문별관 1동10층	① 입찰참가신청서[별지서식 8] 1부 ② 사업자등록증, 공장등록증 사본 각 1부 ※ 원본 대조 필 명기 후 인감날인 ③ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에서 정한 직접생산확인증명서 1부 ④ 법인등기부등본 및 법인인감증명서 각 1부 (개인사업자인 경우 주민등록등본 및 인감증명서 각 1부) ※ 인감(사용인감) 지참, 사용인감 사용시 사용인감계 별도 제출 ⑤ 청렴계약이행서약서 [별지서식 13] 1부 ⑥ 공동도급인 경우 - 공동수급 표준협정서(공동이행방식)[별지서식 11] 1부 - 합의각서 [별지서식 12] 1부 - 공동도급 구성원별 위 ②~⑤의 서류 각 1부 ⑦ 위임장 또는 재직증명서 1부 (대리인 제출 시) ⑧ 기타 입찰참가자격을 증명하는 서류, 입찰공고문 추가명시 서류 등

❍ 제안관련 문의사항

- 문 의 처(사업부서) : 서울시청 총무과 별관운영팀

- 전화번호  (담당자) : 02-2133-1607 (담당자 : 김문연)

- E-Mail            : fht_leader@seoul.go.kr

❍ 특이사항

- 공고서의 정한 기간 내에 입찰서류 및 제안서를 제출하지 않은 경우 제안의사가 없는 것으로 간주하며 우편 및 이메일 접수는 받지 않음

- 제안서는 공문을 첨부하고 가격입찰서는 봉인하여 제출하여야 하며, 대표자의 인감이 날인되어 있어야 함(날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 않음)

제출장소

제    출    서    류

<제안서 제출>

서울시청

총무과

(별관운영팀)

서울시청 (서소문별관)

1동 14층

① 입찰참가 공문1부

② 제안서 평가본 포함 10부

- 제안서 원본 1부

- 평가본 및 평가본 요약서 각 9부

※ 발표자료는 제안서 제출 시 함께 제출할 것

※ 제안서 평가본은 표지 및 내용에 회사명, 회사로고 등 회사식별정보를 제외하고 작성할 것

※ 평가본은 제안서 제출시 pdf파일 제출하며, 제안서 원본은 최종 계약업체에 한하여 차후 pdf파일 제출함

※ PDF파일은 심사위원들의 심층 검토를 위해 사전배포 될 수 있으니, PDF파일 생성 시 보안설정(복사방지, 출력해상도 조정 등) 등 유의하여 작성

③ 가격입찰서 [별지서식9] 및 가격제안서[별지서식10] 각 1부

※ 제출 시 [별지서식 9] 및 [별지서식 10]을 넣고 밀봉 후 대표자 인감을 날인하여 제출

④ 평가관련 증명서류(별권 제출) 원본 및 사본 각 1부

- 주요사업 실적증명 서류

- 신용평가등급 확인서, 신인도 및 가산점 관련 증거 서류

- 참여인력 증거서류

․ 기술 및 경력 증거서류

(자격증 및 학력 증명, 경력 증명, 건강보험 자격 득실 확인서 등)

․ 재직 증명 서류(건강보험 자격 득실 확인서 등)

⑤ 기타 제안에 필요한 서류

3. 제안평가 및 협상

가. 평가방법

❍ 제안서 평가는 본 사업의 ‘협상에 의한 계약 체결기준’[붙임3]에 의거하여 평가하며, 본 제안요청서 정하지 않은 사항은『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』(행정자치부 제19호, 2015.4.10),『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침』(행정자치부 고시 제2014-1호, 2014.11.25.)을 준용함

1) 일반사항

❍ 평가항목 및 배점

- 기술능력 평가 : 90점(정량적 평가 20점, 정성적 평가 70점)

- 입찰가격 평가 : 10점

❍ 종합평가점수 산출

- 종합 평가점수(100점) = 기술능력 평가점수(90점) + 입찰가격 평가점수(10점)

2) 기술능력 평가

❍ 정량적 지표의 평가는 담당부서(자)가 [붙임5] ‘정량적 지표의 평가기준’에 따라 평가함

※ 제안사는 [별지서식25] ‘정량적 평가지표 자가진단표’을 작성 제출할 것

❍ 정성적 지표의 평가는 “제안설명회”를 개최하고, 발주기관에서 구성한 “제안서 평가위원회”에서 [붙임6] ‘정성적 지표의 평가기준’에 따라 평가함

3) 입찰가격 평가

❍ 입찰가격 평가는 “제안서 평가위원회”의 정성적 지표의 평가 후 [붙임7] ‘입찰가격 평가산식’에 따라 평가함

나. 협상적격자 선정 및 협상순서

❍ 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 제안사를 협상적격자로 선정하며, 평가 결과 협상 적격자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

❍ 협상순서는 협상적격자 중 종합 평가점수의 고득점 순에 의하여 결정하며, 1순위 협상적격자와 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않는다.

❍ 모든 협상적격자와 협상이 결렬될 시에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

다. 제안설명회 개최

❍ 일시 및 장소 : 추후통지

❍ 제안서 설명시간 : 업체당 30분 내외(제안설명 15분, 질의응답 15분)

❍ 제안서 설명순서 : 제안서 발표당일 추첨으로 정함

❍ 유의사항

- 제안 설명은 제안사(주사업자)의 사업총괄책임자(PM)가 직접 발표하며, 발표자가 사업총괄책임자(PM)와 다른 경우 제안발표를 제외하고 제안서 등 서류만으로 평가함

※ 업체별 참여자 수는 5인 이내로 하며, 동영상등을 이용한 간접발표는 불허함

- 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기하고 그 사유를 명확하게 설명하여야 함

- 제안설명회 불참업체는 사업제안서 제출 여부 및 가격입찰 여부와 무관하게 기술능력 평가점수의 정성적 평가항목을 0점 처리한다.

- 위원회 개최 후 평가결과는 공개한다.

4. 제안사 유의사항

가. 제안사 준수사항

❍ 제안사는 본 사업 추진과 관련하여 “Ⅳ. 제안요청 내용”의 “제약사항” 및 “프로젝트관리 요구사항” 등에서 명시한 사항을 반드시 준수하여야 한다.

❍ 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 발주기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

❍ 제안사는 발주기관으로부터 제안요청서를 비롯한 배부 받은 입찰에 관한 서류, 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

❍ 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 제안서 평가외의 용도로 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 한다.

❍ 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시․실격처리․해당자료 미인정 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.

❍ 참여인력(제안서 인력)은 입찰 공고일 현재 제안사(공동수급체 포함) 구성원의 자사인력으로 구성하여야 한다.

-「파견근로자 보호 등에 관한 법률」등에 의한 적법한 ‘파견근로자’는 제안사 인력으로 간주함.

- 제안업체(공동수급체 포함) 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 계약 후 하도급 계약 승인을 얻지 못하는 경우에는 제안업체의 동일수준 이상의 자사인력으로 대체하여야 함.

❍ 공동수급 형태로 제안할 경우에는 주사업자와 부사업자 간의 업무수행 범위를 상세히 정의하고 책임관계를 명확히 하여야 하며, 조직도를 제시하여야 한다.

나. 계약목적물의 귀속에 관한 사항

- 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물 일체에 대한 지식재산권은 발주기관과 제안사(계약상대자)가 공동으로 소유함을 원칙으로 하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함.

다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리정할 수 있으며, 지식재산권의 타용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의하여야 함.

- 본 사업 이전에 제안사(계약상대자)가 자체적으로 보유한 지식 자산(본 사업과 관련된 경우에 한함)의 경우에는 “발주기관”에 사용권이 부여됨.

- 지식재산권과 관련하여 정하지 않은 세부사항은 용역계약일반조건(기획재정부 계약예규) 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따름.

- 제안사(계약상대자)는 계약을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권, 산업재산권, 저작권 또는 재산 및 기타 일체의 피해가 발생되지 않도록 유의하여야 하며, 이의 위반으로 사업기간 또는 사업 종료 이후라도 문제가 발생되는 경우 일체의 책임을 지며, “발주기관”을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되는 경우에는 피해자 측에 합의 배상하여야 함.

❍ 본 사업을 수행함에 있어 계약목적물의 귀속에 관한 사항을 다음과 같이 정한다.

다. 하자담보책임에 관한 사항

- 하자담보책임기간은 사업종료(검수) 후 1년( 단, 제조사 등에서 1년 이상의 하자담보책임기간을 규정한 경우에는 제조사 규정(기준)을 우선 적용)으로 하며, 해당 기간 중 시스템의 하자발생 시 즉시 보완하여야 함.

- 하자보증 이행으로 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 부담(하자보증은 과업의 일부로 부실에 대한 부담은 계약상대자가 부담)함.

하자보수의 범위는 개발 분야 및 도입 장비(HW, SW)를 포함하는 전체 시스템으로 함.

※ 단순 유지관리, 운영위탁, 컨설팅, 전산감리 등에 관한 부분은 하자보수 범위에서 제외함

계약상대자는 사업종료 시 하자보증이행서를 제출해야 함.

※ 하자보수범위를 포함하지 않는 사업의 경우 하자보증이행서 제출 제외

❍ 본 사업의 하자담보 책임에 관한 사항은 다음과 같이 정한다.

라. 작업장소에 관한 사항

❍ 본 사업 수행에 필요한 작업장소는 발주기관과 계약상대자가 사업수행의 효율성, 정보보안 조건 등을 고려하여 협의 결정한다.

마. 제안서 보상에 관한 사항

❍ 본 사업은 단순 하드웨어(H/W) 구축 사업으로 제안서 보상대상 사업에서 제외한다.

바. 기타사항

❍ 본 제안요청서 및 제안서, 계약사항 등에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 제안사의 협의에 의해 결정한다.

❍ 제안사는 공급하는 제품의 품질에 대하여 최종적인 책임을 져야 하며 기술 환경 및 기타사정 등으로 인하여 일부 사업의 내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우에는 협의에 의해 조정할 수 있다.

❍ 발주기관은 제안내용에 대한 확인․검증이 필요한 경우 제안사에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

❍ 공동계약의 경우, 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 실제 계약에 참여하지 아니하는 구성원에 대해 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한한다.

❍ 발주기관은 참여인력이 본 용역 수행 상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 제안사(계약상대자)는 이에 응하여야 한다.

❍ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있다.

❍ 입찰 공고문, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨(붙임 등) 등에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주기관의 계약 요령에 따른다.

Ⅵ		제안서 작성 기준

1. 제안서 작성방법

가. 제안서의 효력

❍ 제안서에 명시된 내용과 발주기관의 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술평가를 위한 제안 설명 및 답변자료 포함) 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

❍ 제출된 제안서는 변경할 수 없으며 제안서 접수 후 발주기관은 필요시 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

나. 제안서 작성지침 및 유의사항

❍ 제안서는 제안요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성하여야 하며 다음의 사항에 유의하여 제안서를 작성한다.

- 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있음.

- 제안서에는 사업계획과 제안요청 제반사항에 대해 제안사의 추진전략, 추진체계, 추진계획 등이 구체적이고 명확하게 제시되어야 하며, 특히 제안 기술부문의 요구사항에 대해서는 보다 구체적이고 상세한 방안을 제시하여야 함

- 제안서에는 본 사업에 대한 이해 하에 전체적인 시스템 운용방안이 제시되어야 하며, 제안요청서에서 추구하는 목표를 달성하기 위해 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진방안과 제안사의 역할을 명확히 제시하여야 함.

- 사업 전반에 대한 위험요소, 위험관리지표 등 발견 및 대응전략 등이 포함된 위험관리 계획을 제시하여야 함.

- 제안요청서에서 제시한 요구사항 및 산출물은 제안사에서 제시한 사업 수행방법이나 제안에 따라서 발주기관과 협의하에 일부 변경 적용할 수 있음.

❍ 제안서의 작성은 “[붙임1]제안서 목차” 및 “[붙임2] 제안서 작성지침”을 가급적 준수하여 작성하여야 하며, “[붙임2]제안서 작성지침”에서 제시하는 참고서식 이외의 증거자료나 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서 원본에만 별첨으로 첨부하여야 한다.

- 제안서의 목차와 함께 “[별지서식19] 제안요구사항 수용 조견표”를 작성하여 첨부할 것

❍ 각종 증거서류의 표지에는 원본과 사본의 구분을 표시하여야 하며, 사본일 경우 원본대조필 인을 날인하여야 하고 원본과 사본의 내용이 상이할 경우 원본의 내용을 채택한다.

❍ 제안서 제본하지 않고 A4용지 3hole 바인더 사용을 권고.

- 제안서 본문 내용은 200페이지(100장) 이내로 작성

- 양면 및 단색으로 인쇄 (단, 목표시스템 개념도(구성도)는 칼라 인쇄 가능)

- ‘평가용 제안서’는 업체명, 로고 등 제안사를 표시하는 일체의 정보가 포함되지 않도록 유의하여 작성(평가용 제안서 PDF본 포함)※[별지서식 16] 표지 사용

❍ 제안서는 A4종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있다.

❍ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여한다.

❍ 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표를 제공하여야 한다.

❍ 제안서의 요약서의 제출이 필요한 경우 70페이지 이내로 작성하되, 흑백으로 인쇄하여야 하며, 표지는 [별지서식 ] ‘평가용 제안서 표지 제작기준’을 참조한다.

❍ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다.

- “사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함.

2. 입찰 및 제안서 관련 붙임 및 별지서식

[붙  임]

1. 제안서 목차		1
2. 제안서 작성지침		2
3. 협상에 의한 계약체결 기준		4
4. 제안서의 평가항목 및 배점기준		7
5. 정량적 지표의 평가기준		8
6. 정성적 지표의 평가기준		15
7. 입찰가격 평가산식		17
8. 정보화사업 용역업체 정보보호 준수사항		18
9. 외주 용역사업 보안특약 조항		22
[별표1] 사업자 보안위규 처리기준		23
[별표2] 보안위약금 부과기준		25
[별표3] 누출금지 대상정보		26
10. 보안 서약서		27

[별지서식]

1. 제안사 일반현황		31
2. 자본금 및 매출액(최근 3년)		33
3. 유사사업 실적(최근 3년)		34
4. 사업실적증명원		36
5. 사업수행 조직도		37
6. 참여인력 현황		38
7. 참여인력 이력사항		39
8. 일찰참가신청서		40
9. 가격제안서		41
10. 가격입찰서		42
11. 공동수급표준협정서		43
12. 합의각서		46
13. 청렴계약 이행 서약서		47
14. 평가용 제안서 표지 제작기준		50
15. 장애인신규직원/신규직원/비정규직정규화 채용확약서		52
16. 제안요구사항 수용 조견표		53
17. 추가제안사항 요약		54
18. 정량적평가지표 자가진단표		55
19. 근로자 권리보호 이행 서약서		56

[붙임 1]

제 안 서  목 차

§ 목차

제안요구사항 수용 조견표

Ⅰ. 제안사 일반현황

1. 일반현황

2. 주요 사업내용

3. 주요 사업실적

Ⅱ. 제안개요

1. 제안배경 및 목적

2. 제안범위 및 전제조건

3. 추진전략

4. 수행방법론 및 추진절차

5. 제안의 특징 및 장점

6. 기대효과

Ⅲ. 기술 및 기능부문

1. 사업 세부수행 내용

2. 기타 기술사항

Ⅳ. 성능 및 품질부문

1. 성능확보방안

2. 품질확보방안

Ⅴ.프로젝트 관리부문

1. 관리방법론

2. 관리역량

3. 일정계획

4. 형상관리

5. 업무보고 및 검토계획

6. 수행조직 및 업무분장

7. 투입인력 및 이력사항

Ⅵ. 프로젝트 지원부문

1. 교육 및 기술이전계획

2. 기밀보안

3. 하자보증

4. 비상대책

5. 기타 지원사항

Ⅶ. 기타

[붙임 2]

제 안 서  작 성 지 침

작 성 항 목	작 성 방 법	비고
§ 목차	. 제안서 목차 작성
제안요구사항 수용 조견표	. 별지서식을 이용하여 제안요구사항 수용 조견표 작성	별지서식19
Ⅰ. 제안사 일반현황
1. 일반현황	. 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 조직 및 인원 기술 . 최근 3년간 자본금 및 부문별 매출액 등을 명료하게 제시	별지서식1 별지서식2
2. 주요 사업내용	. 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시
3. 주요 사업실적	. 최근 3년간 주요 사업실적(해당사업과 유사사업 위주)을 제시	별지서식3
Ⅱ. 제안개요
1. 제안배경 및 목적	. 제안요청내용의 이해를 바탕으로 제안의 배경 및 목적을 기술
2. 제안범위 및 전제조건	. 제안사가 제시하는 제안범위 및 전제조건 명시 ※ 필요시 목표시스템 구성도 포함
3. 추진 전략	. 사업 추진을 위한 기 사업추진 및 기술 전략을 제시 (위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안 제시) . 본 사업의 성과지표 제시(PMR-001관련)
4. 수행방법론 및 추진절차	․ 본 사업을 성공적으로 추진하기 위한 수행방법론과 단계별 추진절차를 제시 ※ 해당시 개발방법론 및 표준프레임워크 적용 방안 등 포함
5. 제안의 특징 및 장점	. 제안사가 제시하는 제안의 특징 및 장점 기술
6. 기대효과	. 사업을 통해 발주기관 및 이용자가 얻을 수 있는 효과를 분석하여 기술
Ⅲ. 기술 및 기능부문
1. 사업 세부수행 내용	․ 본 사업의 세부사업 수행내용 및 수행방안을 제안요청서의 제안요구 사항을 중심으로 기술 ※ 시스템 장비구성 / 기능 / 보안 / 유지관리 / 컨설팅 / 공사 / 제약사항 등 본 사업의 주요 제안 요구사항에 대한 대응제안, 분석 및 기술적용, 처리방안 등 주요 제안내용을 분야별로 구분하여 기술 ※ 제약사항 준수여부 검증을 위한 지원방안은 프로젝트지원부문에 기술
2. 기타 기술사항	․ 사업 수행(기술 및 기능 제안)에 관한 기타 사항 기술 등
Ⅳ. 성능 및 품질부문
1. 성능확보방안	․ 구현하고자 하는 기능을 통해 성능이 확보(보장)되도록 방법론 및 분석도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시 ※ 성능요구사항이 있는 경우 요구사항별 성능 충족 방안 포함)
2. 품질확보방안	․ 사업 추진 단계별 품질 점검 및 검토방안을 구체적으로 제시 (품질관리조직, 방법, 절차, 내용 등과 위험관리 및 최소화 방안 등) ․ 업무별 단위시험, 통합시험, 시험운영 등 테스트 및 시험운영에 관한 사항 기술 ․ 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증 획득 사례가 있는 경우 기재 ※ 품질 요구사항이 있는 경우 요구품질 충족방안 제시
3. 디자인 및 재질	․ 시울시청 공간에 맞는 스피드게이트 디자인(세련미 등) 제시 ․ 직원과 시민들이 이용을 위한 안전성, 스피드게이트 내구성 등 제시
Ⅴ. 프로젝트 관리부문
1. 관리방법론	․ 사업추진체계, 보고체계, 구성요소, 위험요소, 변경 등의 프로젝트 관리 방법(방법론) 등을 구체적으로 제시 ※ 분리발주 사업이 있는 경우, 분리발주사업자와의 협력방안 포함
2. 관리역량	․ 사업총괄책임자(PM)의 타 프로젝트 관리실적, 유사프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량 제시
3. 일정계획	․ 사업수행에 필요한 활동을 도출하고, 활동 우선순위, 기간(일정), 자원, 인력 등 지원 및 점검계획을 상세하게 제시
4. 형상관리	․ 방법론에 근거한 산출물의 종류, 내용, 제출시기, 부수 등을 기술 ․ 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방안을 구체적으로 제시
5. 업무보고 및 검토계획	․ 사업 기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시 (착수보고, 중간보고, 완료보고, 월간보고, 주간보고, 수시보고 등)
6. 수행조직 및 업무분장	․ 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 사항을 상세하게 제시	별지서식 5
7. 투입인력 및 이력사항	․ 본 사업을 수행할 인력을 제시하고, 인력의 이력사항을 첨부	별지서식 6 별지서식 7
Ⅵ. 프로젝트 지원부문
1. 교육 및 기술이전	․ 교육 및 기술이전 계획 등을 분야별로 자세하게 제시 (교육대상, 교육기간, 교육내용, 교육인원 등)
2. 기밀보안	․ 기밀보안 대책과 프로젝트 참여요원에 대한 보안의식 고취방안을 제시 ․ 참여요원의 이직에 대한 대처방안, 저작권 보호 방안 등 기술 ․ 시스템 보안성 확보방안 및 개인정보 보호대책 등
3. 하자보증	․ 하자보수 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 제반 활동 제시 ․ 하자보증 기간 및 범위 외의 향후 유지보수 조건 등 기술
4. 비상대책	․ 안정적인 시스템 운영을 위한 백업 및 복구, 장애대응, 화재대응 대책 제시
5. 기타 지원	․ 프로젝트지원 관련 기타사항 기술 ․ 제약사항에서 제시한 각종 제약들의 검증을 위한 지원방안 등 제시
6. 유지보수	․ 본 사업을 수행하고, 유지보수 지원체계 및 물품공급 등의 신속성 제시
Ⅶ. 기 타	․ 본 사업과 관련된 기타 추가 제안사항 등 을 기술	별지서식 20 (필요시)
주) 1.원본을 제외한 평가(위원)용 제안서는 업체명, 로고, 대표자 성명 등 제안사를 표시하는 일체의 정보가 포함되지 않도록 유의하여 작성(평가용 제안서 PDF본 포함)

[붙임 3]

서울시 서소문청사 스피드게이트 구매 ․ 설치

협상에 의한 계약 체결기준

제1조 (목적) 이 기준은 아래 규정에 의해『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매 ․ 설치』사업 사업의 협상에 의한 계약체결기준에 필요한 세부기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

1.『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)

2.『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준』(행정자치부)

3.『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침』(행정자치부 고시)

제2조 (정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘협상적격자’라 함은 제안서의 평가결과 협상에 의한 계약의 협상대상자가 될 수 있는 자격을 갖춘 자를 말한다.

2. ‘협상대상자’라 함은 협상적격자로서 협상순위에 따라 발주기관 계약담당자와 제안서 내용을 대상으로 협상하는 자를 말한다.

제3조 (적용범위) 이 기준은『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매 ․ 설치』사업에 적용하되, 동 기준에서  규정하지 않은 사항에 대해서는 관련법령 따른다.

제4조 (제안서 평가) ① 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합하여 평가하며, 평가점수 비율은 기술능력 평가 90/100과 입찰가격 평가 10/100으로 한다. 평가항목 및 배점은 [붙임 4]와 같다.

② 기술능력 평가는 정량적 평가와 정성적 평가로 구분되며, 정량적 지표에 의한 평가는 계약담당자가 심사기준에 따라 평가하고, 정성적 평가는 심사위원들이 한다.

③ 기술능력 평가 중 정량적 지표(20점)는 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』제5장 협상에 의한 계약 [별표]의 기술인력 보유상태, 수행경험(실적), 경영상태, 신인도 등을 준용하여 평가하며, 정량적 지표의 세부 평가방법은 [붙임 5]와 같다.

④ 기술능력 평가 중 정성적 평가점수는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외한다. 세부 평가방법  평가항목 및 기준은 [붙임 6]와 같다.

⑤ 입찰가격 평가(10점)는 제안서 평가위원회에서 기술능력 평가(정성적 평가) 완료 후 지체 없이 입찰참가자가 참석한 자리에서 밀봉한 가격입찰서를 개봉하고 입찰가격에 대한 평가를 실시하며, 입찰가격 평가산식은 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』제5장 [별표1] 규정에 의거 [붙임 7]과 같다.

⑥ 제안서 평가 시 각 평가분야(항목)에서 따로 정하지 않는 한 점수산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다. 다만, 비교․대비 등의 계산값을 평가등급 등의 구간(이상․미만 등)에 적용할 때에는 반올림하지 아니하고 그대로 그 구간에 해당하는 등급의 점수로 산정한다.

제5조 (협상적격자 및 협상순위의 선정) ①제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인자를 협상적격자로 선정한다.

② 협상순서는 기술능력 평가점수와 입찰가격 평가점수의 합산점수의 고득점 순에 의하여 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

③ 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외한다.

제6조 (협상적격자에 대한 통지) 제5조에 의하여 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우에는 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 통보한다.

제7조 (협상절차) ①제5조에 의하여 결정된 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

② 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

③ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬 될 경우에는 재공고 입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있다.

제8조 (협상내용과 범위) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서 내용 및 제안서 평가위원회에서 권유한 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

제9조 (가격의 협상) ① 협상대상자와의 가격 협상 시 기준가격은 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

② 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정할 수 있다.

제10조 (협상기간) 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 하되, 해당사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 10일의 범위 내에서 조정할 수 있다.

제11조 (협상결과의 통보) 협상이 성립되면 그 결과를 해당협상대상자에게 서면으로 통보하여야 한다.

제12조 (계약체결 및 이행) ①협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

② 계약의 체결 및 이행에 관하여는 제11조에 의하여 서면 통보한 협상결과와 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령․시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

제13조 (평가결과 공개) 평가의 공정성 확보를 위해 위원회 개최 후 평가위원 명단과 평가점수는 공개하며, 이때 평가점수별 평가위원 실명은 공개하지 않는다.

[붙임 4]

제안(서) 평가항목 및 배점기준

구 분			평 가 요 소	배점			비고
계				100		20
기술능력평가	정량적 평가	참여인력 기술상태	∘ 사업 참여인력의 기술상태를 기술등급으로 평가	6			붙임5
		수행경험 (실적)	∘ 최근 3년간 유사 사업 실적 금액	3	6
			∘ 최근 3년간 유사 사업 실적 건수	3
		경영상태	∘ 기업신용등급 평가	6
		신인도	∘ 기술(품질)인증 보유	1	2
			∘ 혁신형 중소기업	1
			∘ 계약이행과정의 성실성 (납품지연, 하도급 대금지급 사후보고 미이행)	(-1.3)
		가산점 ※정량적평가 배점한도 내에서 가감점적용	∘ 약자 및 우수기업	최고 7.6
			∘ 일자리창출	최고 2.0
			∘ 고용안정	최고 4.0
			∘ 근로 및 하도급법 준수 정도(감점)	(최고-6)
	정성적 평가	전략 및 방법론	∘ 대상사업의 이해도 ∘ 사업추진전략의 창의성, 타당성 ∘ 적용기술의 확장성, 실현가능성 ∘ 적용 방법론의 타당성 및 적용(활용)가능성 등	6		70	붙임6
		기술 및 기능	∘ 사업추진 내용의 적정성 (각 요구사항에 대한 제안 내용의 적정성)	18
		성능 및 품질	∘ 성능확보방안, 품질보증방안 ∘ 디자인 및 재질	20
		프로젝트 관리	∘ 관리방법론 (위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정성) ∘ 일정계획 (활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등 의 적정성 등) ∘ 사업수행방안 (사업수행 조직 구성, 개발 장비 등의 적정성 등)	6
		프로젝트 지원	∘ 교육훈련 및 기술이전 ∘ 하자보수 및 비상대책방안 ∘ 기밀보안, 유지보수지원체계	17
		추가제안	∘ 본 사업과 연관있는 사항 추가 제안	3
가격 평가	입찰가격		∘ 가격평가 평점 산식 적용	10			붙임7

[붙임 5]

정량적 지표의 평가기준

평가항목		평 가 요 소 (기준)	배점		평점방법
A.참여인력 기술상태		∘ 사업 참여인력의 기술상태를 기술등급에 따라 점수화	6		기준점수 비례제
B.수행경험 (실적)		∘ 실적금액 : 최근 3년간의 유사사업 수행실적 금액 (공고일 기준)	3	6	절대평가제
		∘ 실적건수 : 최근 3년간의 유사사업 수행실적 건수 (공고일 기준)	3		상대평가제
C.경영상태		∘ 신용평가 등급에 의한 평가	6		절대평가제
D.신인도		∘ 기술(품질)인증 보유, 혁신형 중소기업, 계약 이행과정의 성실성(납품지연, 하도급 대금지급내역 사후제출 미이행)	2 (-1.3)		절대평가제
E.가 산점	약자 및 우수기업	∘ 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부 지정) 등 6개 항목	7.6		절대평가제 (가점)
	일자리 창출	∘ 당해사업 관련 신규인력 채용	2		절대평가제 (가점)
	고용안정	∘ 당해사업 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용	4		절대평가제 (가점)
	근로 및 하도급법 준수정도	∘ 임금체불 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 사실 확인된 업체 ∘ 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업(공정거래위원회) ∘ 하도급 상습위반자로 통보받은 기업(공정거래위원회)	(-6)		절대평가제 (감점)
합 계		※배점한도(20점)를 넘지 않는 범위 내에서 가산점 부여함	20

A. 참여인력 기술상태

㉮ 대    상 : 사업 책임자 및 부문별 참여자

㉯ 평가방법 : 기준점수비례제

- ‘평가대상 입찰참가자 점수’ = (참여인력별 기술등급 평가점수 × 참여율)의 합

- 평가항목 환산점수 = 배점(6점) × (평가대상 입찰참가자 점수/ 입찰참가자 중 최고 점수)

㉰ 참여인력의 기술 및 경력 상태에 대한 증명은 자격증, 경력증명서, 학력증명서 등을 기준으로 함

㉱ 참여인력은 입찰공고일 기준 제안사(공동수급사 포함)소속이어야 하며, 하도급사 인력,  기술 및 경력 상태에 대한 증거서류가 첨부되지 않은 참여인력 등은 평가에서 제외

※ 신규채용예정인력이 사업품질에 영향을 미치지 않도록 일자리창출 신규 채용 인력, 장애인 신규채용 인력 은 제안서의 사업 수행 인력에서는 제외(참여인력 평가 미반영)

㉲ 참여인력의 기술등급 평가점수

구 분	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
참여인력 기술등급	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0

※ 참여인력의 기술등급은 ‘[붙임 8]『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매․설치』사업 참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위’에 의함

B. 수행 경험(실적)

㉮ 평가대상

㉠ 실적금액 : 당해사업 발주규모(추정가격)대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 수행(준공)한 유사사업 단일실적의 규모(부가세 제외한 단일 실적 금액)로 평가

㉡ 실적건수 : 입찰공고일 기준 최근 3년간 수행(준공)한 유사사업 실적 합산건수로 평가하며, 실적 합산 시 단일실적 기준 1억 이상(부가가치세 포함) 사업으로 한정함

※ 유사사업 인정범위 : 스피드게이트 납품

※ 단, 공동수급으로 이행한 실적은 해당 회사의 실적(당시 출자비율 반영 또는 당시 분담내용)만을 인정하며, 본 사업에 공동수급으로 참여하는 경우 합산금액 및 합산건수는 공동수급 구성원 각각의 실적 및 건수에 출자비율 또는 분담비율을 곱하여 이를 합산한다.

※ 사업수행경험 평가시 다음의 경우 평가에 반영하지 않음

․ (지분을 반영 전)총 사업비 1억 미만 사업실적 제출 또는 증빙이 되지 않는 경우

․ 공동수습 참여 실적의 경우 참여율이 불명확하고 증빙이 되지 않는 경우

․ 하도급 또는 하수급 실적 제출시

㉯ 평가방법

㉠ 실적규모 : 절대평가제

- 당해사업 발주규모(추정가격)과 평가대상 입찰참가자의 유사사업 단일실적 중 최대실적의 금액(부가가치세 제외)과의 비율에 따라 해당되는 점수 부여

․ ‘규모비율’ = (평가대상 입찰참가자의 유사사업 단일실적(최대실적) / 당해사업 추정가격) × 100

규모비율	100% 이상	80% 이상 ~ 100% 미만	60% 이상 ~ 80% 미만	40% 이상 ~ 60% 미만	40% 미만	하 (자료미제출시)
점수비중(%)	100	90	80	70	60	0
환산점수	3	2.7	2.4	2.1	1.8	0

㉡ 실적건수 : 상대평가제

- 입찰 업체수를 고려하여 등급별로 배분된 업체 수만큼 해당 등급 부여하고, 각 등급에 해당되는 점수로 환산

등급	수	우	미	양	가	하 (자료미제출시)
점수(%)	100	90	80	70	60	0
업체할당(%)	10	20	40	20	10

[총 입찰 업체수에 따른 등급별 업체 배분표]

업체수	등 급					업체수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)			12	1	3	5	2	1
4	1	1	1	1		13	1	3	5	3	1
5	1	1	2	1		14	1	3	6	3	1
6	1	1	2	1	1	15	2	3	6	3	1
7	1	1	3	1	1	16	2	3	6	3	2
8	1	2	3	1	1	17	2	3	7	3	2
9	1	2	3	2	1	18	2	4	7	3	2
10	1	2	4	2	1	19	2	4	7	4	2
11	1	2	5	2	1	20	2	4	8	4	2

※ 단, 동점업체 발생 시 동점업체에게 할당된 등급 중 상위 등급으로 동일하게 부여

C. 경영상태

㉮ 평가기준

․ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평 점(점)
AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A-	- A1 A2+ A20 A2-	AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A-	6.00
BBB+	A3+	BBB+	5.80
BBB0	A30	BBB0	5.60
BBB-	A3-	BBB-	5.40
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	5.20
BB-	B0	BB-	5.00
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.80
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	4.00

주) 1. 평가대상 업체의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저 등급으로 평가한다.

2. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

3. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 경영상태 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

D. 신인도

㉮ 평가기준

- 평가방법 : 각 항목 당 배점 한도 내에서 절대평가 실시

심 사 항 목	평점(점)
가. 기술(품질)인증보유 (1) 신제품(NEP), 신기술(NET), 특허(국내특허), GS(국산우수SW)인증, 성능인증(EPC) 등	1
나. 혁신형 중소기업 (1) 중소기업청장(또는 위임받은 자)에 의해 혁신형(벤처, inno-biz, 경영혁신형) 중소기업으로 지정 받은 자	1
다. 계약이행과정의 성실성 (1)납품 지연 입찰공고일 기준 최근 1년(12개월) 이내에 서울시와의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 사례가 있는 경우 지체일수에 따라 감점 부여 - 지체일수 15일 미만 - 지체일수 15일 이상 30일 미만 - 지체일수 30일 이상 45일 미만 - 지체일수 45일 이상 (2)하도급 대금지급내역 사후제출 미이행 입찰 공고일 기준 최근 1년 이내 서울시와의 정보화사업 계약이행과정에서 하도급 대금지급내역 사후제출 의무 미이행 사례가 있는 경우 감점 부여	(-1.3)	감점 (-0.2) (-0.4) (-0.6) (-0.8) (-0.5)

- 평가기준

주) 1. ‘기술(품질)인증 보유 항목’에 대한 인정 범위는 본 사업과 유관한 분야 에 한하고 2개 이상 보유시 그중 한 가지만 평가하며, 각 인증(마크)의 유효기간(또는 효력 연장기간)내에 한하여 평가한다. (단, 유효기간이 정해지지 아니한 경우는 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내에 지정된 것에 한하여 평가)

2. ‘혁신형 중소기업’ 평가는 중소기업청장(위임한 경우 포함)이 확인한 자료를 제출하여야 하며, 유효기간(또는 효력 연장기간) 내에 한하여 평가 한다. (단, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내에 지정된 것에 한하여 평가).

3. ‘납품지연’ 평가는 여러 건의 지체상금이 부과된 경우 각각의 지체일수를 합산한 기간을 지체일수로 한다.

4. ‘하도급 대금지급내역 사후제출 의무 미이행’ 항목은 최근 1년 이내(2015.1월 이후 준공사업)에 서울시와의 정보화사업 계약이행과정에서 하도급 승인을 받은 사업 중 하도급 사업대가 지급내역의 사후제출(수령자, 지급액, 지급일 등)의무 미이행 이력이 있는 업체에게 감점 적용한다.

5. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 신인도 항목별 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

6. 감점은 정량적 평가의 배점한도 내에서 적용한다.

E. 가산점

구 분	항 목		배점한도	평 점
약자 및 우수기업	A	1. 중증장애인생산품 생산시설 (보건복지부 지정)	2	2
	B	1. 사회적 기업(고용노동부 지정) 2. 예비 사회적 기업(지방자치단체 지정) 3. 사회적협동조합(정부부처 지정) 4. 자활기업(지방자치단체 지정)	1.8	1.8 0.9 1.8 0.9
	C	1. 장애인기업 2. 장애인고용 우수기업 가. 장애인고용률이 3%이상인 기업 나. 장애인고용률이 1.5%이상인 기업	1.2	1.2 1.2 0.6
	D	1. 여성기업 2. 여성고용 우수기업(여성고용률이 30% 이상인 기업) 3. 남녀고용평등 우수기업(고용노동부 지정)	1	1 1 1
	E	1. 최근 3개월간 평균 5%이상 신규채용 2. 최근 3개월간 평균 2.5%이상 신규채용	0.6	0.6 0.3
	F	1. 모범납세자 2. 노사문화 우수기업(고용노동부 선정) 3. 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정) 4. 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정) 5. 소비자 중심경영 인증(공정거래위원회 지정) 6. 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	1	0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
중소기업	G	1. 소기업 또는 소상공인 2. 중기업	1.5	1.5 1
	H	1. 서울소재 소기업 또는 소상공인 2. 서울소재 중기업	1.5	1.5 1
일자리창출	I	1. 당해사업 투입 신규인력 채용 (월 급여 100만원 이상 신규직원 1명당 0.2점, 최고 2점)	2	2
고용안정	J	1. 당해사업 투입 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용 (1명당 0.4점, 최고 10인이상 4점)	4	4
근로 및 하도급법 준수정도	K	1.임금체불 업체 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 행정처분을 받은 사실이 있는 업체 -임금체불, 원․하도급자의 공사대금․장비(물품)대금 미지급 등 건당 -1점, 최고 –5점 감점 2. 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업(공정거래위원회) 3. 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업(공정거래위원회)	-6	-5 (각 –1) -0.5 -0.5

주) 1. 가산점은 정량적 지표 배점한도(20점)를 넘지 않는 범위 내에서 부여한다.

2. 일자리창출의 신규채용 인력, 고용안정의 장애인 신규 채용인력은 참여율(투입률)을 반영하여 가산점 계산하며, 제안서의 사업수행 인력에서는 제외한다.

※ 제안서 제출시 확약서 제출하며, 차후 채용관련서류 및 인력 투입관련 증명서류 제출

3. 중소기업 가산점(G, H)은 중소기업만 입찰에 참여할 수 있는 사업에는 적용하지 않는다.

4. 공동수급으로 참여한 경우 구성원별 가산점 계산 후 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

□ 가산점 평가방법

①  평가항목별 평가는 아래 각 항목을 제외하고 중복하여 평가할 수 있다.

가. “D”의 여성기업 및 여성고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. “C”의 장애인기업 및 장애인고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

다. 동일인물이 “여성고용 우수기업(“D”의 2)”, “장애인고용 우수기업(“C”의 2)”,“신규채용 우수기업(“E”)”이 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

②  여성고용 우수기업(“D”의2) 및 장애인고용 우수기업(“C의2”) 평가는 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실 또는 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류(「고용보험법」에 의한 고용보험, 「국민건강보험법」에 의한 국민건강보험, 「국민연금법」에 의한 국민연금, 「산업재해보상보험법」에 의한 산업재해보상보험에 가입한 증거서류 중 1개)에서 나오는 “여성종업원수 및 여성종업원비율”(여성이 대표인 경우에는 대표를 포함하여 산정)  또는 “장애인종업원수 및 장애인종업원비율”(장애인이 대표인 경우는 대포를 포함하여 산정) 자료로서 최근 3개월 평균자료를 제출받아서 한다(입찰공고일 전월 기준 최근 3개월 평균하여 요건을 충족하는 경우 평가).

③ “E"의 신규채용 우수기업의 평가는 다음 각 목에 따른다.

가. 전년도 및 최근 3개월(입찰공고일 전월 기준)의 고용사실을 증명할 수 있는 서류(고용보험, 국    민건강 보험, 국민연금, 산업재해보상보험 관련 증거서류 중 하나 택일)에 따라 평가한다.

나. 해당기간 신규고용인원을 누적하여 계산한다(예 : 8월 입찰공고건의 경우, 5월, 6월, 7월의 각    월별 누적신규고용인원을 산술평균하여 계산. 단, 3월 이전 입찰공고건의 경우에는 전년도 포함    최근 3개월 누적평균 자료로 계산).

다. 각 월별 신규고용인원은 월별 ‘신규채용자 수’― ‘퇴직자 수’로 계산한다.

(적용례) 8월 입찰공고건의 경우,

구 분	5월	6월	7월
월별 신규고용인원	5	4	5
월별 누적신규고용인원	5	9	14

* 최근 3개월 평균 신규고용인원 = {(5+9+14)/3= 9.333333 = 10명

④ “D"의 여성고용 우수기업, ”C"의 장애인고용 우수기업, “E"의 신규채용 우수기업 평가에서 고용인원 계산결과의 소수점 처리는 소수점 첫째자리에서 올림을 하고, 전년도 또는 최근 3개월 평균자료가 없는 경우는 평가에서 제외한다.

⑤ 중소기업(“G” 또는 “H”), 여성기업(“D-1”), 장애인기업(“C-1”) 등은 “중소기업제품 공공구매종합정보망”에 등재된 자료로 평가할 수 있다.

⑥ 지역업체(“H”) 가산은 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체에 한하며, 법인은 법인등기등본상 본점 소재지, 개인 사업자는 사업자 등록증상 사업장 소재지가 서울시에 소재해야 한다.(다만, 지역제한입찰의 경우에는 지역업체 가산 적용을 제외하되, 인접시도까지 포함되는 경우 지역업체 가산적용한다)

⑦ 중소기업 가산은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등에 따라 중소기업만 참여할 수 있는 입찰의 경우에는 적용하지 아니한다.

⑧ “D"의 남녀고용평등 우수기업(“D-3”), "F"의 모범납세자, 노사문화 우수기업, 가족친화경영 우수기업, 하도급거래 모범업체, 소비자 중심경영 인증, 공정거래 자율준수 인증은 주무부(처, 청) 등의 장(위임한 경우 포함)이 확인해 준 유효기간 내의 자료를 제출한 경우에 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 최근 2년 이내로 지정된 것에 한하여 평가한다.

⑨  "I"와 “J"의 신규인력 채용, 장애인신규채용은 제안서 제출시 확약서([별지서식 18]) 징구하여 평가한 후, 계약체결 전 신규채용 계약서를 제출하도록 해야 한다.

가. 동일인물이 “I"의 일자리창출, ”J"의 고용안정 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. 대표자 변경 등으로 인해 발생한 고용승계는 신규인력 채용으로 인정하지 아니한다.

※ 신규인력채용, 장애인신규채용은 해당 사업에 투입되는 인력인 경우에만 평가 적용

⑩ “J”의 비정규직 정규직화는 제안서 제출 시 확약서([별지서식 18]), 비정규직 증명서류(근로계약서, 본인확인서) 제출하여 평가한 후, 계약체결 전 정규직 증명서류(근로계약서)를 제출하도록 해야 한다.

※ 비정규직 정규직화는 해당 사업에 투입되는 인력인 경우에만 평가 적용

⑪ “K"는 최근 3년 이내에 고용노동부, 서울시 하도급부조리신고센터, 공정거래위원회 등을 통해 행정처분된 내역을 확인한다.

[붙임 6]

정성적 지표의 평가기준

□ 평가항목 및 배점

평가부문	평가항목	평가요소	배점기준
전략 및 방법론	대상사업 이해도	- 대상업무 목표 및 내용의 이해도 - 업무분석 체계의 명확성 - 제안요청서와의 부합성 - 목표시스템 구성의 적정성	2	6
	사업추진 전략	- 추진전략의 창의성 - 추진전략의 타당성	2
	적용기술 및 방법론	- 적용기술의 확장성 - 적용기술의 실현가능성 표준 프레임워크 적용 방안	2
기술 및 기능	사업추진 내용	- 사업 추진내용의 적정성 ※ 제안요구 사항 각각에 대한 제안내용 및 방법의 적정성		18
		※ 시스템 장비구성 제안	8
		※ 기능개발 제안	8
		※ 테스트, 보안 등 기타 제안	2
성능 및 품질	성능확보방안	- 성능확보 방안의 적정성 - 요구 성능의 충족성	5	20
	품질보증 방안	- 품질보증계획의 적정성(단계별 품질요구 사항의 점검 및 검토 방안의 구체성) - 사업자 품질보증 능력 (품질보증 관련 공인인증 보유 여부)	5
	디자인 및 재질	디자인의 적정성, 게이트 재질의 안정성	10
프로젝트 관리	관리방법론	- 위험관리, 자원관리, 진도관리, 보안관리 형상관리, 문서관리 방안의 적정성	2	6
	수행조직 및 참여인력	- 조직체계의 적정성 - 참여인력의 적정성	2
	일정계획	- 세부활동 도출 및 기간의 타당성 - 세부활동 배열의 합리성 - 중간목표 정의의 타당성	2
프로젝트 지원	교육훈련 및 기술이전	- 교육훈련 방법, 내용, 일정의 적정성 - 인수인계 대상 및 계획의 적정성	2	17
	하자보수 및 비상대책 방안	- 지원 일정, 지원 체계, 일정의 적정성 시스템의 안정적 운영을 위해 제시하는 장애대책 방안의 적정성	4
	기밀보안	- 기밀보안 체계의 적정성 - 기밀보안 대책의 확신성	2
	유지보수지원체계	- 물품공급, 장애시 신속성 및 대책	9
추가제안	추가제안	본 사업과 연관 있는 사항 추가 제안	3	3

□ 정성적평가 평가방법 적용기준(상대평가방식)

정성적 평가점는 평가항목별 등급을 5등급(수, 우, 미, 양, 가)로 구분하여 평가하며, 항목별 배점에 따라 등급점수를 부여하고, 항목평가를 위한 자료 미제출시는 ‘하’ 등급으로 처리 한다

등급	수	우	미	양	가	하 (자료미제출시)
점수(%)	100	80	60	40	20	0

※ 정성적평가의 평가의 제안서평가위원이 자율적으로 평가하되, 평가의 변별력 확보를 위하여 불가피한 경우를 제외하고는 업체 간 동점부여를 지양(상대평가방식)한다.

[붙임 7]

입찰가격 평가산식

○ 가격평가점수 산출방법

① 입찰가격을 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80이상으로 입찰한 업체의 경우

․ 평점 = 10 × (최저입찰가격 / 평가대상자의 입찰가격)

② 입찰가격을 예정가격의 100분의 80미만으로 입찰한 업체 경우

․ 평점 = 10 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격)

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {예정가격의`80%`상당가격-평가대상자`입찰가격} over {예정가격의`80%`상당가격-예정가격의`60%`상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

※ 1.최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 한다.

2.입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만일 경우에는 100분의 80으로 계산한다.

3.가격 평가점수 결과 소수점 이하 숫자가 있을 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 소수점 넷째자리까지 표시한다.

[붙임 8]

용역업체 정보보안 준수사항

서울시 정보화사업을 수행하는 용역업체는 보안사고 예방을 위해 국가정보보안기본지침 제63조, 서울시정보통신보안업무처리규칙 제51조에 따라 용역사업 단계별(계약, 수행, 종료) 보안사항을 준수해야 한다.

※ 용역업체에 의한 보안사고 발생 시 ‘사업자 보안위규 처리기준’에 따라 행정조치 됨을 유념하시고 본 준수사항을 숙지하시기 바랍니다.

1. 계약단계

가. 용역업체가 하도급 계약을 체결할 경우 원래 사업계약 수준의 비밀유지  조항을 포함해야 한다.

나. 용역사업에 투입되는 자료·장비 등에 대해 대외보안이 필요할 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행계약서와 별도로 아래의 사항이 명시된 비밀유지계약서를 작성하여 발주기관에 제출해야 한다.

- 비밀정보의 범위

- 보안 준수사항

- 위반시 손해배상 책임

- 지적재산권 문제

- 자료의 반환

2. 수행단계

2-1. 참여인원에 대한 보안관리

가. 용역사업 참여인원에 대한 신원확인을 실시하고 발주기관에 증빙자료를  제출해야 한다.

나. 용역업체 대표자 및 참여인원 각자의 친필 서명이 들어 있는 보안서약서를 발주기관에 제출해야 한다.

다. 용역사업 참여직원은 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함)사항 발생 시 발주기관에 즉시 보고하고 승인을 받아야 한다.

2-2. 사무실·장비에 대한 보안관리

가. 용역사업 수행을 위해 외부 사무실을 사용할 경우 CCTV, 시건장치 등  비인가자 출입통제 대책을 마련해야 한다.

나. PC, 휴대용 저장매체 등을 반입 및 반출 시 발주기관의 승인을 받아야  하며, 해당 장비에 유료 최신 백신을 설치하고 악성코드를 주기적으로  검사해야 한다.

다. 발주기관은 용역업체에게 제공한 사무실에 대해 수시로 보안점검을 할 수 있다.

라. 용역사업 관련 자료를 보관한 PC로 인터넷에 접속하면 안 된다.

마. USB메모리 등 휴대용 저장매체는 사용을 금지하되 불가피한 경우 발주기관의 승인 후 사용할 수 있다.

바. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체에 정보시스템 접속정보(ID,비밀번호)를 저장하면 안 된다.

사. 용역업체 직원의 개인 휴대폰은 발주기관의 통제 하에 카메라 및 충전포트에  보안스티커를 부착해야 한다.

※ 어플리케이션, 단말기(PC, 스마트기기 등), 유무선 통신장비, 서버, DBMS,   출입통제구역, 누설금지대상정보에 접근하는 작업자에 한하며, 보안스티커를 부착하지 못하는 경우 담당자가 휴대폰을 회수하여 보관한다.

아. 용역업체가 사용하는 노트북PC, 휴대용 저장매체 등은 퇴근·휴가 시와 같이 일정기간 사용하지 않을 경우 분실 방지를 위해 시건장치가 있는 보관함에 보관해야 한다.

2-3. 내·외부망 접근시 보안관리

가. 용역업체 사용 통신망은 서울시 행정통신망(내부망)과 분리하여 구성해야 한다. 단, 업무상 필요한 경우 발주기관의 승인 후 해당 서버에만 제한적으로 접근해야 한다.

나. 용역사업 참여인원의 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록해야 한다.

다. 계정별 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 내부문서 접근은 금지한다.

라. 용역업체 직원이 ‘root’ 계정 등 정보시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 단독 접근은 불허하며, 필요할 경우 발주기관의 승인을 받아야 한다.

마. 계정별 부여된 접근권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을  폐기해야 한다.

바. 발주기관은 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업  이력을 확인할 수 있다.

사. 용역업체 PM은 사업 참여인원이 접근한 서버 및 네트워크 장비에 대한  로깅 기록을 매일 확인하고 이상 유무를 발주기관에 보고해야 한다.

아. 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행을 위해 부득이한 경우 필요한 보안조치를 시행하고 발주기관의 승인 후 사용해야 한다.

자. 발주기관 내부에서 비인가 무선 AP(무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등) 설정을 금지하며, 시스템 개발PC와 연결은 금지한다.

차. 발주기관에 휴대용 무선 모뎀(WiFi, LTE 등)을 반입하면 안 된다.

카. 발주기관에 노트북PC 반입 시 무선통신기능 사용불가 조치(Driver 삭제 등)를 시행해야 한다.

타. 발주기관 외부에서 내부에 있는 개발 PC 및 정보시스템에 원격 접속은 금지한다.

2-4. 자료에 대한 보안관리

가. 사업 수행을 위해 발주기관에서 용역업체에게 제공하는 내부 자료는 자료관리 대장을 작성하고, 인계자․인수자가 자필로 서명해야 한다.

나. 용역사업 관련 자료는 웹하드,P2P사이트,웹오피스,클라우드 서비스 등 인터넷 자료공유사이트 및 사업 참여인원의 개인 메일함에 저장하면 안 된다.

다. 발주기관이 제공한 사무실에서 용역사업을 수행할 경우, 매일 퇴근 시 관련 자료를 발주기관에 반납해야 한다. 단, 비밀문서를 제외한 일반문서는 발주기관이 제공한 사무실에 시건장치가 된 보관함에 보관할 수 있다.

라. 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 발주기관의 파일서버에 저장하거나, 발주기관에서 지정한 PC에 저장·관리해야 한다.(파일 저장 PC는 인터넷 연결 금지)

마. 사업 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 발주기관이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지한다.

3. 종료단계

가. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체 등에 저장된 사업 관련 자료는 검증된 삭제 S/W로 완전 삭제해야 하며, 발주기관의 승인 후 반출해야 한다.

※ 완전 삭제 S/W 목록은 http://service1.nis.go.kr 참고

나. 용역사업 관련자료 삭제 조치 후 용역업체에 복사본 등 용역사업과 관련된 제반자료를 보유하고 있지 않다는 용역업체 대표 명의의 보안확약서를 자필 서명하여 발주기관에 제출해

[붙임 9]

외주 용역사업 보안특약 조항

① 사업자는 서울특별시의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표 1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표 2]의 보안 위약금을 서울특별시에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 서울특별시는『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

[별표 1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표 2]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비 중	부정당업자 등록	계약금액의 5% 이하	계약금액의 3% 이하	계약금액의 1% 이하

* 위규 수준은 [별표1] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 3]

누출금지 대상정보

1. 기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 『개인정보보호법』제2조제1호의 개인정보

10. 『보안업무규정』제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[붙임 10]

용역사업 착수시

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 (용역사업명)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (용역사업명) 수행중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 본인 회사의 직원이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 경우에도 총괄 책임을 지겠으며, 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

5. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

6. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 착수시

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 (용역사업명)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (용역사업명) 수행중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 (용역사업명)을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 (용역사업명) 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을     인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서,도면,     동영상,사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 (용역사업명)을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (용역사업명) 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 :

(담당 공무원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

[별지서식 1]

제안사 일반현황

□ 일반사항

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월
주요연혁(요약)

□ 조직도

□ 인원현황

구 분	계	전 문 분 야					관리분야
		H/W분야	S/W분야	DB구축분야	컨설팅분야	기타분야
계
특급기술자
고급기술자
중급기술자
초급기술자
기 능 사
＊제안사 일반현황의 기술자의 구분은 입찰 공고일 기준 적용되는 “SW기술자 노임단가 “(한국소프트웨어산업협회 공표) 에 의한 SW기술자 등급분류 기준표 에 의함 ＊평가위원 평가용 제안서는 “회사명”, “대표자” 등 회사를 식별할 수 있는 사항은 OOO처리한다.(단, 제안서 원본은 모두 표시)

주) 공동수급 방식인 경우 주사업자 및 부 사업자 별 별지로 작성하되, 조직도 중 본 사업에 참여하는 부서를 표시

[별지서식 2]

자본금 및 매출액(최근3년)

회사명 :                                                 (단위 : 천원)

구 분			20 년		20 년	20 년		합 계		평 균
자본금
매출액	컨설팅 부문	BPR/ISP
		전략컨설팅
		보안컨설팅
		감리
		기타
	상용 S/W 부문
	H/W 부문
	시스템 개발 부문
	○○ 부문
	○○ 부문
	합계
자기자본비율 (자기자본/총자산)
유 동 비 율 (유동자산/유동부채)
신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급							등급평가일
기업어음에 대한 신용평가등급							등급유효기간
기업신용평가등급

주)1. 결산 공고되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서 등 회계자료를 첨부한다.

2. 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된 ‘신용평가 등급 확인서’를 제출한다.

[별지서식 3]

유사사업실적(최근3년)

가. 주요 사업 내용

회사명 :

연번	①계약명	사 업 기 간	② 계약금액 (단위:천원)	발주처	③수행내용(간략)	④타사와 공동 프로젝트 수행여부	⑤ 증빙 번호	비고
계

주)1. 계약명 : 연도순으로 기재하며 본 업무와 유관(유사)한 것만 해당 건수 별로 정확하게 기재한다.

※ 유사실적 : 공고일 기준 최근 3년 이내 준공한 스피드게이트 분야 사업

※ 현재 수행중인 사업은 비고란에 “수행중” 표기(※ 정량적 평가에는 반영되지 않음)

2. 계약금액 : 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재한다.

3. 구체적 업무수행 내용 : 수행 작업 내용을 단계 별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행계획 수립 등)로 작성한다.

4. 타사와 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재한다.

5. 실적의 증명은 [별지서식 4]『사업실적증명원』(사본의 경우 원본대조필)를 제출하며, 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 ‘증빙번호’ 란에 해당증명첨부서류의 페이지를 기재

※ 증거서류 제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 기재된 내용의 확인 결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리한다.

나. 계약건별 내역

계약명
발 주 처
계약기간	착수일 ~ 완료일	201 . . ~ 201 . .	계약금액 (천원)
사업책임 기 술 자
1. 사업목적
2. 사업의 중요사항 및 수행한 업무내용

[별지서식 4]

사 업 실 적 증 명 원
1. 사 업 명
2. 총 계약 금액	(참여지분율 : %)
3. 계 약 일 자
4. 착 수 일 자
5. 완 료 일 자
6. 사 업 내 용
※ 공동수급 시 참여지분율 표시
귀사에서 발주한 사업에 대하여 폐사에서 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 201 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :
위 사실을 증명합니다. 201 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :

[별지서식 5]

사업수행 조직도

사업총괄책임자(PM)

직위, 성명, 기술등급

부문			부문			부문			부문
소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급			소속, 직위 성명, 기술등급

주)1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고 될 수 있도록 직위별로 기재한다.

3. 용역 수행조직 및 인원현황에는 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한

인력을 기재한다.

4. 용역수행조직 및 인원 현황의 기술등급은 [붙임 8]『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매 ․ 설치 사업 참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위』에 의한 등급을 기재한다.

5. 평가위원 평가용 제안서는 “회사명” 등 회사를 식별할 수 있는 사항은 〇〇〇으로 표기한다.

(단, 제안서 원본은 모두 표시)

[별지서식 6]

참 여 인 력 현 황

분야별	성명	연령 (세)	기준 등급	본사업 참여직위	최종 학력	자격증	해당분야 근무경력	담당 업무	참여율	제안사 여부
사업 책임자
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문

주)1. 참여기술자의 연령은 입찰공고일 기준으로 (만)으로 기재한다.

2. 기술등급은 [붙임 8]『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매 ․ 설치 사업 참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위』 기준에 의한 등급을 기재한다.

3. 최종학력, 자격증, 해당분야 근무경력에 항목은 ‘기술등급’ 인정을 위해 해당되는 사항을 기재한다.

4. 제안사여부 항목은 “제안사(공동수급체)” 소속의 인력여부를 ‘〇’ 표시한다.

※「파견근로자 보호 등에 관한 법률」등에 의한 적법한 ‘파견근로자’는 ‘〇(파견)’으로 표기

※ 제안사 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 계약 후 하도급 계약 승인을 얻지 못할 경우 제안사 소속의 동일수준 이상의 자사인력으로 대체하여야 함.

[별지서식 7]

참여인력 이력사항

성 명			소 속	( )		직 책			연 령	만 세
최 종 학 력 (졸업년월)	고등학교 전공( )					해당분야근무경력
	대학교 전공( )					기술자 기술등급
	대학원 전공( )					자 격 증 (취득년월)			( )
본사업참여임무					사업참여기간				참여율	%

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년.월 ～ 년.월)	담당업무	발주처	비 고 (관련기술)

주)1. 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한 인력을 기재한다.

2. 최종학력, 자격증, 해당분야 근무경력에 항목은 ‘기술등급’ 인정을 위해 해당되는 사항을 기재한다.

3. 근무경력은 입찰공고일 현재를 기준으로 연월까지 기재한다.

4. 자격증 사본 등 정량적 평가를 위한 ‘기술등급’을 확인할 수 있는 증거서류를 첨부한다.

5. 자사 인력 증명(고용사실 증명)은「국민건강보험법」에 따른 국민건강의료보험, 「국민연금법」에 따른 국민연금 관련 증거서류를 제출한다.

6. ‘기술등급’ 기준은 [붙임 8]『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매 ․ 설치 사업 참여인력 정량적 평가 기술등급 및 인정범위』기준에 근거하여 분류, 증명한다.

7. 평가위원 평가용 제안서에는 ‘소속’을 ‘제안사’, ‘하도급사A’, ‘하도급사B’등으로 표기한다.

-「파견근로자 보호 등에 관한 법률」등에 의한 적법한 ‘파견근로자’는 ‘제안사’ 인력으로 간주하며, 파견 인력임을 구분하기 위해 ()안에 파견으로 추가 기재

- 제안사 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 계약 후 하도급 계약 승인을 얻지 못할 경우 제안사 소속의 동일수준 이상의 자사인력으로 대체하여야 함.

※ 단, 제안서 원본은 소속 회사명을 모두 명시하며, 파견근로자의 경우 ()안에 원 소속사명을 표기

8. 기재된 내용의 확인 결과가 허위 사실로 밝혀질 때는 0점 처리한다.

[별지서식 8]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.							처리시간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호				입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납부면제 및 지급 확 약		본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀부(처, 청)에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사용인감		본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고 합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 시의 일반(제한․지명) 경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매․기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 신 청 인 : □ 서울특별시(분임)재무관 귀하

[별지서식 9]

가 격 제 안 서

사  업  명

입찰공고번호

사 업 기 간

제 안 금 액

일금                  원(VAT 포함) (￦                    )

구 분	금 액	비 고
부가가치세
합 계

상기 금액으로 가격입찰서를 제출합니다.

붙임 : 금액산출근거표

20  년     월     일

상 호  또는  명 칭 :

주              소 :                           전화번호 :

대 표 자     성 명 :                           (인)

주민(법인)등록번호 :

서울특별시장 귀하

[별지서식 10]

가 격 입 찰 서
입찰내용		공 고 번 호	제 호		입찰일자		20 년 월 일
		건 명
		금 액
		준공(납품)년월일
입찰자	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
본인은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 규칙」에 의한 기술용역 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 기술용역 계약 일반조건∙계약특수조건∙설계서 및 현장설명 사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품, 용역수행) 기한 내에 용역성과품을 납품 할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 가격제안서 1부. (별지 서식 9호 참조) 입찰자 : □ 20 년 월 일 서울특별시(분임)재무관 귀하

[별지서식 11]

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원] ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2.○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

②공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③공동수급체 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 당해 계약과 관련한 권리의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 [거래계좌] 예규「지방자치단체 공동계약 운영요령」Ⅲ-7 대가의 지급 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

②제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자 지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 [손익의 배분] 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 [권리, 의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 [중도탈퇴에 대한 조치] ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조제1항제6호의 규정에 의하여 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 [운영위원회] ①공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

[별지서식 12]

합 의 각 서

입찰공고번호	공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

20  년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상          호

성          명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

[별지서식 13]

업체제출용

청렴계약이행서약서(표준안)

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 서울특별시에서 시행하는【                     】용역 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시와 자치구 및 공사 등(이하 서울특별시 등으로 함)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 서울특별시 등에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 2억 원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

2) 1억 원 이상 2억 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

3) 1천만 원 이상 1억 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6개월

4) 1천만 원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 3개월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무 수행하는 자를 포함)과 대리인이 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물을 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

7. 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 하겠습니다.

1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

3) 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 발주처에 주는 직․간접적인 손해

4) 기타 발주처가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

5) 위 내용에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상토록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 서울특별시의 조치와 관련하여 당사가 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .    .    .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (서명 또는 날인))

[별지서식 14]

평가용 제안서 표지 제작기준

					상단에서 3㎝
좌측끝단에서 3.5㎝				3㎝
	3㎝	3㎝
								간격 2㎝
〇〇〇〇용역
- 기 술 제 안 서 -
※ 글씨 크기 ▪ 〇〇〇〇 용역 : 신명조 20크기(중앙) ▪ 기술제안서 : 신명조 22크기(중앙)

※ 옆면 표지는 ‘〇〇〇〇 용역 제안서’(글자체 : 견고딕, 글자크기 : 24)만을 세로로 백색 무광택지에 인쇄한다. 발주기관 로고 등을 삽입하여서는 안 됨.

제안요약서 표지 제작기준

						상단에서 3㎝
좌측끝단에서 3.5㎝				3㎝
	3㎝	3㎝
								간격 2㎝
〇〇〇〇 용역
- 제안 요약서 -
※ 〇〇〇〇 용역 : 신명조 30크기(중앙) - 기술제안 요약서 : 신명조 22크기(중앙)

[별지서식 15]

(장애인 신규직원 / 신규직원 / 비정규직 정규직화)

채용 확약서

○ 공고번호 :

○ 사 업 명 :

○ 사업기간 :

○ 채용내역

채용인원	월 급여	채용기간	투입률(%)
2명	100만원	2015. 8. 1 ~ 2011.12.31
1명	120만원	2015. 8. 1 ~ 2011.10.31
	< 예 시 >

당사는 (                )사업 낙찰시 서울시 일자리 정책에 참여하기 위하여 위와 같이 (장애인 신규직원 / 신규직원 / 비정규직 정규직화 직원)을 채용하여 본 사업에 투입할 것이며, 상기내용을 이행하지 않을 경우 계약해지, 부정당업자 제재 등에 대해 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

20  년     월     일

업 체 명 :

사업자 등록번호 :

주    소 :

연 락 처 :

대표이사 :             (인)  * 반드시 법인인감 날인

서 울 특 별 시 장 귀하

주) 1. ‘투입률’은 전체 사업기간대비 단순 채용기간이 아닌  본 사업 투입기간을 고려하여 계산(월평균 근무일, 일평균 근무시간 감안 작성)

[별지서식 16]

제안요구사항 수용 조견표

연번	요구사항 번호	요구사항 명 (또는 요구사항 내용 요약)	수용 여부	제안서 내용	제안서 페이지

주)1. ‘요구사항번호’는 제안요청서의 요구사항 번호를 기재하며, 제안요청서의 페이지를 기재하지 않는 대신 요구사항 목록의 순서를 고려하여 작성(필요한 경우에는 제안요청서상의 페이지 표기도 가능하며, 페이지를 표기할 경우 요구사항번호 란에 괄호()를 이용하여 작성)

2. ‘요구사항명’ 은 제안요청서의 요구사항 명을 기재(필요시 요구사항 내용을 요약)

3. 내용은 간결하게 핵심만 기재하고 수용여부는 ○ 또는 X 로 표기

[별지서식 17]

추가제안사항 요약

순번	건 명 (제안개요)	추진 기간	제공조건	추진방법	비고

주)1. 필요 시 추가 제안사항 세부내역 별첨 가능.

[별지서식 18]

정량적평가지표 자가진단표

회 사 명		○○회사
평가항목	평가요소	분 야	성 명		기술자격 또는 학력	실무 경력(년)	기술 등급	참여율
A. 참여인력 기술상태	기술자 투입현황	○○부문						%
		○○부문						%
		○○부문						%
		○○부문						%
		○○부문						%
B. 수행경험	유사사업 금액 및 건수	20 년 (단위 : 천원, 건)	20 년 (단위 : 천원, 건)		20 년 (단위 : 천원, 건)	합 계 (단위 : 천원, 건)	단일실적 기준 최대실적금액 (단위 : 천원)
		금액	금액		금액	금액	원
		건수	건수		건수	건수
C. 경영상태	기업신용 평가등급	회사채에 대한 신용평가등급			기업어음에 대한 신용평가등급		기업신용평가 등급
D. 신인도	기업 신인도	가. 기술(품질) 인증보유
		나. 혁신형 중소기업
		다.계약이행과정의 성실성		납품지연
				하도급 대금지급 사후제출 미이행
E. 가산점	약자 및 우수기업	중증장애인생산품 생산시설
		①사회적 기업 ②예비사회적 기업 ③사회적 협동조합 ④자활기업					해당번호 기재
		①장애인기업, ②장애인고용률 3%이상 기업, ③ 장애인고용율 1.5%이상 기업					해당번호 기재
		①여성기업 ②여성고용률 30%이상 기업 ③남녀고용평등 우수기업					해당번호 기재
		최근 3개월간 평균 ①5% 이상 신규채용기업 ②2.5% 이상 신규채용기업					해당번호 기재
		①모범납세자 ②노사문화 우수기업 ③가족친화경영 우수기업 ④하도급거래 모범업체 ⑤소비자 중심경영 인증 ⑥공정거래 자율준수 인증					해당번호 기재
	일자리 창출	당해 사업관련 신규인력 채용 예정 여부 (당해 사업에 투입되는 인력에 한함)
	고용안정	①비정규직 정규직화(당해 사업에 투입되는 인력에 한함) ②장애인 신규 채용 예정(당해 사업에 투입되는 인력에 한함)					해당번호 기재
	근로 및 하도급법 준수정도	①임금체불 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 사실 확인된 업체 ② 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과기업 ③ 하도급 상습위반자로 통보받은 기업					해당번호 기재

주)1. 경영상태는 신용평가등급을 해당란에 기재한다.

2. 수행경험은 최근 3년간 유사사업 분야 실적 건수, 금액을 해당란에 기재한다.

- 수행경험은 [별지서식3]의 내용 중 평가에 반영할 사항을 기재할 것.

3. 참여인력 기술상태는 기술자 투입현황을 해당란에 기재한다.

- 참여인력 기술상태는 [별지서식6]의 내용 중 평가에 반영할 사항을 기재할 것.

4. 신인도는 기업신인도 관련 해당란에 “○”표시한다.

5. 가산점은 관련 해당란에 “○”표시한다.(단, 해당번호 기재로 명시되어 있는 항목은 번호를 기재하며 중복평가 되는 항목은 중복기재 가능함)

6. 참여율(%)은 총 사업기간 중 해당인력 투입기간을 비율로 계산한다.

7. 계산결과 입력 시 소수점 이하는 다섯째자리에서 반올림한다.

※ 정량평가를 위해 위 표를 작성하고, 반드시 계산을 위한 세부자료 및 증거자료를 제출할 것

[별지서식 19]

근로자 권리보호 이행 서약서

당사는 서울특별시에서 시행하는 『서울시 서소문청사 스피드게이트 구매설치』사업 계약업체로서 근로자(하도급 업체 포함)의 인권보호․고용안정․노동환경 등의 권리보호를 위해 다음사항을 이행할 것을 서약합니다.

1.  당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.

2.  근로자에 대하여 인종 ․ 종교 ․ 신체적 결함 ․ 성별 ․ 출생지 ․ 노동조합 가입여부 등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 차별을 조장하지 않겠습니다.

3. 산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 안전시설, 휴게시설 등을 설치하여  근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하며 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.

4. 근로자에게 노동력 착취적인 언어 ․ 신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고, 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.

5. 근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자    자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하며, 여성근로자의 모성   은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.

6. 당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여「근로기준법」,「산업재해보상보험법」,「국민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

2016.  .   .

서약자 :        회사 대표             (서명 또는 날인)