예산서 P. 00

소방행정타운 건립(예시)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□ 연례반복, ☑ 2015.5 ~ 2022. 12
사업위치	서울특별시 은평구 진관동 은평뉴타운 3-1지구 [지도에서 보기]
총사업비	총 천원/ [국비] [시비] /보조율 [%]
사업내용	교육훈련시스템의 선진화와 분산된 지휘기관의 통합 운영
사업형태	☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속		투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산
□	☑	☑	□	□	□	□	☑
`11.11 조건부(국고보조 확보)					`12.1
경상	투자
□	☑
□ 민간보조사업 형태 및 법령근거
지원형태	법령근거	보조금심의회 의견
사업보조
운영비보조
□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡
□	☑	□	□	□
□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
소방재난본부	소방행정과	이성묵	김두일	김상탁
(연락처)	(연락처)	(연락처)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	(x4,000,000) 5,714,000	(x4,000,000) 5,714,000	(x8,000,000) 11,460,000
시설비	(x3,820,000) 5,534,000	(x3,820,000) 5,534,000	(x6,999,000) 10,459,000
감리비	-	-	(x789,000) 789,000
시설부대비	(x180,000) 180,000	(x180,000) 180,000	(x212,000) 212,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2014년 본예산	2015년 예산(안)	증감사유
시설비
감리비
시설 부대비

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계		(x32,953) 47,076	(x1,453) 4,953	(x15,541) 19,113	(x8,000) 11,460	(x7,959) 11,550
		(x1,266) 1,266	(x1,266) 1,266	-	-	-
		(x2,108) 2,108	(x168) 168	(x876) 876	(x789) 789	(x275) 275
		(x441) 441	(x19) 19	(x210) 210	(x212) 212	-
		(x29,138) 39,761	(x) 0	(x14,455) 18,027	(x6,999) 10,459	(x7,684) 11,275
		(x0) 3,500	(x0) 3,500	-	-	-

3		사업설명

□  사업목적

○  세계 최고수준의 소방교육훈련 시설 및 운영체제 확보

○  다양한 환경 변화에 대응할 전문소방인력 양성과 시민 소방안전교육 강화

○  인력․자원의 통합관리로 행정의 효율성 도모 및  수요자 중심의 새로운 소방서비스 공급

□  사업근거

○  법령상 근거

- 소방기본법 제3조(소방기관의 설치 등)

- 소방공무원법 제15조(교육훈련)

- 재난 및 안전관리 기본법 제3조 제7호(긴급구조기관)

- 지방소방기관 설치에 관한 규정 제2조(설치 등)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 소방행정타운건설 기본계획(시장방침 제282호. 2012.9.12.)

-  소방행정타운 건립사업(1단계) 변경계획(행정2부시장방침 제106호. 2014.3.31)

□  사업내용

○  위    치 : 은평구 진관동 은평뉴타운 3-1지구(물푸레골)

○  규    모 : 소방학교 등 11개동, 7개 훈련시설, 연면적 36,288㎡, 부지 48,950.1㎡

- 1단계(2014 ~ 2018년) : 소방학교 등 7개동, 5개 훈련시설

- 2단계(2018년) : 전문훈련시설 등 3개동,  2개 훈련시설

- 3단계(2019 ~ 2022년) : 소방재난본부 등 1개동

○  사업기간 : 2014. 1. ~ 2018. 6.

○  사업내용

- 소방학교 교육 운영시스템을 종합교육체제로 개편

- 소방정책 및 지휘부 청사를 통합하여 일괄 통합시스템 구축

- 시민의 재난 및 방재능력 향상을 위한 종합안전 교육 공간 조성

○  총사업비 : 223,047,145천원(1단계)

□  2015년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 은평구 진관동 은평뉴타운 3-1지구(물푸레골)

○  사업규모 : 기본 및 실시설계, 부지매입 할부금(1차), 토목공사 등

○  사업내용 : 부지매입 할부금 및 공사 시행에 필요한 기본 설계도서 작성 등

○  소요예산(안) : 19,849,375천원

□  추진경위

○ 2010. 8. 21 : 소방학교 현대화추진 기본계획 수립

○ 2011. 11. 15 : 소방학교 물푸레골 이전방안 보고(시장)

○ 2012.  9. 12 : 서울 소방행정타운 건설 기본 계획 수립

○ 2013.  3. 14 : 1차 서울시 투자심사(1단계 1차)

○ 2013.  7. 11 : 1차 공유재산심의(적정)

○ 2013.  8. 21 : 2차 서울시 투자심사(1단계 2차)

○  2013.  9. 12 : 2차 공유재산심의(적정)

○ 2013. 12. 02 : 공유재산관리계획 의결(원안 가결)

○ 2014.  3. 31 : 서울 소방행정타운 건립사업(1단계) 변경계획 수립(행정2부시장)

○ 2014.  5. 19 : 서울 소방행정타운 건립부지 매매 계약 체결(↔SH공사)

○ 2014.  5. 28 : 서울 소방행정타운 건립사업(1단계) 설계공모 공고

○ 2014.  9. 19 : 서울 소방행정타운 건립공사(1단계) 설계공모 당선작 선정

※ 2016년 중점추진사항(사업추진의 필요성)

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계 : 사업계획 수립 → 현상설계공모 →  설계용역계약 → 디자인심의 등 → 건축협의 → 계약심사 → 준공 → 준공검사 → 정산

- 공사 : 사업계획 수립 → 발주 → 입찰 → 계약 → 시공 → 준공 → 정산

- 부지매입 계약 : 감정평가 → 매매계약 → 매입대금(할부) 지급 → 소유권 → 이전등기

○  계약체결 : 일반경쟁

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 소방환경 변화에 부합한 능동적 현장대응 역량 확보

- 재난관리 전단계의 원스톱 소방행정타운 조성

- 지역사회와 시민 친화적인 안전문화공간 구성

- 글로벌 안전도시 서울의 위상에 부합한 시민교육 인프라 구축

○  추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		19,849,375
기본 및 실시설계	2015. 1. ~ 10.	888,051	기본설계, 실시설계
감리비	2015. 4. ~ 12.	580,000	건설사업관리
부지할부금 납부	2015. 5.	17,159,345	부지 매입비 정산(1차)
공사착공	2015. 12.	1,200,000	토목 등 기반시설공사 착공
시설부대비	2015. 1. ~ 12.	21,979	사업수행 경비 수시발생

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2012년도	‧ 9월 서울 소방행정타운 건설 기본 계획 수립
2013년도	‧ 3월 서울시 투자심사 ‧ 7월 공유재산심의 및 주민설명회 개최
2014년도	‧ 2월 서울 소방행정타운 건립추진을 위한 자문위원(2차) 회의 개최 ‧ 3월 서울 소방행정타운 건립사업(1단계) 변경계획 ‧ 5월 서울 소방행정타운 건립추진을 위한 자문위원(3차) 회의 개최 ‧ 9월 서울 소방행정타운 건립추진을 위한 자문위원(4차) 회의 개최

□   향후 기대효과

- 재난관리 전단계의 One-Stop 소방행정허브 건설

- 재난현장에서의 탈출 능력 배양 및 지역사회와 시민 친화적인 안전문화 공간

- 소방정체성이 형성 강화되는 세계최고 수준의 소방인재 양성

- 효과와 효율중심의 총체적 재난대응시스템 및 미래창출형 종합소방행정시스템 구축

- 모두가 보고 싶고 배우고 싶은 세계 유일의 집적형 소방행정타운 건설

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-	-
2013	-		-	-	-	-	-

4		외부기관 주요 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

․ 세계일보(‘13.4.23) : 소방학교·특수구조단도 이전, 재난시 컨트롤타워 역할 기대

․ 한국경제(‘13.4.01) : 은평뉴타운에 소방행정타운…서울시, 2022년까지 조성

․ 국민일보(‘14.9.24) : 소방행정타운 설계 당선작 선정…서울시, 세계 최고수준의“소방행정타운 건립”

․ 동아일보(‘14.9.25) : 소방행정타운 은평뉴타운에 건립…소방학교-특수구조단 등 통합입주

참 고 자 료

□  위치도 및 현장 사진

위치도(물푸레골)	조성지 사진

□  공사 조감도