문서번호	공원녹지정책과-8761
결재일자	2016.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정2부시장 방침 제168호

						시 민
★주무관	공원협력팀장		공원녹지정책과장		푸른도시국장		행정2부시장
윤석환	배희정		최윤종		최광빈		06/10 이제원
협 조	자치행정과장					임동국
	공원녹지정책팀장					오종범

3단계 창의놀이터 재조성사업 추진계획

푸른도시국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

3단계 창의놀이터 재조성사업 추진계획

어린이의 감수성과 모험심을 키우고, 모든 세대가 함께 어울릴 수 있도록 노후 어린이 놀이터를 지역 커뮤니터 공간으로 재조성하고자 3단계 창의놀이터를 추진하고자 함

1		추진개요

□ 추진배경

○ 천편일률적인 놀이터 시설에서 벗어나 창의적 놀이터를 조성하고, 어린이 놀이터의 효율적 관리를 위해 주민참여 시스템 구축 및 확대 추진

○ 창의놀이터가 정착 되도록 지속 추진(시장 요청사항 ‘15.4.7. 집중회의)

○ 임기 동안 계속해서 연 50억원 투자(시장 요청사항 ‘15.10.14. 2단계 종합계획 보고시)

□ 추진방향

○ 공원 내 노후 어린이 놀이터를 모험심과 상상력을 키울수 있도록 재조성

○ 어린이교육, 시설, 조경, 시민단체 등 다양한 분야 전문가와 협업하여 시민 니즈 반영

○ 지역주민 및 마을활동가가 참여하는 커뮤니티 놀이터로로 재 조성 및 관리

	<1·2단계 창의놀이터 조성 추진경위>
▸ ‘14.10. 29. : 청책토론회 ‘함께 만드는 우리동네 어린이놀이터’ 개최 ▸ ‘15. 1. 22. : ｢어린이놀이터 함께 만들기 약속｣ 발표 ▸ ‘15. 3. ∼ ‘15. 8. : 자치구별 1단계 어린이놀이터 공사준공 ▸ ‘15. 9. ∼ ‘16. 2. : 2단계 어린이놀이터 디자인 및 설계심의 ▸ ‘15. 6. ∼ ‘16. 4. : 창의놀이터 네이밍 ‘꿈틀’ 및 약속안 디자인 개발 ▸ ‘16. 4. ∼ ‘16. 8. : 자치구별 2단계 창의놀이터 공사시행(진행중)

2		추진계획

□ 사업개요

○ 대    상 : 총 25개소 이내(도시공원, 마을마당 등 공공놀이터)

○ 소요예산 : 5,000백만원  ※ 자치구 특별교부금 활용

○ 사업기간 : ‘16. 6. ∼ ‘17. 10.

○ 조성내용

- 다양한 분야 전문가와 협업하여 놀이활동 컨셉으로 재조성

- 어린이놀이터 자문단 및 총괄자문가(MA)와 통합적 자문 도모

- 마을활동가가 참여하는 커뮤니티 놀이터로 디자인하여 시민 니즈 반영

□ 추진절차

대상지 조사	➡	대상지 선정	➡	사전워크숍	➡	주민참여형 디자인	➡
자치구 <6.12.~ 6.30.>		공원녹지정책과 <7.01.~ 7.31.>		공원녹지정책과 <8.11.>		자치구 <8.12.~ 9.20.>
설계비 지원	➡	디자인 심의 (2회)	➡	최종 디자인(안) 보고	➡	사업비 지원 및 설계·공사
자치행정과 <9.21.~ 9.30.>		공원녹지정책과 <10.01.~11.20.>		공원녹지정책과 <11.25.>		자치행정과, 자치구 <11.30.~>

3		세부 추진계획

□ 대상지 조사

○ 기    간 : ‘16. 6. 12. ∼ 6. 30.

○ 대    상 : 도시공원, 마을마당 등 보수가 필요한 공공놀이터

○ 조사방법 : 자치구에서 대상지 자체 발굴

○ 대상지 제출 : ‘16. 6. 30.

□ 대상지 선정

○ 기    간 : ‘16. 7. 01. ∼ 7. 31.

○ 선정방법 : 어린이놀이터 자문단 서면 및 현장 심사

○ 선정기준 ※ 대상지 선정기준 별첨 참고

- ｢어린이놀이터 운영협의체｣ 와 주민 참여형 디자인·설계 노력도

- ｢어린이 놀이터 함께 만들기 약속｣ 방향의 적합성

- 자연친화적 소재 및 어린이들의 창의성을 키우는 모래공간 조성이 가능한 곳

○ 선정개소 : 25개소 이내(사업비 50억 이내)

□ 사전워크숍 실시

○ 일시(예정) : ‘16. 8. 11(목), 14:00 ~ 17:00

○ 대    상 : 3단계 선정된 자치구 담당팀장 및 주무관, 운영협의체 위원 등

○ 내    용 : 창의놀이터 조성방향 및 설계·시공 가이드라인 안내 등

○ 강    사 : 어린이놀이터 자문위원 등

□ 주민참여형 디자인  ※ 자치구 추진

○ 기    간 : ‘16. 8. 12.~ 9. 20.

○ 기    준 : ｢어린이놀이터 함께 만들기 약속｣, 창의놀이터 조성 가이드라인

○ 방    법 : 놀이터 운영협의체 구성 후 지역주민 및 총괄자문가(MA) 의견 반영

○ 범    위 : 놀이터별 디자인컨셉에 맞는 어린이 놀이시설, 바닥포장 등

※ 단, 성인용 운동공간 및 운동시설 제외

○ 절    차

설명회 개최	➡	디자인워크숍 개최	➡	기본디자인 수립	➡	디자인 심의
• 운영협의체구성 • 주민워크숍 • 어린이워크숍 • 참여 방법 안내		•어린이·주민 참여 • 어린이놀이활동 관찰 등 •놀이터 컨셉·디자인 구상		• 디자인안 작성 • MA 자문		•자치구 → 시

□ 디자인 심의

○ 심사일시 : ‘16. 10. 01. ∼ 11. 20.(기간내 2~3회)

○ 심의주체 : 어린이놀이터 자문단 등

○ 심의방법 : 현황분석, 주민참여내용, MA자문, 구상안 등

※ 제출양식 : 설계안(구상안, 디자인), 설명서(PPT), 산출내역서, 설계도서 등

○ 심의내용 : ｢어린이 놀이터 함께 만들기 약속｣ 방향의 적합성, 실현 가능성, 자연친화적 소재 및 어린이의 창의성을 키우는 요소 등

□ 사업비 지원

○ 교부시기 : ‘16. 11. 30.

※ 설계비 사전 교부하여 커뮤니티 디자인 완성도 증진(‘16.9.21.~ 9.30.)

○ 교부기준 : 자치구 요청액 대비 놀이터 면적, 노후도 등을 고려하여 배분

○ 교부방법 : 특별교부금으로 자치구에 직접 교부

○ 교 부 액 : 총 50억원 이내

4		행정사항

○ 공원녹지정책과 : 어린이놀이터 자문단 및 총괄자문가(MA) 지속 운영, 사전워크숍 교육, 디자인 및 설계 심의

○ 자  치  구     : 운영협의체 구성, 주민워크숍, 주민참여형 디자인·설계 진행

○ 자치행정과     : 자치구 특별교부금 교부 지원

붙임 1. 창의놀이터 대상지 선정 기준 1부.

2. 어린이 놀이터 함께 만들기 약속안 1부.

3. 1·2단계 창의놀이터 재조성 소요예산 현황 1부.  끝.