구분

작업 시작 일시

작업 종료 일시

작업예상시간

중단시간

2016년 6월 16일 09:00

2016년 6월 16일 17:00

8시간

30분

제목

UPS 신규도입(구급상황관리센터) 및 서버전용 UPS 교체작업

작성자

임경수

요청자

정석희

작업대상

구급상황관리센터내 PC 및 네트워크 장비

목적

구급상황관리센터 UPS를 신규 도입함으로 정전시 안정성 도모를 위함

작업영향

구급상황관리센터 내에 있는 PC, 네트워크장비 및 기타장비 OFF됨

작업내용

및

절차

1. 작업 내용

(1) 구급상황관리센터 UPS 신규 도입에 관한 설치 및 전원 절체

(정전작업시간 14:00~16:00)

(2) 서버용UPS 교체작업

2. 작업 계획

(1) 구급상황관리센터 (2시간 정전후 작업)

단계	시간	내용	작업	담당
UPS 설치	09:00~13:00	UPS 정위치 설치 및 전원 연결 작업	영신 엔지니어링	정석희
UPS 테스트	13:00:~13:30	전원연결후 정상가동 확인	영신 엔지니어링	정석희
절체준비	13:30:~14:00	정전관련 준비작업 구급센터 직원 상황실로 전환작업	영신 엔지니어링	정석희
절체작업	14:00~16:00	장비OFF 및 UPS 출력 절체작업	영신 엔지니어링	정석희
작업종료	16:00-17:00	장비ON 및 정상동작 점검	영신 엔지니어링	정석희

(2) 서버용 UPS 교체작업 (장비 관련 정전 없음)

단계	시간	내용	작업	담당
UPS 설치	09:00~15:00	구급센터와 병행작업	영신 엔지니어링	정석희
UPS 테스트	15:00:~16:00	전원연결후 정상가동 확인	영신 엔지니어링	정석희
작업종료	16:00-17:00	정상동작 점검	영신 엔지니어링	정석희

작업주체

영신엔지니어링 윤형돈부장

작업인원

영신엔지니어링 윤형돈부장, 유지보수팀 임경수외 구급관리센터 관련인원

첨부문서

없음

작 업 계 획 서