의원 요구 자료 제출

시 행	도시철도설비부-7172
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장	도시기반시설본부장	결재
장재순		강치석	정찬웅	이정화	07/05 고인석
협 조

제 목	의원 요구자료 제출 (요구번호 945번, 우형찬의원, 교통위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

우 형 찬 의원(교통위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 945

〔도시기반시설본부〕

□ 지하철 9호선 전동차 70량 발주 관련

1. 추진 배경․근거․주요내용

2. 당초 계획했던 70량 설계․제작․초도편성․출고․시운전․투입 등

일정 계획

3. 조기 투입을 위해 5월 입고 및 시운전 후 8월에 투입한다고 했는데

현재 추진 상황은?

4. 2016년 6월 현재 9호선 운송인원 및 혼잡도 현황

5. 전동차 70량 포함 향후 9호선 전동차 투입 계획

1. 추진 배경․근거․주요내용

○ 추진배경

- 9호선 2단계 개통에 따른 혼잡도 상승 및 시민불편 심화 우려

- 2014.12월 국비지원 확정에 따른 차량구매 규모 확정 필요

- 차량구매에 장기간이 소요되는 점을 고려하여 3단계 개통대비 필요차량 수 및     조기발주가 시급한 차량수 검토 필요

○ 추진근거 : 행정1부시장 방침 제88호[교통정책과-4810(2015.3.10.)]

○ 주요내용

- 필요차량 규모검토 : 294량(현재 144량 + 추가투입 150량)

① 현재 운영중인 1단계 구간(25개역 27km)에 2․3단계(13개역, 13.6km)      추가시의 거리․수요증가에 따라

② 첨두시 운영시격(7분～8분), 혼잡도(급행 173% 유지)를 고려하여 서울연구원에서     산정한 필요 차량수

- 단계별 증차

∙ 2․3단계 개통에 따른 수요증가(‘17년 80만명, ’19년 83만명)와 혼잡도 문제       해결 위해 150량 구입이 필요하나

∙ 효율적 재원 배분과 차량 배치계획 등을 고려하여

⇒ 조기증차 70량, 3단계 개통시까지 80량 추가 구매

2. 당초 계획했던 70량 설계․제작․초도편성․출고․시운전․투입 등 일정 계획

: 붙임 1 참조

3. 조기 투입을 위해 5월 입고 및 시운전 후 8월에 투입한다고 했는데

현재 추진 상황은?

○ 초도편성차량 반입(개화차량기지) : 5.24

○ 현재 4편성(16량)이 반입되어 예비주행 및 본선시운전 중이며, 8월말까지

영업운행 투입

4. 2016년 6월 현재 9호선 운송인원 및 혼잡도 현황(도시교통본부 소관사항)

5. 전동차 70량 포함 향후 9호선 전동차 투입계획

○ 전동차 70량 투입 계획

- `16. 05 ~ 12월 : 출고 및 기지 반입

- `16. 09 ~ `17. 10월 : 완성차시험(신규 6량 및 증차)

- `16. 05 ~ `17. 10월 : 예비주행시험

- `16. 06 ~ `18. 06월 : 본선시운전

- `16. 06 ~ `18. 06월 : 기술 및 영업시운전 실시

○ 전동차 80량 투입 계획

- `16. 7월 현재 서울 도시철도 9호선 건설사업 기본계획 변경 절차 이행 중

- 효율적 재원 배분과 차량 배치계획 등 고려하여 3단계 개통시까지 80량 추가 구매

따로붙임 : 70량 설계․제작․초도편성․출고․시운전․투입 일정 계획표  1부 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (도시철도설비부)☎ 772-7288	차량과장	강 치 석
		주 무 관	장 재 순
	도시교통본부 (교통정책과) ☎ 2133-2246	도시철도관리팀장	공 병 엽
		주 무 관	김 치 훈
	작 성 일 : 2016.7.4.