면목119안전센터 재건축 자문단 회의 개최계획

□ 목 적

○ 사업추진 절차를 준수하고, 전문가 및 지역주민의 다양한 의견을 반영할 수 있는 자문단을 운영하여 성공적인 청사 건축에 기여코자 함

□ 회의개요

○ 일 시 : 2016. 8. 9.(화) 14:00 ~ 15:00

○ 장 소 : 중랑소방서 2층 기획상황실

○ 대 상 : 서장님, 자문위원 5명, 장비회계팀장, 계약담당

- 자문위원 명단

구 분	분 야	성 명	비 고
자문위원장	소 방	이 영 훈	소방행정과장
자문위원	소 방	조 정 모	면목119안전센터장
자문위원	전 문 가	한 상 운	건축가
자문위원	지 역 주 민	이 성 수
자문위원	지 역 주 민	박 유 정

○ 회의안건

- 자문위원 위촉식 진행

- 사업내용 및 절차 등 설명

- 설계공모 지침서 반영사항 결정

(공모기한, 제출서류, 외형 착안사항, 층별 면적․용도, 편의시설 등)

□ 시간계획

시 간(분)		내 용	비 고
14:00 ~ 14:05	5	위촉장 수여	자문위원 5명
14:05 ~ 14:15	10	재건축 사업설명
14:15 ~ 14:25	10	자문단 운영 안내
14:25 ~ 15:00	35	설계 공모지침 회의

□ 행정사항

○ 회의자료 및 안건 등 관련자료 사전 자문위원 전달

○ 회의록 작성 등 회의 결과보고

○ 회의결과 현상공모 반영 등 자문위원의 의견을 공정별 적극적 반영

○ 외부 전문가 자문료 지급

○ 자문단 회의 개최 홍보 및 촬영 협조(홍보팀)

□ 향후계획

○ 설계공모, 심사, 설계, 시공 등 필요절차 진행

○ 각 공정별 중요사항 결정시 자문회의 개최 등

참고 1. 면목119안전센터 재건축 계획

2. 위촉장(안)

< 참고 1 >

면목119안전센터 재건축 계획

□ 면목119안전센터 현황

○ 위  치 : 서울시 중랑구 동일로 475(면목동 727-250)

○ 규  모 : 철근콘크리트 2/1층 연면적 329.24㎡(대지293㎡)

○ 준공년 : 1980. 12. 8.

○ 소방력

- 차  량 : 총 4대(펌프1, 탱크1, 구급1, 이륜1)

- 인  원 : 28명(센터장1, 펌프차 12, 탱크차 6, 구급9)

□ 재건축 사업개요

○ 규  모 : 4/1층(중층포함) 연면적 650㎡(대지386㎡)

○ 용도지역 : 제3종일반주거지역

○ 법적사항 : 용적율 250%, 건폐율 50%

○ 사업기간 :‘16. 1월~12월(토지매입/설계), ‘17. 3월~11월(공사)

○ 사업비 : 2,274,092천원

계(천원)	토지매입비	설계비	감리비	공사비	자산취득비	사무관리비	시설부대비
2,274,092	408,663	94,726	21,483	1,661,412	50,000	30,000	7,808

□ 추진일정

○ 서울시 추천 공공건축가 현상공모 공고 :‘16. 8. 19.(금)

○ 현상공모 심사                        :‘16. 9. 27.(화)

○ 당선자 결정 및 계약                  :‘16. 10. 5.(수)

○ 설계 완료, 납품 및 준공               :‘16. 10. 5. ~ 12. 5.

○ 공사 입찰 → 계약 → 착공            :‘17. 3월 중

○ 공사진행 및 완공                     :‘17. 3월 ~ 11월

※ 위치도 및 청사전경

청사전면	청사후면

< 참고 2 >

위  촉  장(안)

제2016-01호 위 촉 장
	시티건축사사무소
	대 표 한 상 운
귀하를 면목119안전센터의 내실 있는 설계와 시공을 위한 자문위원으로 위촉합니다.
2016년 8월 9일
중랑소방서장 이 석 훈