투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	기계시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경(제1회) 계약 요청

1. 시설과-6038호(‘16.09.06)와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 “2016년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간 단가)”에 대해 아래와 같이 설계변경(제1회) 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 공 사 명 : 2016년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2016. 3. 14 ∼ 2016.12. 31

ㅇ 도 급 자 : 동현기계설비(주) 대표 김종석

ㅇ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경 관리강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(기계설비정비)

ㅇ 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
도 급 비	253,519,063원	253,519,063원	-	계약금액 및 공사기간 변경 없음

ㅇ 설계변경사유 : 당초 설계시 예정물량으로 설계되어 실제 시공에 따른 물량변경에 따른                 설계내역 변경

따로붙임 : 1) 설계변경내역서 1부.

2) 실정보고 검토보고서 1부.

3) 합의서 1부.  끝

	시설과장
주무관	이재균		주무관	代이재균		시설과장	09/07 代이춘한
협조자
시행	시설과-6040	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7422	/전송	02-507-7230	/	ioupower@seoul.go.kr	/	부분공개(7)