서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인 ‘제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계

2. 계약자 : ㈜유신 외 2

3. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
총 차	2016.9.30	2016.12.15
2 차	2016.9.30	2016.12.15

4. 귀책사유 : 서울특별시

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 용역계약 변경합의서 1부. 끝.

	도로계획과장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	09/21 하종현
협조자
시행	도로계획과-13434	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과	/
전화	02)2133-8065	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개