서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)유신 대표이사 성낙일
(경유)
제목	준공기한 연기 알림

1. 서울시정 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 사에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인 ‘제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 예정임을 알려드리오니 변경계약 체결 등 필요한 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경
총 차	2016.9.30	2016.12.15
2 차	2016.9.30	2016.12.15

나. 연기 사유

- LH공사가 시행하기로한 설계경제성분석(VE)의 지연

- 기본설계(안)에 대한 지역주민 의견수렴(주민설명회 등) 기간 추가 소요. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	전결 09/21 하종현
협조자
시행	도로계획과-13435	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과	/
전화	02)2133-8065	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개