연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	비고
계	도시기반시설본부	68개 공사장	토목부23, 건축부14, 방재시설부14 도시철도 사업부5, 토목부9, 설비부3
소계	시 설 국	51개 공사장	토목부23, 건축부14, 방재시설부14
	토 목 부	24개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,673	2001-12-29	2019-11-30	70.5
2	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	2,215	2002-07-03	2018-07-31	40.7
3	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	1,705	2008-12-30	2017-12-31	64.0
4	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	558	2008-02-15	2017-12-31	62.2
5	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	1,760	2010-03-22	2020-08-30	35.4
6	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	본교량 B=20m,L=235m,접속 B=9m,L=160m, 도로확장 B=20→30m, L=750m	300	2008-10-23	2016-12-31	95.0
7	도시고속도로연결램프(정릉길)설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	122	2013-12-01	2016-12-31	47.0
8	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	253	2010-10-11	2017-12-31	48.8
9	장안교(구교) 성능개선공사	교량성능개선(폭17m 연장218m)	150	2014-12-10	2016-12-15	72.4
10	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2016-12-31	82.5
11	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	399	2010-10-11	2017-12-31	84.5
12	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km	1,690	2010-10-08	2017-12-31	27.8
13	잠실역 버스환승센터 조성사업	버스환승센터(A=19,797㎡, 지하1층) 환승정류장(8면), 버스주차장(23면)	828	2014-05-28	2016-10-20	95.4
14	목동교 성능개선공사	교량성능개선(폭20m 연장240m,DB-18→24)	102	2015-08-06	2017-08-11	65.1
15	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	도로연장 : 5.194km,(설계속도 : 80km/h) (터널 : 4.094km(병렬터널), 개착 : 1.1km)	3,385	2016-03-01	2021-02-28	4.1
16	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	연장 L=5.136km (터널:3.808km, 개착박스 0.430km, U타입 0.160km)	2,505	2016-03-01	2021-02-28	4.1
17	석촌지하차도 상부도로 구조개선공사	교량설치 B=22.5m, L=31.5m 회전교차로 설치 1개소	15	2016-03-02	2017-05-01	5.0	재설계
18	사가정길(장안삼거리~전농동사거리)확장공사	교차로구간 확장(전체 1.2km 중 520m) 배봉:폭6~7차로, L390m,전농:폭6차로,L130m	13	2016-02-26	2016-12-31	42.0
19	올림픽대로남단IC 연결램프 구조개선공사	램프신설 : L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m 올림픽대로 이설 : 하남방향(1.21㎞), 김포방향(1.46㎞)	264	2016-04-01	2019-12-11	0	협의 중
20	광복교~안양교 도로확장공사	도로확장 B=24.5m~31.9m, 6차로, L=1,110m 광복교 보도설치, 안양교 철거 및 신설	629	2016-04-01	2019-09-12	0	협의 중
21	남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사	도로개선 : 폭 30.0m(6차로), 연장 1.1㎞ 교량개축 : 폭 22.0m → 31.4m, 연장 38.0m	154	2016-04-25	2017-01-18	3.9
22	서울역 7017 프로젝트 건설공사	폭 10.3m, 연장 938m, 기존 교량 보수·보강 - 그린웨이 조성 및 접근시설 설치 등	199	2016-04-18	2017-05-17	23.5
23	중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사	보행교량 신설(B=4.5m, L=191m)	52	2016-04-29	2018-04-28	2.0
	건 축 부	14개 공사장
24	재사용플라자건립공사	지하2층, 지상5층 연면적16,529㎡	444	2015-01-15	2017-01-14	52.4
25	서울시어린이 병원 건립공사	지하2층, 지상5층 연면적11,950㎡	235	2013-01-20	2017-04-28	66.8
26	주얼리비지니스센터 건립공사	지하2층, 지상2층 연면적443㎡	14	2015-11-16	2016-12-15	34.6
27	도심권 50+캠퍼스 및 복지타운 리모델링	지하2층 지상 10층 연면적 10,830㎡	38	2015-12-03	2016-10-31	75.0
28	성동소방서 신축공사	지하1층/지상6층, 연면적 5,194.60㎡	54	2016-01-25	2017-05-24	24.7
29	마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사	지하2/지상2층 연면적7422.04㎡ 101,510㎡(기존비축탱크5기,4,894만ℓ,3,063㎡)	80	2015-12-21	2017-04-29	40.3
30	서남권 50+캠퍼스 건립공사	지하3층, 지상5층	61	2016-01-07	2017-07-06	34.3
31	강북청소년수련관 증축공사	지상3층, 연면적823.17㎡ 생활관 별동 증축	10	2015-12-31	2016-10-30	65.0
32	북부여성창업플라자 조성공사	지하1층/지상4층, 연면적 6.085.59㎡ 교육연구시설 및 근린생활시설	42	2016-03-02	2016-11-30	42.0
33	시립영보정신요양원 증축 및 리모델링공사	총 8개동, 지하1/4층, 연면적 14,475.26㎡	18	2016-01-21	2017-01-24	34.4
34	서울창업허브 리모델링공사	지하1층 지상 10층 연면적 17,722 ㎡ : 리모델링	127	2016-02-12	2017-04-11	34.5
35	세운상가 활성화를 위한 공공공간조성공사	공연장 741㎡, 초록띠공원 3,748㎡ 및 플랫폼쉘39개 등	186	2016-03-24	2017-06-23	10.0
36	서울기록원 건립공사	규모 : 지하2층, 지상5층 연면적15,004.0 구조 : 철근콘크리트조	142	2016-04-20	2018-04-19	9.1
37	서울 소방행정타운 건립공사	대지:48,950.10㎡, 건축:6,648.06㎡,연면적:25,174.81㎡, 건물구조:철골철근콘크리트, 지하2층 지상15층	230	2016-05-18	2018-05-17	2.0
	방재시설부	14개 공사장
38	제물포터널 민간투자사업(1공구)건설공사	총연장 : 4.28km, 지하차도:660m / 2개소 터널:7,640m/2개소, 기타 부대시설	2,304	2015-10-16	2020-10-15	4.7
39	제물포터널 민간투자사업(2공구)건설공사	총연장 : 3.25km, 지하차도:694m / 2개소 터널:5,846m/2개소, 기타 부대시설	3,018	2015-10-16	2020-10-15	8.6
40	중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화	고도처리시설 개량 88만톤/일 시설현대화사업 25만톤/일	3,059	2009-02-13	2017-04-28	92.5
41	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	2,786	2009-11-09	2018-12-31	50.8
42	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리용량 : 4,000㎥/일	635	2012-11-15	2016-10-25	97.4
43	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	서울대학교 정문 앞 광장 저류조 40,000㎥ 서울대학교 내 분산형 저류조 25,000㎥	339	2012-06-13	2017-05-31	85.2
44	잠원2빗물펌프장 신설공사	잠원2빗물펌프장 :펌프장 신설 1,400㎥/분, 집수조 V=15,500㎥	51	2013-01-03	2016-12-31	84.3
45	합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사	합정펌프장 증설 : 218→378㎥/min 중동펌프장 증설 : 330→540㎥/min	47	2013-01-04	2017-04-30	51.6
46	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km,D=10.0m 유도:L=1.097km,D=5.5m	953	2013-05-27	2017-01-22	38.4
47	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사	복개: A=33,978㎡, 공원화: A=36,920㎡	261	2013-10-01	2017-04-30	90.5
48	경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)	길이(1.1㎞) 면적(53,860㎡)	54	2015-10-06	2016-10-20	47.5
49	서초역~방배로간 도로개설공사	도로개설 폭40m(6~8차로), 연장 1.28km(터널 355m포함)	441	2015-10-20	2019-01-31	16.5
50	양재대로 녹지연결로 조성공사	녹지연결로 : 폭20m, 총 연장 90.65m - DPS합성형교 B=20.0m L=52.6m	44	2016-06-20	2017-06-19	0	협의 중
51	청계천 생태환경 개선공사(2단계)	진출입 경사로 설치(2개소), 홍수방지벽(L=145m) 및 산책로 정비(L=3,246m)	7.9	2016-08-26	2018-02-25	1
	도시철도국	17개 공사장	도시철도사업부5, 도시철도토목부9 도시철도설비부3
	도시철도사업부	5개 공사장
52	경전철 우이신설 1공구	L=1.9km(정거장 3개소)	1,070	2009-09-15	2016-11-30	92.6
53	경전철 우이신설 2공구	L=3.2km(정거장 4개소)	1,157	2009-09-15	2016-11-30	94.4
54	경전철 우이신설 3공구	L=3.1km(정거장 3개소)	967	2009-09-15	2016-11-30	87.8
55	경전철 우이신설 4공구	L=3.1km(정거장 3개소)	1,006	2009-09-15	2016-11-30	89.3
56	경전철 우이신설 신호, 통신, 송변전, 전차선, SE, MIS 공사		46	2009-09-15	2016-11-30	90.0
	도시철도토목부	9개 공사장
57	지하철9호선 918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,377	2010-02-19	2018-05-30	76.8
58	지하철9호선 919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2018-05-30	41.0
59	지하철9호선 920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2018-05-30	66.6
60	지하철9호선 921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,707	2009-12-31	2018-05-30	63.1
61	지하철9호선 922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,317	2010-09-16	2018-05-30	77.3
62	지하철9호선 923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	982	2010-09-20	2018-05-30	72.0
63	경전철 우이~신설 궤도공사	L=23.4km(정거장 1개소)	198	2009-09-15	2016-11-30	95.0
64	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	738	2015-03-17	2019-03-28	11.8
65	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	386	2015-03-30	2018-07-10	20.7
	도시철도설비부	3개 공사장
66	경전철 우이~신설 시스템,송변전,전차선,통신공사		46	2009-09-15	2016-11-30	-
67	지하철9호선 개화차량기지 유치선증설 전차선	유치선 23개 선로[(가공전차선로 7.9km(단선))	30.4	2016-01-11	2017-01-09	37.1
68	지하철9호선 개화차량기지 유치선증설 시스템	규모 : 유치선 증설 23선, 연장 : 6.06km	60	2015-12-15	2017-12-31	57.7

10월 안전점검 대상공사장