문서번호	투자유치과-4419
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	투자유치2팀장	투자유치과장

2016년 서울 글로벌기업

채용박람회 추진계획(안)

2016. 5.

경제진흥본부

(투자유치과)

2016 서울 글로벌기업 채용 박람회 추진계획

서울 소재 유망 외국인 투자기업과 우수 인재와의 만남의 장을 마련하여 청년 취업률을 제고하고, 외국인 투자기업의 고용 창출 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		2015년 추진성과

박람회 개요

○ 일    시 : 2015. 11. 6(금) 10:00~17:30

○ 장    소 : 동대문디자인플라자 (DDP) 알림1관(A1)

○ 참 여 자 : 서울소재 글로벌기업(외투기업 33, 금융 25), 청년구직자 등

○ 규    모 : 4개관 70여개 부스

- 기업 채용관 (58), 컨설팅관(매칭 컨설팅, 글로벌 멘토링 등)

- 비전관(채용 설명회 및 특강), 부대행사관(메이크업, 코디, 사진촬영)

○ 주     최 : 서울특별시, 금융감독원(금융중심지지원센터)

주요성과

○ 글로벌기업과 우수 인재와의 만남의 장 제공

- 글로벌 금융사 등 총 58개 기업(외투기업33,금융사25) 참여로 구직자 취업 및 기업 인재채용 기회 확대

○ 채용박람회의 실효성 제고

- 총 방문객 2,835명(전년대비 33% 증가), 현장면접 2천 5백여 건,기업별 재면접 인원 350여 명으로서 실질적인 채용 박람회로 운영

Ⅱ		2016년 채용박람회

추진목적

○ 대학생 등 구직자들의 우수 글로벌 기업 취업기회 제공

○ 참여 외투기업 및 금융사의 기업홍보 및 우수 인재채용 기회 제공

○ 외투기업 인재채용 등 고충해소를 통한 기업 투자환경 개선으로 증액투자 유도

추진방향

○ 기업 채용 수요파악 통해 실질적인 채용성과 가시화

- 최근 3년간 구축된 네트워크 등 활용하여 구직자와 구인기업 간 실질적인 면접 기회 확대

○ 박람회 수행 실적이 많은 대행사를 선정하여 체계적으로 박람회 운영

- 특정 시간대 및 기업에 면접신청자 수가 집중되어 대기시간 증가 및 대기        공간 부족 등 현장에서 발생하는 문제점 보완 대책 수립 필요

사업 개요

○ 행  사  명 : 2016 서울 글로벌 기업 채용박람회

○ 일     시 : 2016. 11. 11(금) 10:00~17:00

○ 장     소 : 동대문디자인플라자 (DDP) 알림1관(A1)

○ 참가 대상 : 서울소재 글로벌 기업(외국인투자기업 ,금융), 청년구직자

○ 규       모 : 4개관 60~70개 부스

- 기업 채용관, 홍보관, 컨설팅관, 부대행사관 등

○ 주요 내용 : 글로벌 기업 인재 채용 지원, 참여기업 채용설명회 및 구직자 컨설팅 지원

○ 주      최 : 서울특별시, 금융감독원(금융중심지지원센터)

○ 사  업  비  : 총 130백만원

Ⅲ		추진 계획(안)

박람회 프로그램 구성(안)

○ 채용관 : 50~60개 글로벌기업(구인업체) 부스 운영

○홍보관 : 서울시 홍보 관련 부스 운영

구 분		구성(안)
홍보관	서울시 홍보관	서울시 일자리플러스센터 운영
		서울시 박람회 추진사무국 운영 등
		각종 홍보물 및 기타 자료 등 홍보 부스

○ 컨설팅관 및 부대행사관 : 취업관련 각종 상담 및 부대행사

구 분		구성내용(안)
설명회관	취업 특강 및 참여기업 채용설명회 (100명 이상 수용 규모)	채용설명회(박람회 참여기업, 30분 이내 진행)
		성공사례 특강(글로벌 기업 취업 선배 성공담)
		외국인투자기업 취업 구직자를 위한 취업 특강 (성공 취업을 위한 이미지 메이킹 등)
부 대 시 설 관	컨설팅관	취업서류 작성 기법 컨설팅(외국어 이력서 작성등)
		실전 모의면접 서비스 등 면접 컨설팅 (면접 노하우 및 면접 매너 등 소개)
		직업심리검사 또는 적성검사
	이벤트관 (부대행사)	사진촬영(이력서 증명사진)
		헤어, 메이크업(이미지 메이킹)
지 원 관	취업지원시설	문서지원실(문서작성, 정보 검색대) 등
대기시설	휴 게 관	박람회 참여자를 위한 휴게 공간

참가기업 모집

○ 규 모 : 50~60개 외투기업(일반 및 금융)

○ 방 법

- 금융감독원(금융중심지 지원센터), 유관기관(주한외국상공회의소, 외국기업협회 등) 협력

- 기 진출 외국인투자기업 현장방문을 통한 구인 수요업체 파악

- 각종 홍보매체 활용 : 보도자료 배포, 홈페이지, 각종 포털 사이트 등

○ 유관기관 협조 및 역할 분담

- 금융감독원 : 채용박람회 홈페이지 구축 및 글로벌 금융사 대상 홍보

- FORCA(외국기업협회) : 간담회․정기포럼 등을 통한 회원사 홍보

- 주한외국상공회의소 : 자국기업 참가 협조 독려 메일 서비스 등

참가 학생(구직자 등)

○ 구직자 참여 예상(목표) : 3,000명

○ 구직자 참가방법

- 온 라 인 : 글로벌기업 채용박람회 홈페이지 사전 등록

- 오프라인 : 박람회 행사 당일 현장등록 추진

‣ 준비서류 : 이력서, 자기소개서, 기타 자격증(소지 시) 등

○ 참여유도 방안

- 시 홈페이지, 투자유치 블로그 및 SNS 등 활용 홍보

- 전국대학교 홍보(대외협력)팀 참여 협조 공문 발송

- 취업포털사이트, 대학취업전산망을 통한 박람회 일정 등 공지사항 노출

박람회 수행기관별 업무 분장

○ 목    적 : 원활한 조직인력 운영 및 외투기업 취업박람회 지원

○ 운영기간 : ’15. 7월 ~ 11월(행사 종료 시까지)

○ 기관별 업무 내용

서울시(총괄) (투자유치과)		금융감독원 (금융중심지지원센터)
․ 행사기획, 대외협력 ․ 기관별 업무조정 ․ 행사프로그램, 디자인 진행인력 등 총괄 ․ 구직자, 구인업체 모집 ․ 부대행사 선정 ․ 개막식 개최계획 수립 ․ 결과보고서 작성 ․ 주한 외국상공회의소 업무협의 등		․ 박람회 참여 금융기업 모집 ․ 행사장 인포데스크 총괄 지원 ․ 기타 행사지원 (행사안내, 행사장 안전관리 지원 등)

박람회 참여기업과의 사전간담회

○ 일  시 : ’16. 10월중

○ 대  상 : 박람회 참여기업 HR담당

○ 내  용

- 채용부스, 기업 간판 및 로고 등 참가회사 지원사항 안내

- 부스설치, 전시품 반입 등 박람회 준비 일정 안내

- 노트북, 부스 인테리어, 기업 홍보물 등 참가회사 준비사항 안내

- 주의사항 및 온라인 사전접수 방법 안내 등

Ⅳ		홍보 계획

홈페이지, 라디오․신문 홍보

○ 박람회 사전홍보를 통한 구인업체 및 구직자 대상 홍보 전개

- 서울시 홈페이지, SNS(페이스북, 블로그 등)활용

- 금융감독원 및 금융관련협회, 서울고용노동센터 홈페이지를 통해 홍보

- 서울지역 대학청년고용센터, 대학취업지원관 활용 각종 홍보물 배부

- 채용박람회 공식 홈페이지를 통한 사전 등록 실시

○ 보도자료 등 적기 배포를 통한 신문(중앙지, 지방지) 홍보

○ TBS 교통방송 매체를 통한 홍보 추진(TV, 라디오 인터뷰 활용 등)

온․오프라인 홍보를 통한 채용박람회 인지도 제고

○ 민간 및 유관기관 활용 포털사이트 배너 광고

- 민간 포털사이트 배너광고(뉴미디어담당관 요청)

- 서울시, 일자리플러스센터, 자치구, 대행사 홈페이지 활용 홍보

- 주요대학 취업창구 공지사항 노출 및 취업포털사이트 배너 광고

○ 대중교통․옥외 홍보매체 활용 광고 및 무료신문 게재 등

- 서울시 메트로 등 지하철 역사 내 게시판 및 모서리 광고

- 옥외 전광판 : 서울시 뉴스 또는 영상 표출

- 상암월드컵경기장 및 세종문화회관 LCD TV 표출 등

Ⅴ		행정사항

추진일정

구 분	추진 내용	추진 기한
5월	행사 기본계획 수립 및 계약심사 의뢰	5.20
	업체선정 공고	5.25
	제안서 평가계획 수립	5.30
6월	입찰참가 신청서 접수	6.10
	제안서 평가위원회 개최	6.20
	우선협상대상자 협상 및 계약체결	6.30
7월	세부 프로그램 기획(업체) 및 조정	7.29
8월	박람회 추진운영(T/F)반 구성	8.29
9월	행사 안전관리계획 수립	9.9
	유관기관 협력 참여기업 모집․확정	9.23
	안전감사담당관에 일상감사 의뢰	9.30
10월	세부 추진계획 수립	10.20
	박람회 참여기업과의 사전 간담회 개최	10.25
	홍보물 제작 및 배부	10.28
	유관기관 회의 및 최종점검	10.31
11월	글로벌기업 채용 박람회 개최	11.11

운영업체 선정

○ 위탁업무

- 2016 글로벌 기업 채용박람회 운영계획 수립 및 시행(홈페이지 운영)

- 행사장 관련 총괄업무(부스운영 및 부대행사 섭외 등 현장관리)

- 행사장 안전관리계획 수립 및 행사요원 마련

- 채용박람회 홍보 진행 및 개막식 행사 준비

- 홍보물 제작 및 대외홍보

- 행사를 위한 부스 및 각종 시설물 설치·관리·철거 등 관리

- 재정운영 및 사업 운영결과 보고 및 정산 등

○ 선정절차 및 일정

입찰공고	➡	입찰등록 및 제안서 접수	➡	평가위원회 구 성	➡	제안서 평가	➡	협상 및 계약체결
5월중(20일간)		6월중		6월중		6월중		6월말

※ 위탁업체 선정관련 평가위원회 구성 및 심사계획은 별도 수립

○ 업체선정 : 협상에 의한 계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

○ 소요예산 : 130백만원

- 예산과목 : 투자유치 활성화, 매력적인 투자환경 조성, 외국인 직접투자 활성화 마케팅 추진, 행사운영비(100-201-03)

홍보 협조 - 시민소통기획관, 정보기획단, 대변인, 교통방송

○ 서울시 홈페이지 배너 게재 협조(정보시스템담당관)

○ 대표 BI, 슬로건, 포스터 제작, 버스, 지하철 내 홍보물 부착, 영상물

제작(시민소통담당관)

○ SNS, 인터넷 포털 등 홍보 협조(뉴미디어담당관)

○ 보도자료 배포 및 취재, 기획기사 보도 협조(언론담당관)

○ TV 및 라디오 홍보, 행사과정 촬영 협조(교통방송)

행사용 아리수 지원 협조 – 상수도사업본부(생산부)

붙임 : 채용박람회 행사장 평면도 1부.

DDP 행사장(평면도)