의원 요구 자료 제출

시 행	공공개발센터-10922
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

전문관		개발정책팀장	공공개발센터장	재생정책기획관	도시재생본부장	결재
진철웅		이상면	이성창	강맹훈	11/09 진희선
협 조
	지역개발팀장				이규희
	전략개발팀장				송헌영

제 목	시의원 요구자료 제출 (요구번호 2000번, 남창진 의원, 도시계획관리위원회)

1. 남창진 시의원 요구자료(요구번호 2000, `16.11.3)와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 요구자료(1. 한강협력계획 4대 핵심사업, 2. 공공개발센터 발주용역 중 용역변경 건 관련)를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

남창진 의원 (도시계획관리위원회, 새누리당)

2000-1. 한강협력계획 4대 핵심사업 관련

- 사업별 진행개요, 진척사항 및 향후 진행예정사항, 기본계획 제출바람

- 사업별 관련 용역 발주현황 및 내역

□ 한강협력계획 4대 핵심사업에 대한 사업별 진행개요, 진척사항 및 향후 진행 예정사항은 아래와 같으며, 기본계획은 현재 용역 시행 중에 있어 계획 수립 완료 후 별도 제출토록 하겠습니다.

사업개요

○ 위    치 : 여의도 한강공원 일대 (여의나루역 인근 수변부 및  제방변)

○ 규    모 : 부지면적 60,900㎡, 건축물 연면적 25,600㎡

- 수상시설(통합선착장·피어데크)   : 부유체  10,800㎡ / 연면적  9,100㎡

- 육상시설(여의테라스·복합문화시설) : 토지면적 50,100㎡ / 연면적 16,500㎡

* 세빛섬(가빛섬, 채빛섬, 솔빛섬, 예빛섬) 연면적 10,341㎡, 뚝섬자벌레 연면적 2,477㎡

○ 사업기간 : `16 ~ `19년 (수상시설 `18년 준공, 육상시설 `19년 준공)

○ 사 업 비 : 4개 사업 1,933억원                        (단위:억원)

사 업 명		총사업비				`16년도
		국비	시비	민자	계	국비	시비	민자	계
수상	통합선착장	150.0	151.8	-	301.8	6.0	7.8	-	13.8
	피어데크	100.0	100.0	250.0	450.0	8.5	8.5	-	17.0
육상	여의테라스	65.0	65.0	420.0	550.0	1.0	1.0	-	2.0
	복합문화시설	281.1	281.1	68.8	631.0	1.0	1.0	-	2.0
총 계		596.1	597.9	738.8	1,932.8	16.5	18.3	-	34.8

주요내용

○ 통합선착장   : 관공선 등 통합기능 선착장 조성 [부유체 3,600㎡+상부건축물 2,100㎡]

○ 피어데크      : 선착장과 연계한 집객시설 확보 [부유체 7,200㎡+상부건축물 7,200㎡]

○ 여의테라스   : 윤중로변 시민편의시설 확충 [건축연면적 8,500㎡, 테라스 가든 12,900㎡]

○ 복합문화시설 : 한강변 시민문화 향유공간 제공 [건축연면적 8,000㎡ (2층)]

진척사항

【추진경위】

○ 한강 관광자원화 발표(대통령 주재 무역투자진흥회의 / '14. 8월)

○ 서울시장-경제부총리 회동(한강 T/F 구성 합의/ '14. 9월)

○ 한강 차관급 TF 회의(7회 개최 / '14.9 ~ '15.8월)

○ 정부-서울시 공동발표(서울시장, 기재부‧문체부‧국토부‧환경부 장‧차관 / '15.8.24)

○ 추진방향 정립을 위한 전문가 자문(총16회, 연53명 / `15.10~`16.3월)

○ 기본계획 수립용역 착수 (`16.3.14 / 희림건축+CBRE코리아)

【추진사항】

○ 수상시설(통합선착장‧피어데크) : 市투심(`15.9.23), 中央투심(`16.2.26)

- 통합선착장 : 설계공모 추진 중

- 피어데크   : 사업방식 검토 중

○ 육상시설(여의테라스‧복합문화시설) : 타당성 조사후 市투심 및 中央투심 예정

향후계획

○ `16.03~`17.06 : 기본계획 수립 용역

○ `16.02~`17.03 : 타당성 조사 용역 (육상시설)

○ `17.03~`18.02 : 기본 및 실시설계 용역 (수상시설)

□ 사업별 관련 용역 발주현황 및 내역

○ 기본계획 수립 용역

- 용 역 명 : 한강협력계획 4대 핵심사업 기본계획수립 용역

- 계약금액 : 950,800천원

- 용역기간 : 2016. 3. 15. ~ 2017. 6. 7.

- 계약상대 : ㈜희림종합건축사사무소+CBRE 코리아(주)

○ 타당성 조사 용역

- 용 역 명 : 한강협력계획 4대 핵심사업 타당성 및 적격성 조사 용역

- 계약금액 : 194,000천원

- 용역기간 : 2016. 2. 17. ~ 2016. 12. 14.

- 계약상대 : (재)서울연구원

작성자	기 관 명 (부 서 명)	직 위	성 명
	서울특별시 (공공개발센터)	담당사무관	이상면
	☎ 2133-8364	주무관	진철웅
	작 성 일 : 2016. 11. 8 .

남창진 의원 (도시계획관리위원회, 새누리당)

2000-2. 도시재생본부 공공개발센터 발주용역 중 용역변경 건 관련

- 최근 1년간 용역변경 내역 및 사유

□ 도시재생본부 공공개발센터 발주 용역 중 최근 1년간 용역변경 내역 및 사유는 아래와 같습니다.

연번	용 역 명	변 경 내 역	변 경 사 유
1	한강협력계획 4대 핵심사업 기본계획수립 용역	용역비 변경 당초 : 800,800천원 변경 : 950,800천원	통합선착장 설계공모 및 수상 구조 안정성 검토 과업 추가
2	공공토지자원의 활용기본구상 및 사업화방안 수립	용역 기간 변경 당초 : ’14.5~16.5(24개월) 변경 : ’14.5~16.7(26개월)	시범사업지 중 사업구체화 검토가 필요한 대상지가 발생하여 준공기한 연기
3	舊)한국정보화진흥원부지 활용 및 기본계획 수립	용역 기간 변경 당초 : ’15.9.3~’16.2.4(5개월) 변경 : ’15.9.3~’16.4.4(7개월)	장애인단체, 전문가 등의 추가 의견수렴 및 타당성 재검토에 따른 공기부족 ※장애인복지정책과-1265호 (’16.1.20) 연장 요청
4	미니어처 도시 조성 기본구상 수립 용역	용역 기간 변경(1차) 당초 : ’15.7~’16.3(240일) 변경 : ’15.7~’16.5(300일) 용역 기간 변경(2차) 당초 : ’15.7~’16.5(300일) 변경 : ’15.7~’16.6(330일)	1차 변경 : 입지 추가 검토, 추가적인 프로그램 수립 등 2차 변경 : 입지 추가 검토, 주변 시설과 연계방안 검토 등

작성자	기 관 명 (부 서 명)	직 위	성 명
	서울특별시 (공공개발센터)	담당사무관 담당사무관 담당사무관	이상면 송헌영 이규희
	☎ 2133-8364 ☎ 2133-8353 ☎ 2133-8358 ☎ 2133-8434	주무관 주무관 주무관 주무관	진철웅 최희영 김영일 박지용
	작 성 일 : 2016. 11. 8 .

이곳에 본문을 입력하세요