“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 요청(한강교량일상유지보수공사 책임감리용역(전체,3차))

1. 교량보수과-22366(2016.12.7)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인“ 한강교량일상유지보수공사 책임감리용역(전체,3차)”의 설계변경에 따른 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강교량일상유지보수공사 전면책임감리용역(장기계속)(3차)

나. 도 급 자 : ㈜대한콘설탄트 대표 이우정 외 1

다. 착 수 일 : 2014. 4.10

라. 변경내역

구분	용역비(천원)			용역기간
	당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
전체분	1,171,040	1,156,790	-14,250	2014.4.10. ~2016.12.31	변경없음	-
3차분	404,880	390,630	-14,250	2016.1.1. ~2016.12.31	변경없음	-

마. 예산과목

- 교량관리,한강교량관리,한강교량일상유지보수,시설비 및 부대비,감리비

바. 설계변경사유

- 2016년 한강교량 일상유지보수공사 작업지시별 공정이 원활하게 시행됨에 따라 2016. 11.12 ~ 12.31 간 보조감리원(1인) 미투입에  따른 감리비 정산 (감14,250천원)

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부. 끝.

	교량안전과장
주무관	백운경		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	12/08 박문희
협조자
시행	교량안전과-22424	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개