문서번호	공원조성과-604
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원디자인팀장	공원조성과장		푸른도시국장
협 조
	공원관리팀장

2017년도 청소년 체험의 숲 조성사업 추진계획

2017. 1.

푸른도시국

(공원조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년도 청소년 체험의 숲 조성사업 추진계획

자연을 접하기 어렵고 여가활동이 부족한 도시 청소년들에게 숲을 활용한 체험공간을 조성·운영하여 체력단련과 재미를 즐길수 있는 기회를 제공하여 건강한 인재양성에 기여코자 함.

Ⅰ		추진근거

청소년 체험의 숲 시범조성 사업계획(공원조성과-10201호(‘13.8.29))

민선6기 공약사업 : ‘생애주기별 힐링공원 조성사업’ 의 일환으로 추진

※ 민선6기 공약사업 청소년체험의 숲은 ‘16년까지 2개소 조성을 목표로 추진되었으나, 시민호응도가 높고 서울 동북권에 편중되어 있어 지역간 균형 조성 필요성에 의해 1개소 추가 조성.

Ⅱ		사업개요

대 상 지 : 3개소

년 도	명 칭	위 치	비 고
2015	중랑캠핑숲 내	중랑구 망우동 74 일대	完
2016	북악산도시자연공원	성북구 성북동 226-259 일대
2017	관악산도시자연공원	관악구 신림동 205-1 일대

사업기간 : 2013~2017

사 업 비 : 3,900백만원(‘15년이전 1,100, ‘16년 1,300, ‘17년 1,500)

사업내용 : 체험시설, 운영센터, 쉼터 설치 등

추진방향

- 수목, 지형훼손 없이 숲과 자연을 이용하여 안전한 체험공간 조성

- 모임(교육) 및 휴게공간 조성(지형을 활용한 다양한 형태의 모임터, 쉼터)

-	청소년들의 특성을 고려하여 안전하게 활동할 수 있도록 공간 구성

Ⅲ		추진실적

사업추진계획 수립 및 대상지 선정, 전문가 자문 실시( ‘13.3~12)

중랑캠핑숲 청소년 체험의 숲 조성

- ‘14. 1~12  : 설계시행, 도시공원위원회 심의

- ‘15. 4~11. : 공사시행

- ‘15.12.22  : 도시공원조례 일부개정 및 민간위탁 동의안 가결

- ‘16. 1. 7   : 도시공원조례 일부개정안(이용료 신설) 공포·시행

- ‘16. 1~2   : 민간위탁 업체선정

- ‘16. 3.18   : 도시공원 조례시행규칙 일부개정(중랑캠핑숲 이용료 신설)

- ‘16. 3~4   : 시범운영 및 시설개장

북악산도시자연공원(성북지구) 청소년 체험의 숲 조성

- ‘15. 1~3   : 실시계획인가 (’06.7월 공원조성계획(변경) 결정)

- ‘15. 4~‘16.7 : 보상계획공고 및 감정평가, 보상협의(소유권 이전)

- ‘16. 3       : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

- ‘16. 5. 31  : 기본계획 검토보고회 개최

- ‘16. 7. 15  : 문화재위원 등 사업방향 자문시행 1회

- ‘16. 9. 23  : 사업방향 검토 자문시행 2회

※ 사업지 내 서울성곽 세계문화유산 등재에 따른 시설종류, 시설범위 조정검토

및 관련기관 협의

Ⅳ		2017년 추진계획

북악산도시자연공원(성북지구) 청소년 체험의 숲 조성 - 이월사업

- 사업규모 : 15,000㎡ (시설규모 2,000㎡)

- 사업기간 : 2016. 1 ~ 2017.12월

- 사 업 비 : 1,300백만원 (설계비 53, 공사비 1,238, 시설부대비 7, 사무관리비 2)

- 사업내용 : 체험시설, 운영센터, 쉼터 설치 등

- 추진기관 : 성북구청(공원녹지과)

- 추진일정

· ‘17. 1~ 2 : 사업추진계획 수립, 성곽 문화재 현상변경 검토

· ‘17. 2~ 6 : 기본 및 실시설계 용역시행, 공원조성계획(변경) 결정

▶ 설계용역 중간, 최종보고회 실시(성북구→시)

▶ 건설기술(설계) 심의 이행(기본설계완료 시점)

· ‘17. 6~ 7 : 계약심사 및 공사발주

· ‘17. 7~11 : 공사시행 및 운영방법(공단위탁, 민간위탁 등) 결정

· ‘17. 12~  : 시험운영 및 시설개장

관악산도시자연공원(신림계곡지구) 청소년 체험의 숲 조성

- 사업규모 : 10,000㎡

- 사업기간 :  2017. 1 ~ 2017.12월

- 사 업 비 : 1,500백만원(설계비 73, 공사비 1,418 시설부대비 7, 사무관리비 2)

- 사업내용 : 체험시설, 운영센터, 쉼터 설치 등

- 추진기관 : 관악구청(공원녹지과)

- 추진일정

· ‘17. 1~ 2 : 사업추진계획 수립, 기술용역타당성심사 및 설계용역 발주

· ‘17. 2~ 6 : 기본 및 실시설계 용역시행, 공원조성계획(변경) 결정

▶ 착수보고회, 기본설계용역 보고회, 설계용역 최종보고회 실시(관악구→시)

▶ 건설기술(설계) 심의 이행(기본설계완료 시점)

· ‘17. 6~ 7 : 계약심사 및 공사발주

· ‘17. 7~11 : 공사시행 및 운영방법(공단위탁, 민간위탁 등) 결정

· ‘17. 12~  : 시험운영 및 시설개장

Ⅴ		행정사항

기술용역타당성 심사 및 계약심사 결과 등에 따라 예산 재배정

원활한 사업추진을 위한 기관별 역할분담 추진

【 공원녹지정책과 】

- 청소년 체험의 숲 준공 이후 운영 및 관리 지도감독 총괄

- 도시공원 조례 시행규칙(이용료 신설) 일부개정 업무 등

【 공원조성과 】

- 청소년 체험의 숲 조성예산 확보(예산재배정) 및 사업추진계획 수립

- 청소년 체험의 숲 조성공사 관리 및 지원업무 등

【 관할구청 】

- 청소년 체험의 숲 설계용역 및 조성공사 시행

- 분기별 추진경과 보고 및 사업완료 시 최종 보고(붙임1)

- 공원조성계획(변경) 결정 및 실시계획 인가 업무 추진

- 세부 유지관리지침 마련 및 이용료 산정·운영방법(업체선정 등) 결정

- 도시공원 조례 시행규칙 일부개정(안) 수립 및 의뢰

- 2018년도 청소년 체험의 숲 유지관리예산 확보방안 마련 등

붙임 : 1)사업추진보고(양식) 1부.

2)대상지별 현황 각1부.  끝.