함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	(수정)통합취수장 유해화학물질 장외영향평가 및사고대비물질 위해관리계획서 작성 용역 준공기한 연기 의뢰

1. 원수관리과-339(2017. 2.9.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 ‘통합취수장 유해화학물질 장외영향평가 및사고대비물질 위해관리계획서 작성 용역’의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 건    명 : 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역(일반용역)

나. 계 약 자 : 한국산업안전관리원(주)  이상용

다. 계약금액 : ￦30,000,000

라. 용역기간

당 초	변 경
2016. 9. 7.~ 2017. 2.15.	2016.9.7.~ 2017.6.30.

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비(2016년 이월 예산)

붙임 1. 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	원수관리과장
지방공업사무관대우	정번석		원수관리과장	02/09 손주옥
협조자
시행	원수관리과-346	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (삼패동 598번지)	/
전화	02-3146-5229	/전송	02-3146-2238	/	marsufoo@seoul.go.kr	/	대시민공개